Утверждена
Распоряжением ОАО "РЖД"
от 28 декабря 2023 г. N 3403/р

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И УЧЕТА "ОКОН" ДЛЯ РАБОТ НА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОАО "РЖД"

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок планирования, предоставления использования и учета "окон" для проведения ремонтных и строительно-монтажных работ и работ по текущему содержанию устройств инфраструктуры на железных дорогах ОАО "РЖД", выполняемых силами филиалов ОАО "РЖД", подконтрольных ОАО "РЖД" обществ и иных хозяйственных обществ с участием ОАО "РЖД", сторонних и подрядных организаций (далее - работы на инфраструктуре).
1.2. Настоящая Инструкция предназначена для применения аппаратом управления, филиалами ОАО "РЖД" и их структурными подразделениями; подконтрольными ОАО "РЖД" обществами, и иными хозяйственными обществами с участием ОАО "РЖД", подрядными и сторонними организациями (в соответствии с заключенными договорами) при проведении работ на инфраструктуре ОАО "РЖД".
1.3. На железных дорогах (с учетом местных условий) с целью обеспечения надлежащего уровня взаимодействия между причастными подразделениями филиалов ОАО "РЖД" в вопросах планирования, предоставления и использования "окон", Технологической службой железной дороги организуется разработка местной инструкции, конкретизирующей порядок применения настоящей Инструкции с учетом местных условий (далее - Местная инструкция), которая не должна противоречить требованиям настоящей Инструкции.
Местные инструкции утверждаются приказами начальников железных дорог.
1.4. При полигонной модели управления (для восточного полигона) в целях обеспечения взаимодействия с железными дорогами, причастными функциональными филиалами ОАО "РЖД" и их структурными подразделениями (подразделениями), осуществляющими деятельность в границах железных дорог полигона, центром управления перевозками на восточном полигоне разрабатывается нормативный документ ОАО "РЖД", определяющий особенности планирования "окон" в условиях полигонного управления. Данный документ согласовывается с первыми заместителями начальников железных дорог в границах восточного полигона, руководителями функциональных филиалов ОАО "РЖД" и утверждается заместителем генерального директора ОАО "РЖД" - начальником Центральной дирекции управления движением.

2. Принятые сокращения и обозначения

АПК ЭЛЬБРУС - автоматизированная система построения прогнозных энергосберегающих графиков движения поездов на основе имитационного моделирования.
АС АПВО-2 - автоматизированная система "Планирование, учет и анализ проведения "окон" и выполнения хозяйственной работы";
АС АПВО-2 ГП - Подсистема годового планирования АС АПВО-2;
АС АПВО-2 МП - Подсистема месячного планирования АС АПВО-2;
АС АПВО-2 ОП - Подсистема оперативного планирования АС АПВО-2;
АС ГИД НП - Автоматизированная система ведения графика исполненного движения нового поколения;
ВГДП - вариантный график движения поездов;
ИСУЖТ ВГДП - автоматизированная система "Построение вариантных графиков движения поездов на основе директивного плана ремонтно-путевых работ";
ВСП - верхнее строение пути;
НГДП - нормативный график движения поездов;
ГИД "Урал-ВНИИЖТ" - автоматизированная система ведения и анализа графика исполненного движения поездов;
Д - дирекция управления движением - структурное подразделение Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО "РЖД";
ДИ - дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД";
ДИЗТер - заместитель начальника дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" (по территориальному управлению);
Директивный план-график - Директивный план-график производства работ на инфраструктуре ОАО "РЖД";
ДИСЗ - служба заказчика дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД";
ДИ ЦУСИ - центр управления содержанием инфраструктуры дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД";
ДКРС - Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиал ОАО "РЖД";
ДКРЭ - Дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиал ОАО "РЖД";
ДКС - дирекция по капитальному строительству - структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО "РЖД";
ДКСС - Дирекция по строительству сетей связи - филиал ОАО "РЖД";
ДНЦ - диспетчер поездной;
ДОК - отдел предоставления "окон" и взаимодействия с инфраструктурой дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО "РЖД";
ДРП - Дирекция по ремонту пути - структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО "РЖД";
ДС - начальник железнодорожной станции;
ДСП - дежурный по железнодорожной станции;
ДЦС - центр организации работы железнодорожных станций - структурное подразделение дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО "РЖД";
ДЦУП - диспетчерский центр управления перевозками дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО "РЖД";
ДПО - дирекция пассажирских обустройств - структурное подразделение Центральной дирекции пассажирских обустройств - филиала ОАО "РЖД";
ЕК АСУИ - единая корпоративная автоматизированная система управления инфраструктурой;
ЖАТ - железнодорожная автоматика и телемеханика;
Журнал формы ДУ-46 - журнал осмотра железнодорожных путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети;
Журнал формы ДУ-58 - журнал диспетчерских распоряжений;
ИССО - искусственные сооружения;
ИЧ - дистанция инфраструктуры - структурное подразделение Дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД";
Календарный план-график - календарный план-график производства работ на инфраструктуре ОАО "РЖД";
Л - служба (отдел) пассажирских перевозок железной дороги - филиала ОАО "РЖД";
Н - начальник железной дороги - филиала ОАО "РЖД";
НЗ-1 - первый заместитель начальника железной дороги - филиала ОАО "РЖД";
НЗЛ - заместитель начальника железной дороги - филиала ОАО "РЖД" - начальник службы пассажирских перевозок;
НЗТер - заместитель начальника железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (по территориальному управлению);
НОД-4 - Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги - филиал ОАО "РЖД";
НС - дирекция связи - структурное подразделение Центральной станции связи - филиала ОАО "РЖД";
НТЭ - дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД";
ОАО "РЖД" - открытое акционерное общество "Российские железные дороги";
ОТД - организационно-технологическая документация;
П - служба пути дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД";
ПЗ ИССО - заместитель начальника службы пути дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" курирующий вопросы содержания и ремонта искусственных сооружений и земляного полотна;
ПМС - путевая машинная станция - структурное подразделение дирекции по ремонту пути - структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО "РЖД";
ПОС - проект организации строительства: раздел проектной документации, содержащий основные организационно-технологические решения, определяющие очередность возведения объекта, сроки и соответствующие объемы строительства, потребность в ресурсах и общую технологию строительных работ. Требования к содержанию и оформлению ПОС устанавливаются условиями договора;
ППР - проект производства работ: организационно-технологический документ, описывающий применяемые обоснованные организационно-технологические решения для обеспечения оптимальной технологичности производства и безопасности соответствующих видов работ, а также экономической эффективности капитальных вложений;
ПСД - проектно-сметная документация;
ПЧ - дистанция пути - структурное подразделение дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД";
ПЧ ИССО - дистанция инженерных сооружений - структурное подразделение дирекции инфраструктуры - регионального структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД";
РДЖВ - региональная дирекция железнодорожных вокзалов - структурное подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО "РЖД";
РДКРЭ - Дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - структурное подразделение Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД";
РЦС - региональный центр связи - структурное подразделение Дирекции связи - структурного подразделения Центральной станции связи - филиала ОАО "РЖД";
РЦКУ - региональный центр корпоративного управления (железная дорога - филиал ОАО "РЖД");
ССПС - специальный самоходный подвижной состав;
СЦБ - сигнализация, централизация и блокировка;
СПиУИ - Система планирования и учета инвестиций;
СМР - строительно-монтажные работы;
Т - дирекция тяги - структурное подразделение Дирекции тяги - филиала ОАО "РЖД";
ТС - технологическая служба железной дороги - филиала ОАО "РЖД";
ТЭ - Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД";
ТЧЭ - эксплуатационное локомотивное депо - структурное подразделение дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО "РЖД";
ЦД - Центральная дирекция управления движением - филиал ОАО "РЖД";
ЦДИ - Центральная дирекция инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД";
ЦДОК - отдел разработки и предоставления "окон" Управления движения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО "РЖД";
ЦДРП - Центральная дирекция по ремонту пути - филиал ОАО "РЖД";
ЦЖД - Департамент управления бизнес-блоком "Железнодорожные перевозки и инфраструктура";
ЦК - Центральная комиссия ОАО "РЖД" по координации работы функциональных филиалов ОАО "РЖД" и рабочих групп железных дорог при планировании и организации ремонтно-строительных работ в ОАО "РЖД";
ЦЛ - Департамент пассажирских перевозок;
ЦУКС - Департамент капитального строительства;
ЦУП полигона - центр управления перевозками на полигоне - структурное подразделение (подразделение) Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО "РЖД";
ЦУСИ - центр управления содержанием инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД";
ЦУСИ полигона - Центр управления содержанием инфраструктуры на восточном полигоне - подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД";
Ш - служба автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД";
ШЧ - дистанция сигнализации, централизации и блокировки - структурное подразделение дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД";
ЭЦП - электронная цифровая подпись;
ЭЧ - дистанция электроснабжения - структурное подразделение дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД".

3. Термины и определения

Акт-допуск на производство ремонтных и строительно-монтажных работ - документ, оформленный на бланке установленной формы, подписанный полномочными представителями участвующих сторон, определяющий условия производства работ на территории (объекте) подразделения ОАО "РЖД", констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников и безопасность производства работ, являющийся письменным разрешением на проведение работ подрядчиком/проектировщиком.
Вариантный график движения поездов - график движения поездов, разрабатываемый на период времени ограничения движения в связи с предоставлением "окон" на железнодорожной инфраструктуре.
Время начала "окна" - время проверки приказа ДНЦ о фактически состоявшемся закрытии перегона (пути перегона) для движения поездов (или закрытия для движения электроподвижного состава) для производства работ на инфраструктуре; при производстве работ на станционных путях - время проставления ДСП подписи в графе 3 журнала формы ДУ-46, разрешающей производство работ.
Время окончания "окна" - время проверки приказа ДНЦ об открытии перегона (пути перегона) для движения поездов (или восстановлении движения электроподвижного состава по окончании работ со снятием напряжения с контактной сети); при производстве работ на станционных путях - время проставления ДСП подписи в графе 12 журнала формы ДУ-46 об окончании работ.
Директивный план-график - основной документ, утвержденный распоряжением ОАО "РЖД", устанавливающий этапность выполнения и объемы работ по капитальному ремонту, реконструкции, новому строительству и текущему содержанию объектов инфраструктуры сети железных дорог на год, количество и продолжительность "окон", необходимых для выполнения этих работ на определенных перегонах и станциях (путях или объектах).
Длительное закрытие (перегона, пути перегона, станционного пути) - "окно", предоставляемое для ремонта, реконструкции или строительства железнодорожной инфраструктуры, продолжительностью более 24 часов.
Единый руководитель работ - назначенное в установленном порядке должностное лицо структурного подразделения линейного уровня управления функционального филиала ОАО "РЖД" для координации работ, проводимых всеми исполнителями в период предоставления совмещенного "окна" на инфраструктуре.
Заказчик работ - структурное подразделение филиала ОАО "РЖД", организующее подготовку проектной документации для работ на инфраструктуре, финансирование и приемку работ.
Заказчик "окна" - структурное подразделение (подразделение) функционального филиала ОАО "РЖД" регионального или линейного уровня управления (подразделение-исполнитель), формирующее проекты заявок на "окна" по установленной форме в соответствующем модуле АС АПВО-2.
Заявка, поданная с нарушением срока - заявка на проведение работ на инфраструктуре, сформированная заказчиком "окна" позднее 10.00 часов местного времени за 4 суток (на участках обращения высокоскоростных поездов - за 6 суток) до начала "окна".
Исполнитель работ - подразделение ОАО "РЖД" или подрядная организация, определенная в установленном порядке заказчиком работ для выполнения работ на инфраструктуре, либо сторонняя организация.
Календарный план-график производства работ на инфраструктуре ОАО "РЖД" - график выполнения работ на инфраструктуре, разработанный и утвержденный на железной дороге на предстоящий период, определяющий периодичность, количество и продолжительность предоставления "окон" на определенных перегонах и станциях (путях или объектах).
Местная инструкция - документ, конкретизирующий порядок применения отдельных положений настоящей Инструкции с учетом местных условий, утвержденный распорядительным документом начальника железной дороги, не противоречащий требованиям настоящей инструкции.
Нерациональное использование "окна" - допущенные случаи отказа, отмены, срыва, передержки сокращения продолжительности "окна" (за исключением случаев досрочного завершения работ) от утвержденного НЗ-1 "окна" или невыполнения запланированного объема работ.
"Окно" - время, в течение которого прекращается движение поездов по перегону, отдельным путям перегона или путям железнодорожной станции для производства работ на инфраструктуре.
"Окно" аварийное - "окно", предоставляемое вне зависимости от поездной обстановки на основании уведомления работника соответствующего подразделения диспетчеру поездному (дежурному по железнодорожной станции) для устранения отказа в работе технических средств или последствий инцидента, представляющего угрозу безопасности движения поездов, жизни и здоровью людей.
"Окно" большой продолжительности - "окно" продолжительностью свыше 8 часов на двухпутных и многопутных участках и свыше 6 часов на однопутных участках.
"Окно" внеплановое - "окно" для выполнения работ на инфраструктуре (за исключением "окна" технологического), предоставленное в сутки, отличные от запланированных в месячном плане, или потребность в выполнении которого возникла сверх утвержденного месячного плана.
"Окно" глухое - время, в течение которого прекращается движение всех поездов, кроме хозяйственных, задействованных в производстве работ.
"Окно" совмещенное - "окно", в течение которого выполняются работы на объектах инфраструктуры, расположенных на одном пути перегона или станции несколькими исполнителями, под руководством единого руководителя работ, при этом работы могут быть технологически не связаны между собой и иметь разную продолжительность выполнения.
"Окно" створовое - период времени в вариантном графике движения поездов, в течение которого прекращается движение на поездоучастке при предоставлении "окна" наибольшей продолжительности (лимитирующего "окна"), обеспечивающий минимальный съем поездов.
"Окно" технологическое (технологический створ) - время, в течение которого прекращается движение поездов по перегону, отдельным путям перегона или путям железнодорожной станции, предусмотренное НГДП [24], предоставляемое с периодичностью и в порядке, установленном владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования).
"Окно" утвержденное - "окно", прошедшее процедуру рассмотрения, согласования и утверждения в установленном в настоящей Инструкции порядке и посредством соответствующей подсистемы АС АПВО-2.
Организационно-технологическая документация - документация (в том числе в составе информационной модели объекта), содержащая организационно-технологические решения, расчеты, мероприятия и требования по выполнению соответствующих видов СМР, разрабатываемая в целях обеспечения технологически эффективного, экономически оптимизированного и безопасного производства соответствующих видов работ [28]. К ОТД также относятся: ППР, ТНК, технологический процесс.
Отзыв "окна" - факт отказа исполнителя работ от утвержденного "окна" не позднее 12 часов (местное время) предшествующих суток.
Отказ от "окна" - факт отказа исполнителя работ от утвержденного "окна" с 12 часов (местное время) предшествующих суток до 8 часов до начала "окна".
Отмена "окна" - факт непредоставления утвержденного "окна" ввиду форс-мажорных обстоятельств и (или) событий, связанных с нарушением безопасности движения, а также в целях стабилизации эксплуатационной обстановки по зарегистрированному указанию (телеграмма, приказ заместителей генерального директора ОАО "РЖД", Н и НЗ-1).
Паспорт перегона (станции) - единая форма паспорта перегона (станции) для выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ в режиме длительных закрытий.
Передержка "окна" - случай окончания "окна" позже запланированного времени на 6 минут и более от времени окончания "окна", зафиксированного в приказе ДНЦ.
Письменное разрешение на производство работ - телеграмма-разрешение и (или) оперативный приказ на предоставление "окон".
Подрядная организация (далее также - Подрядчик) - физическое или юридическое лицо, которое выполняет ремонтные и строительно-монтажные работы по договору подряда, наряд-заказу, и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Оперативный приказ на предоставление "окон" - распорядительный документ, содержащий перечень предоставляемых "окон" на планируемый период, согласованный причастными подразделениями и утвержденный НЗ-1 или лицом, его замещающим.
Региональная рабочая группа - рабочий орган, создаваемый из числа уполномоченных руководителей региональных подразделений функциональных филиалов ОАО "РЖД" под председательством НЗ-1 в целях координации работы по планированию и подготовке к проведению работ на инфраструктуре ОАО "РЖД" в границах железной дороги, а также контроля исполнения работ в "окно".
Ремонтные работы - комплекс работ восстановительного характера, включающий в себя организационно-технические мероприятия по устранению физического и морального износа объектов инфраструктуры, не связанных с изменением их основных технических показателей или назначением, с увеличением балансовой стоимости объекта основных средств.
Руководитель работ - назначенное в установленном порядке должностное лицо, на которое возложено руководство работами на объектах и устройствах инфраструктуры, обеспечивающее соблюдение технологии проведения "окна", требований охраны труда и безопасного производства работ, своевременное окончание работ и безопасность движения поездов по фронту выполняемых работ в период предоставления "окна".
Срыв "окна" - случай несостоявшегося утвержденного "окна" по причине нарушения технологических процессов или неготовности к производству работ в "окно", допущенный причастными подразделениями или организациями, а также случай отказа исполнителя работ от проведения "окна" позднее 8 часов до начала "окна".
Сторонняя организация - организация, выполняющая какие-либо работы для собственных нужд на объекте инфраструктуры ОАО "РЖД" или рядом с объектами инфраструктуры ОАО "РЖД", а также в полосе отвода железной дороги.
Строительно-монтажные работы - работы, выполняемые подрядными организациями (по договорам и наряд-заказам с заказчиком работ) на объектах строительства, реконструкции и технического перевооружения.
Телеграмма-запрос - телеграмма, направленная в установленном в ОАО "РЖД" порядке, для согласования предоставления "окна" большой продолжительности или длительного закрытия для производства работ на железнодорожной инфраструктуре, не соответствующего Директивному плану, и (или) корректировки расписания движения пассажирских поездов в пределах двух и более железных дорог.
Телеграмма-согласование - телеграмма ОАО "РЖД", согласовывающая предоставление "окна" большой продолжительности или длительного закрытия для работ на железнодорожной инфраструктуре, несоответствующих Директивному плану, и (или) корректировку расписания движения пассажирских поездов в пределах двух и более железных дорог.
Телеграмма-разрешение - телеграмма НЗ-1, разрешающая предоставление "окна" для производства работ на инфраструктуре.
Территориальная рабочая группа - постоянно действующий рабочий орган, создаваемый из числа уполномоченных работников подразделений функциональных филиалов ОАО "РЖД" в границах территориального управления под общим руководством НЗТер (НОД-4 для Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО "РЖД") в целях координации работы по планированию и организации работ в "окно" на железнодорожной инфраструктуре в границах территориального управления.
Электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, полученный с помощью криптографического преобразования информации, позволяющий подтвердить авторство электронного документа и факт подписания электронного документа (неотказуемость).

4. Нормативные документы

При разработке настоящей Инструкции учтены требования и использованы ссылки на следующие нормативные документы:
1. Межгосударственный стандарт. Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения. ГОСТ 34530-2019, введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2019 г. N 748-ст.
2. Положение об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств, железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО "РЖД", утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 7 ноября 2018 г. N 2364/р.
3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22 июля 2019 г. N 1556/р "Об образовании Центральной комиссии по координации работы функциональных филиалов ОАО "РЖД" и рабочих групп железных дорог при планировании и организации ремонтных и строительно-монтажных работ в ОАО "РЖД".
4. Порядок и сроки проведения аттестации работников железнодорожного транспорта, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования, а также порядок формирования аттестационной комиссии, утвержденный приказом Минтранса России от 11 июля 2012 г. N 231.
5. Положение о проведении аттестации работников организаций, не входящих в структуру ОАО "РЖД", производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО "РЖД", утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 28 июня 2017 г. N 1221р.
6. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 14 декабря 2016 г. N 2540р.
7. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ N ЦШ-530-11, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 20 сентября 2011 г. N 2055р.
8. Правила технического содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 18 августа 2021 г. N 1812/р.
9. Порядок разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО "РЖД", утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 29 июля 2019 г. N 1610/р.
10. Классификатор случаев и причин отмен, отказов, срывов и передержек "окон", утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 29 апреля 2020 г. N 952/р.
11. Правила назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 17 декабря 2021 г. 2888/р.
12. Единый паспорт перегона (станции) для выполнения ремонтно-путевых работ на инфраструктуре ОАО "РЖД" в режиме длительных закрытий, утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 3 марта 2020 г. N 475/р.
13. Регламент организации ремонтных работ в период длительно закрытых перегонов, утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 7 апреля 2014 г. N 872р.
14. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. N 250.
15. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации (приложение N 1 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. N 250).
16. Инструкция по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации (приложение N 2 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации ПТЭ, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. N 250).
17. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 14 ноября 2016 г. N 2288/р.
18. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 30 декабря 2015 г. N 3168р.
19. Типовой регламент взаимодействия территориального отдела инфраструктуры дирекции инфраструктуры с региональными структурными подразделениями ОАО "РЖД", утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 7 марта 2018 г. N 457/р.
20. Регламент взаимодействия Центральной дирекции инфраструктуры и Центральной дирекции по ремонту пути, утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 20 июля 2018 г. N 1540/р.
21. Регламент взаимодействия участников строительства, реконструкции, ремонта и владельцев объектов инфраструктуры для обеспечения сохранности кабельных сетей, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи, утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 24 мая 2017 г. N 986р.
22. Методика определения оптимальной продолжительности технологического окна для производства работ на инфраструктуре в зависимости от места проведения ремонта и грузонапряженности полигона, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 19 сентября 2011 г. N 2062р.
23. Технология организации работы локомотивов в хозяйственном движении при модернизации, производстве капитального ремонта и текущего содержания объектов инфраструктуры, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 4 декабря 2013 г. N 2671р.
24. Инструкция по разработке графика движения поездов в ОАО "РЖД", утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 31 декабря 2015 г. N 3201р.
25. Методические указания по оценке целесообразности устройства путевых постов и оптимальной протяженности временно однопутного перегона при предоставлении "окон" для ремонтно-путевых работ, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 4 апреля 2011 г. N 706р.
26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15 января 2018 г. N 49/р "Об образовании комиссии ОАО "РЖД" по контролю за предоставлением и использованием "окон" для ремонтных и строительно-монтажных работ".
27. Порядок организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в Холдинге "РЖД", утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 11 декабря 2019 г. N 2830/р.
28. СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004, утвержденный приказом Минстроя России от 24 декабря 2019 г. N 861/пр.
29. Порядок взаимодействия подразделений и филиалов ОАО "РЖД" при проведении капитального ремонта железнодорожного пути, предусмотренного инвестиционной программой ОАО "РЖД", выполняемого хозяйственным способом, утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 9 марта 2022 г. N 564/р.
30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20 декабря 2022 г. N 3378/р "Об утверждении типовой формы Временной инструкции, регламентирующей порядок организации движения поездов и производства маневров на железнодорожной станции в период выполнения ремонтных и строительных работ".
При использовании настоящей Инструкции действие ссылочных документов подлежит проверке в единой информационной базе ОАО "РЖД". Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании настоящего Порядка следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

5. Общие положения

5.1. Процессы планирования, предоставления и учета "окон" осуществляются с помощью подсистем АС АПВО-2: на стадии годового планирования - АС АПВО-2 ГП, на стадии месячного планирования - АС АПВО-2 МП, на стадии оперативного планирования - АС АПВО-2 ОП. Порядок действий пользователей для внесения данных при формировании заявок на "окна" в АС АПВО-2 определяется руководствами пользователя действующих подсистем.
5.2. К работам, для выполнения которых требуется предоставление "окон", относятся все работы, требующие по своему характеру прекращения движения всех поездов, кроме хозяйственных.
В случае отказа в работе технического средства или возникновения инцидента (автомобильная авария на железнодорожном переезде, пожар, падение на путь дерева и т.п.), представляющего угрозу безопасности движения, жизни и здоровью людей, на основании уведомления работника соответствующего подразделения "ОАО "РЖД" диспетчеру поездному о закрытии объекта инфраструктуры для движения, для ликвидации последствий инцидента, устранения отказа технического средства или ограничения скорости движения поездов 40 км/ч и менее, вне зависимости от эксплуатационной обстановки, предоставляется аварийное "окно".
Порядок предоставления аварийных "окон" изложен в разделе 6.5 настоящей Инструкции.
5.3. К выполнению работ на инфраструктуре ОАО "РЖД" допускаются специализированные подразделения ОАО "РЖД". Подрядные и сторонние организации допускаются при получении в установленном порядке акта-допуска на выполнение соответствующих работ [2].
5.4. Работы по реконструкции, строительству и ремонту объектов инфраструктуры ОАО "РЖД" должны выполняться в соответствии с ОТД и проектной документацией, технологическими (в том числе - типовыми) процессами, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
5.5. В целях координации работы функциональных филиалов ОАО "РЖД" при планировании и организации работ на инфраструктуре, повышения ответственности за предоставление и использование "окон", а также снижения их влияния на эксплуатационную работу, создается Центральная комиссия ОАО "РЖД" по координации работы функциональных филиалов ОАО "РЖД" и рабочих групп железных дорог при планировании и организации ремонтных и строительно-монтажных работ в ОАО "РЖД" (далее - ЦК). Руководитель, состав и Положение о Центральной комиссии утверждаются распоряжением ОАО "РЖД" [3].
5.6. На железных дорогах и в границах территориальных управлений в целях своевременного и качественного выполнения объемов работ на инфраструктуре, освоения инвестиционных средств, технического перевооружения, ремонта и текущего содержания объектов инфраструктуры, эффективного использования путевой техники, повышения уровня безопасности движения поездов и обеспечения пропуска планового вагонопотока в период предоставления "окон", а также обеспечения внутреннего взаимодействия и координации работы региональных подразделений функциональных филиалов ОАО "РЖД" и их структурных подразделений при организации и планировании работ на инфраструктуре формируются постоянно действующие рабочие группы: Региональная (под председательством НЗ-1) и Территориальные (под председательством НЗТер). При рассмотрении "окон" большой продолжительности и длительных закрытий в состав Территориальных рабочих групп включаются уполномоченные работники аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов железной дороги.
Состав рабочих групп и порядок их работы определяются распорядительными документами железных дорог.
5.7. Основными функциями Территориальных рабочих групп являются:
рассмотрение технологии производства работ в соответствии с ППР и технологическими процессами, хода выполнения подготовительных мероприятий;
проверка фактического обеспечения работ тяговыми ресурсами, специальным подвижным составом;
проверка обеспечения планируемых объемов работ необходимыми материально-техническими ресурсами;
рассмотрение технической готовности к проведению "окон" смежных путей и двух соседних перегонов в соответствии с Регламентом [13], выбор мест хранения материалов, необходимых для проведения работ;
рассмотрение готовности устройств контактной сети, связи, СЦБ;
определение мест дислокации путевых машин и механизмов, порядок передислокации к месту работ и обратно, а также порядок выезда их на "окно";
определение руководителей работ (в т.ч. единого руководителя работ), ответственных за безопасное производство работ, технологию производства работ, представителей подразделений, ответственных за исправное состояние технических средств;
определение уполномоченного представителя подразделения ОАО "РЖД", ответственного за безопасность движения поездов (при необходимости);
разбор случаев нарушения порядка согласования причастными структурными подразделениями заявок на "окна";
формирование проектов календарных планов-графиков предоставления "окон" на месяц в границах территориального управления, определение возможности для организации совмещенных "окон" и приоритетности предоставления "окон";
проведение анализа использования "окон" в границах территориального управления, рассмотрение выполнения календарных планов-графиков, разработка мер по восполнению допущенного отставания;
разбор причин срывов, отмен, отказов, отзывов и передержек "окон", случаев несвоевременного предоставления, не выполнения запланированной выработки в "окно", а также разработка мер, направленных на повышение технологической дисциплины.
5.8. Основными функциями Региональной рабочей группы являются:
рассмотрение технологии производства работ в соответствии с ППР и технологическими процессами, хода выполнения подготовительных мероприятий;
формирование календарных планов-графиков (годового, месячного) на основе проектов разработанных Территориальными рабочими группами и их согласование в едином створе с соседними железными дорогами (полигоном сети железных дорог);
выработка предложений по выполнению календарных планов-графиков;
рассмотрение итогов выполнения календарных планов-графиков, разработка мер по восполнению допущенного отставания;
формирование комплексной программы мероприятий, направленных на повышение пропускной способности в период предоставления "окон" (далее - Мероприятия);
разбор спорных случаев: срывов, отмен, отказов, отзывов и передержек "окон", случаев несвоевременного предоставления, нарушений вариантного графика движения поездов и сокращения продолжительности "окон", а также разработка мер, направленных на повышение технологической дисциплины;
формирование и обоснование предложений по включению в инвестиционную программу работ по комплексной реконструкции инфраструктуры.
5.9. При полигонной модели управления начальник ЦУП полигона определяет руководителей ЦУП полигона, закрепленных за каждой из железных дорог полигона, ответственных за координацию планирования, организации, предоставления "окон", выполнения Директивного плана-графика и календарных планов-графиков на месяц в границах соответствующей железной дороги, а также обеспечения взаимодействия железных дорог с ЦУП полигона.
5.10. В случае выполнения работ на одном объекте (перегон или железнодорожная станция) несколькими исполнителями в совмещенные "окна" назначается единый руководитель работ. Единый руководитель работ по должности не ниже заместителя начальника линейного структурного подразделения филиала ОАО "РЖД" (лица, его замещающего) - определяется Территориальной рабочей группой.
Запрещается назначение единым руководителем работ лиц, не являющихся работниками ОАО "РЖД".
В "окна" по обслуживанию объектов инфраструктуры продолжительностью 4 часа и менее допускается назначение единым руководителем работ руководителей среднего командного состава в должности не ниже начальника участка пути, старшего дорожного мастера, начальника района контактной сети, начальника участка дистанции СЦБ, прошедших аттестацию. Исключение составляют работы, указанные в Приложении N 5.
5.11. При проведении работ на инфраструктуре руководителями работ могут являться работники ОАО "РЖД" и работники подрядных организаций. Данные работники должны быть аттестованы в соответствии с установленным Порядком [4] или Положением [5].
В случае, когда руководителем работ является аттестованный в соответствии с Положением [5] работник подрядной организации, ответственным за обеспечение безопасности движения поездов, сохранность находящихся в зоне производства работ объектов инфраструктуры назначается работник ОАО "РЖД".
Перечень работ и должностных лиц, имеющих право руководить работами, определены Инструкцией [6], Инструкцией [7] и Правилами [8].
5.12. Порядок получения подразделениями ОАО "РЖД" или подрядными строительными организациями разрешающих документов на производство работ в зоне действия технических сооружений и устройств железных дорог и порядок контроля за производством работ определены Положением [2].

6. Планирование "окон" для выполнения работ
на инфраструктуре

6.1. Порядок разработки Директивного плана-графика
на предстоящий год

6.1.1. Основанием для разработки Директивного плана-графика предоставления "окон" для работы на инфраструктуре ОАО "РЖД" на предстоящий год являются документы со среднесрочным (на 3 года) и краткосрочным (на 1 год) горизонтом планирования:
инвестиционная программа ОАО "РЖД";
перечень объектов строительства, сформированный на основании инвестиционной программы ОАО "РЖД" из СПиУИ, запланированных к проведению СМР на объектах нового строительства;
программа ремонта объектов инфраструктуры - титульные участки (ЦП, ЦШ, ТЭ);
расчет поездной модели с учетом схемы предоставления "окон", обеспечивающей максимальное освоение программы ремонта и строительства, объемов перевозок по направлениям сети ОАО "РЖД". Расчет производится научной организацией на основании отдельной методики.
Взаимодействие подразделений ОАО "РЖД" при организации и проведении капитального ремонта железнодорожного пути, предусмотренного инвестиционной программой ОАО "РЖД", выполняемого хозяйственным способом, определяется Порядком [29].
6.1.2. Директивный план-график является основным документом, на основании которого осуществляется реализация годовых объемов ремонта, строительства и текущего содержания устройств железнодорожной инфраструктуры. Директивный план-график формируется из проектов календарных планов-графиков, разработанных на железных дорогах, рассмотренных и согласованных ЦК. При разработке Директивного плана-графика учитывается синхронизация сроков выполнения ремонтов производственных мощностей промышленных предприятий грузовладельцев с работами на инфраструктуре ОАО "РЖД".
В Директивный план-график включаются следующие работы:
а) реконструкция и все виды ремонта железнодорожного пути;
б) укладка стрелочных переводов;
в) планово-предупредительная выправка пути и стрелочных переводов;
г) сплошная смена рельсов новыми в объеме Р;
д) работы по текущему обслуживанию пути и содержанию инфраструктуры из Перечня, согласно Приложению N 17;
е) реконструкция и ремонт земляного полотна и искусственных сооружений;
ж) реконструкция и ремонт объектов инфраструктуры хозяйства электроснабжения;
з) реконструкция и ремонт объектов инфраструктуры хозяйства автоматики и телемеханики;
и) реконструкция и ремонт пассажирских платформ;
к) реконструкция и ремонт объектов инфраструктуры хозяйства связи;
л) строительство и реконструкция объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;
м) другие работы, включаемые по решению Региональной рабочей группы, требующие предоставление "окна" продолжительностью свыше 4-х часов;
н) выполнение работ сторонними организациями по строительству, реконструкции или ремонту объектов инфраструктуры, не принадлежащих ОАО "РЖД", но расположенных в границах полосы отвода железной дороги (при наличии в период разработки Директивного плана-графика ранее поданного обращения на предоставление "окон").
В Директивный план-график включаются "окна" для подготовительных, основных, отделочных, заключительных работ, работ по переключению устройств ЖАТ. Также должны быть предусмотрены "окна" для выполнения работ на незавершенных фронтах ремонта и строительства объектов инфраструктуры прошлых лет.
Остальные работы по текущему содержанию инфраструктуры, для выполнения которых требуется предоставление "окон", предусматриваются на этапе месячного планирования.
6.1.3. Формирование проекта календарного плана-графика на год осуществляется Региональными рабочими группами с участием Территориальных рабочих групп.
6.1.4. Основанием и исходными данными для формирования проекта календарного плана-графика на год являются направляемые в Региональные рабочие группы следующие документы:
до 1 февраля года, предшествующего планируемому <1>, - распоряжение ЦДИ с утвержденными титульными участками ремонта пути с учетом актуализации до 30 июня (при необходимости) по результатам весеннего осмотра железнодорожного пути и сооружений;
до 31 марта года, предшествующего планируемому, - техническое задание ЦД с обозначением размеров передачи поездов, этапности предоставления "окон", оптимальной продолжительности предоставления "окон" и длительных закрытий с указанием "створов" по междорожным стыковым пунктам. Для формирования технического задания могут быть использованы расчеты, выполненные научной организацией;
до 31 июля года, предшествующего планируемому, - перечень участков и объектов ремонта устройств электроснабжения, представляемый Трансэнерго;
до 31 июля года, предшествующего планируемому, - распоряжение ОАО "РЖД", подготовленное ЦУКС, с утвержденными объектами ДКРС и ДКСС, на которых работы по ВСП запланированы к реализации структурными подразделениями ЦДРП;
до 31 июля года, предшествующего планируемому, - данные (перечень объектов строительства предстоящего года) из среднесрочной инвестиционной программы ОАО "РЖД" по полигонам дорог, программ развития и строительства железнодорожной инфраструктуры, направляемые региональными дирекциями и группами заказчика филиалов ОАО "РЖД" (ДКРС, ДКС), а также при наличии утвержденной проектной документации: календарный план выполнения СМР по каждому объекту и ведомость потребности в "окнах".
--------------------------------
<1> Здесь и далее по тексту настоящей Инструкции сроки обозначают данный день включительно.

На основании представленных исходных данных и предварительных расчетов продолжительности "окон", произведенных заказчиками "окон" для всех участков ремонта и строительства, Региональная рабочая группа до 31 августа года, предшествующего планируемому, рассматривает варианты технологии проведения работ, оптимальной продолжительности предоставления "окон" и длительных закрытий с учетом "створов" и этапности.
Нормы выработки на выполнение ремонтных работ и норматив годовой потребности в "окнах" для технического обслуживания и текущего ремонта устройств контактной сети приведены в приложениях N 15 и 13.
Территориальной и Региональной рабочими группами формируются Мероприятия, которые должны быть согласованы руководителями причастных подразделений функциональных филиалов ОАО "РЖД" и НЗТер, утверждаются НЗ-1 до 31 августа года, предшествующего планируемому.
Необходимые требования для разработки и реализации Мероприятий изложены в п. 8.1 настоящей Инструкции.
6.1.5. До 31 августа года, предшествующего планируемому, заявки на "окна" по всем титульным участкам ремонта, строительства и текущего содержания (согласно приложению N 17, при наличии) инфраструктуры ОАО "РЖД" вносятся в АС АПВО-2 ГП ответственными работниками региональных дирекций, входящими в состав Региональных рабочих групп.
6.1.6. До 30 сентября года, предшествующего планируемому, ЦД направляет в адреса НЗ-1 железных дорог и структурных подразделений филиалов ОАО "РЖД" телеграмму о проведении заседаний ЦК с рассмотрением проектов календарных планов-графиков ремонта и строительства и текущего содержания инфраструктуры ОАО "РЖД".
6.1.7. До 30 сентября года, предшествующего планируемому, региональные Д разрабатывают проект ВГДП по титульным участкам ремонта и строительства.
Необходимые требования для разработки ВГДП изложены в пункте 8.3 настоящей инструкции.
6.1.8. До 30 сентября года, предшествующего планируемому, Региональной рабочей группой разрабатывается проект календарного плана-графика, в котором предусматривается потребность всех причастных подразделений ОАО "РЖД", а также подрядных организаций в "окнах".
В указанные сроки при полигонной модели управления проекты календарных планов-графиков, согласованные НЗ-1 железных дорог, направляются в ЦУП полигона для согласования. Несогласованные ЦУП полигона проекты календарных планов-графиков возвращаются в Региональные рабочие группы железных дорог для внесения необходимых корректировок, после чего вновь направляются в ЦУП полигона.
6.1.9. В календарном плане-графике по возможности предусматриваются резервные дни предоставления "окон" для восполнения потерь объемов работ.
6.1.10. До 1 ноября года, предшествующему планируемому, информация по всем титульным участкам текущего содержания инфраструктуры и заявки на "окна" вносятся в АС АПВО-2 ГП ответственными работниками региональных подразделений функциональных филиалов ОАО "РЖД", входящими в состав Региональных рабочих групп с учетом разработанных ВГДП по титульным участкам ремонта и строительства согласно пункта 6.1.7.
6.1.11. В период с 1 октября по 10 ноября года, предшествующего планируемому, секретарь ЦК организовывает рассмотрение в ЦК железными дорогами проектов календарных планов-графиков ремонтных и строительно-монтажных работ и разработанных Мероприятий. В рассмотрении участвуют руководители причастных региональных дирекций (при полигонной модели управления дополнительно принимают участие руководители ЦУП, ЦУСИ (для восточного полигона), заместитель начальника ЦДИ по восточному полигону.
В период рассмотрения в ЦК производится согласование проектов календарных планов-графиков. Несогласованные документы дорабатываются Региональными рабочими группами железных дорог. Доработанные проекты календарных планов-графиков, подписанные НЗ-1, повторно направляются в ЦК для последующего рассмотрения и согласования.
До 14 ноября года, предшествующего планируемому, по результатам рассмотрения в ЦК ответственными работниками региональных подразделений функциональных филиалов ОАО "РЖД" производится корректировка данных в АС АПВО-2 ГП.
В период проведения корректировки данных в АС АПВО-2 ГП уполномоченными работниками ЦД, ЦДИ, ЦДРП, ЦУКС, ТЭ проводится проверка соответствия количества и продолжительности "окон" согласованным проектам календарных планов-графиков, а также размеров движения поездов согласно ВГДП.
До 19 ноября года, предшествующего планируемому, научная организация проводит имитационное моделирование работы сети железных дорог, по итогам которого предоставляет заключение в ЦК.
6.1.12. До 30 ноября года, предшествующего планируемому, по результатам рассмотрения, проведенного в ЦК, ее секретарем оформляется проект распоряжения об утверждении Директивного плана-графика.
6.1.13. До введения в действие графика движения и плана формирования поездов на предстоящий период (не позднее 9 декабря года, предшествующего планируемому) проект Директивного плана-графика предоставляется на утверждение первому заместителю генерального директора ОАО "РЖД".
После утверждения Директивного плана-графика первым заместителем генерального директора ОАО "РЖД" документ рассылается причастным, ЦДОК указывает регистрационный номер распоряжения ОАО "РЖД" в форме Директивного плана-графика в АС АПВО-2 ГП.
6.1.14. Схематический порядок разработки Директивного плана-графика на предстоящий год представлен в Приложении N 1.
Образец календарного плана-графика "окон" на предстоящий год представлен в Приложении N 11.
6.1.15. В исключительных случаях при изменении годовых объемов ремонтных и строительно-монтажных работ или в связи с явлениями природного характера, повлекшими отставание от графика начала работ (затянувшаяся зима) или значительного периода остановки работ (стихийное бедствие), филиал ОАО "РЖД" - заказчик работ направляет на решение председателю ЦК обоснованные и аргументированные предложения по корректировке утвержденного Директивного плана-графика текущего года. Внесение изменений в Директивный план-график допускается не чаще 1 раза в квартал.
На основании принятого положительного решения ЦК о необходимости корректировки Директивного плана-графика ее секретарь в течение 3 рабочих дней готовит и, после согласования, в установленном порядке предоставляет на утверждение первому заместителю генерального директора ОАО "РЖД" распоряжение об организации внесения изменений в утвержденный Директивный план-график, в котором указываются сроки проводимой корректировки.
На основании данного распоряжения НЗ-1 организует формирование, рассмотрение и согласование Региональной рабочей группой проекта откорректированного календарного плана-графика, рассмотрение технологии производства работ по вновь включаемым фронтам работ, разработку дополнительного комплекса мер по обеспечению выполнения работ.
Утвержденный НЗ-1 проект скорректированного календарного плана-графика производства работ текущего года и проект перечня мероприятий по его реализации направляется для рассмотрения в ЦК.
ЦК рассматривает представленные железными дорогами проекты откорректированных календарных планов-графиков и по итогам рассмотрения формирует и предоставляет на подписание первому заместителю генерального директора ОАО "РЖД" проект распоряжения о внесении изменений в Директивный план-график.
В случае изменения дат производства работ по титульным участкам, включенным в Директивный план-график, с условием выполнения работ в рамках текущего года, корректировка допускается на стадии месячного планирования в АС АПВО-2 МП (для длительных закрытий, а также "окон" большой продолжительности в соответствии с пунктом 8.4.1).

6.2. Месячное планирование "окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

6.2.1. Планирование "окон" на предстоящий месяц производится на основании утвержденного Директивного плана-графика с учетом:
ранее несостоявшихся "окон";
невыполнения утвержденных параметров объемов работ;
потребности в "окнах" для текущего содержания инфраструктуры;
изменения плана-графика и объема выполняемых СМР на объектах капитального строительства и ремонта инфраструктуры.
На данном этапе дополнительно рассматриваются "окна" для работ на инфраструктуре, предоставление которых выходит за рамки месячного планирования (более месяца), вследствие необходимости соблюдения установленных сроков изменения расписания пассажирских и пригородных поездов.
Формирование календарного плана-графика на месяц должно проводиться с учетом обеспечения перевозки планируемых объемов грузов.
6.2.2. До 5 числа месяца, предшествующего планируемому, Д направляет телеграфное указание за подписью НЗ-1 в адрес заказчиков "окон" с информацией о створах планирования "окон" на предстоящий месяц по датам и (или) дням недели и диспетчерским участкам. Такая информация может направляться на период, превышающий календарный месяц (в соответствии с местными инструкциями).
До 9 числа месяца, предшествующего планируемому, ДКРС, ДКС представляют в адрес ДРП актуализированные данные о готовности земляного полотна на объектах ЦУКС на предстоящий месяц.
До 14 числа месяца, предшествующего планируемому, заказчики "окон": ДКРЭ, ПМС, ПЧ, ИЧ, ПЧ ИССО, ЭЧ, ШЧ, РЦС, ДС и др., а также ДКРС, ДКС (по заявкам подрядных организаций, не входящих в состав ОАО "РЖД) формируют заявки на предоставление "окон" в АС АПВО-2 МП. Заявки на "окна" с необходимостью предоставления локомотива подаются не позднее 10.00 часов местного времени 14 числа месяца, предшествующего планируемому.
До 15 числа месяца, предшествующего планируемому, Т принимает решение о согласовании заявки на предоставление локомотивов.
До 15 числа месяца, предшествующего планируемому, Территориальные рабочие группы рассматривают поступившие заявки на предоставление "окон" на следующий месяц, определяют готовность причастных линейных структурных подразделений филиалов ОАО "РЖД" и подрядных организаций, возможность выполнения работ в совмещенные "окна", при необходимости разрабатывают дополнительные подготовительные мероприятия. В совещаниях Территориальных рабочих групп участвуют заказчики "окон" и подрядные организации (исполнители работ).
По результатам рассмотрения заявок Территориальной рабочей группой возможны корректировка и внесение линейными подразделениями функциональных филиалов ОАО "РЖД" в АС АПВО-2 МП дополнительных заявок, разрешенных Территориальной рабочей группой.
До 15 числа месяца, предшествующего планируемому, НЗТер согласовывает заявки на "окна" в АС АПВО-2 МП с фиксацией совмещенных "окон".
В период с 16 по 17 число месяца, предшествующего планируемому, Региональная рабочая группа проводит рассмотрение заявок на "окна" с последующей корректировкой заявки заказчиком "окна" в случае ее отклонения.
С 16 по 17 число месяца, предшествующего планируемому, ДОК разрабатывается ВГДП в автоматизированной системе ВГДП ИСУЖТ, с последующей автоматизированной передачей данных о размерах движения в АС АПВО-2 МП.
До 18 числа месяца, предшествующего планируемому, проводится совещание Региональной рабочей группы под председательством НЗ-1, где рассматриваются планы проведения работ на инфраструктуре на предстоящий период. Ответственным за подготовку совещания является секретарь Региональной рабочей группы.
По итогам совещания, при необходимости, осуществляется корректировка заявок на "окна", ДОК проводит корректировку ВГДП в автоматизированной системе ВГДП ИСУЖТ с последующей автоматизированной передачей данных в АС АПВО-2 МП.
До 19 числа месяца, предшествующего планируемому, на основании согласованных заявок в АС АПВО-2 МП и решений, принятых на совещании Региональной рабочей группы, формируется календарный план-график на месяц, который вместе с заявками утверждается НЗ-1 в АС АПВО-2 посредством ЭЦП <2>.
--------------------------------
<2> До внедрения технологии утверждения Календарного плана-графика ЭЦП подписание документа осуществляется в ЕАСД или с использованием бумажного носителя.

В случае если указанное в разделе число месяца, предшествующего планируемому, является выходным или праздничным днем, сроки формирования и согласования заявок на "окна" в АС АПВО-2 МП регламентируются местной инструкцией, но не могут быть установлены позднее сроков, указанных в настоящей Инструкции.
Порядок утверждения календарного плана-графика на месяц до реализации функционала по его подписанию посредством ЭЦП в АС АПВО-2 определяется местной инструкцией.
6.2.3. Схематический порядок планирования работ на инфраструктуре на предстоящий месяц представлен в Приложении N 2.
Образец календарного плана-графика "окон" на предстоящий месяц представлен в Приложении N 12.

6.3. Оперативное планирование "окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

6.3.1. Оперативное планирование осуществляется в рамках реализации календарного плана-графика на месяц с учетом оперативной обстановки, необходимости восполнения отставания при невыполнении утвержденных параметров объемов ремонта и строительства.
6.3.2. Оперативное планирование производится с учетом:
несостоявшихся "окон", в том числе перенесенных, отмененных, сорванных;
восполнения допущенного отставания ввиду сокращения продолжительности утвержденного "окна" спрогнозированного риска невыполнения плановых объемов работ текущего месяца;
результатов диагностики и осмотра объектов железнодорожной инфраструктуры;
ликвидации последствий нарушения безопасности движения и т.д.;
рационального использования путевой техники, материально-технических и людских ресурсов.
При оперативном планировании в случае отмены или срыва "окна" возможна в пределах 30 календарных дней повторная подача заявки с привязкой к ранее неисполненной, включенной в календарный план-график на месяц, с прикреплением обосновывающих материалов.
6.3.3. Работы по текущему содержанию инфраструктуры в границах железнодорожных станций продолжительностью до 2 часов (за исключением работ, указанных в Приложении N 1 к Инструкции [7], а также работ с применением путевых машин) и не влияющие на выполнение графика движения поездов (в том числе с закрытием для движения и выключением устройств СЦБ без сохранения пользования сигналами), осуществляются по разрешению ДСП (ДНЦ при диспетчерской централизации). В данном случае руководитель работ обязан до начала работ оформить запись в журнале осмотра формы ДУ-46 (для участков, оборудованных диспетчерской централизацией, порядок предоставления таких "окон" устанавливается местной инструкцией). Кроме того, перед разрешением производства работ на главных и приемо-отправочных путях железнодорожной станции с закрытием для движения, ДСП обязан получить приказ ДНЦ о закрытии соответствующих путей.
Время, необходимое на производство работ по текущему содержанию объектов инфраструктуры, во всех вышеперечисленных случаях определяется руководителем работ самостоятельно в соответствии с технологическими картами на их выполнение. Руководитель работ несет ответственность за своевременность и качество выполнения работ, обеспечение требований безопасности движения и охраны труда в период их проведения. Отдельного разрешения (оперативного приказа НЗ-1 или телеграммы-разрешения) на выполнение такого вида работ не требуется.
6.3.4. В целях обеспечения пропуска планируемых объемов перевозок допускается предоставление "окон" в темное время суток с соблюдением требований соответствующих нормативных документов.
6.3.5. Запрещается предоставление "окон" (кроме изложенных в пункте 6.3.3 настоящей Инструкции) без оформления заявок на выполнение работ в АС АПВО-2 ОП за исключением аварийных.
6.3.6. Оперативное планирование "окон" осуществляется Региональной рабочей группой с предварительным рассмотрением заявок Территориальными рабочими группами, при этом предоставление "окон", предусмотренных календарным планом-графиком на месяц, является приоритетным.
В процессе планирования Региональными и Территориальными рабочими группами рассматриваются:
организационно-технологическая документация;
порядок организации пропуска поездов;
подготовительные мероприятия, связанные с выключением устройств ЖАТ и электроснабжения;
готовность к работе путевой техники, локомотивов и трудовых ресурсов;
передислокация к месту работ хозяйственных поездов и другие вопросы, связанные с предоставлением "окон".
"Окна", проведение которых связано с применением землеройной техники, рассматриваются при обязательном наличии акта о готовности железнодорожной инфраструктуры с указанием информации о трассировке или выносе кабельных трасс СЦБ, связи и энергоснабжения с целью исключения их повреждения согласно Приложению N 14.
6.3.7. Процесс оперативного планирования "окон" начинается с корректировки ранее сгенерированных черновиков заявок путем дополнения уточняющей информацией или формирования новых заявок в АС АПВО-2 ОП.
Ответственными за ввод заявок являются уполномоченные работники подразделений - заказчиков "окон". При производстве работ сторонней организацией, а также организацией, производящей работы по договору с ОАО "РЖД", внесение заявок в АС АПВО-2 производится соответственно:
для сторонней организации - в соответствии с требованиями раздела 12 настоящей Инструкции;
для организации, производящей работы по договору с ОАО "РЖД", - заказчиком данных работ.
При необходимости использования локомотива в "окно" (в случаях, когда обеспечение локомотивами предусмотрено договором между подрядной организацией и Дирекцией тяги) заказчик "окна" формирует заявку в АС АПВО-2 на выдачу локомотива. Более подробно порядок указан в разделе 7 настоящей Инструкции.
Перечень документов, прикрепляемых в карточку "окна" при формировании заявки в АС АПВО-2, представлен в Приложении N 6.
Ответственными за полноту и качество представляемой и прикрепляемой в карточку "окна" технологической документации являются заказчики "окон", причастные линейные и региональные подразделения функциональных филиалов ОАО "РЖД", подрядные и сторонние организации по кругу ведения вопросов на этапе согласования заявок, а за ее качество - исполнители работ.
Ответственными за согласование заявок являются: на линейном уровне - подразделения функциональных филиалов ОАО "РЖД", заявленные для обеспечения или сопровождения работ, на территориальном уровне - уполномоченный член Территориальной рабочей группы.
Ответственными за обеспечение необходимыми ресурсами являются структурные подразделения функциональных филиалов ОАО "РЖД", подрядные организации по кругу ведения вопросов.
6.3.8. В заявке на предоставление "окна" и производство работ заказчик "окна" указывает:
вид ремонта (реконструкция, при ремонте пути указывается: капитальный ремонт на новых материалах, капитальный ремонт на старогодных материалах, средний ремонт и т.д.);
конкретное расположение места работ (километры и пикеты границ участка работ, перегон и (или) станция, номер пути перегона и (или) станции) с указанием сроков начала и окончания работ;
потребность в локомотивах;
маршруты следования рабочих (хозяйственных) поездов и путевых машин, запланированных для производства ремонтных и строительно-монтажных работ, со станции дислокации к месту работ и обратно к месту дислокации;
необходимость ограничения скорости движения поездов до, в период предоставления и после "окна" или для выполнения отдельных видов работ (километры и пикеты границ участка, перегон и (или) станция, номер пути перегона и (или) станции) и протяженность участков действия ограничения скорости движения, время действия ограничений скорости движения, в т.ч. по соседнему пути);
календарный график работ, указывающий дату отмены действующих на участке предупреждений об ограничении скорости движения (при необходимости);
необходимость выключения на период проведения "окна" или выполнения отдельных работ устройств ЖАТ и электроснабжения;
структурное подразделение функционального филиала ОАО "РЖД", ответственное за ограждение места производства работ;
фамилию, имя, отчество и должность руководителя работ.
6.3.9. Порядок оформления заявок на предоставление "окон" на этапе оперативного планирования включает следующие действия.
Заказчик "окна" не позднее, чем до 10.00 местного времени за 4 суток (на участках обращения высокоскоростных поездов - не позднее, чем за 6 суток) до начала "окна" <3> в АС АПВО-2 ОП редактирует сгенерированные заявки из АС АПВО-2 МП и ЕКАСУИ или создает новую заявку.
--------------------------------
<3> Здесь и далее по тексту настоящей Инструкции сроки начала и предоставления "окна" исчисляются по московскому времени.

Работники причастных линейных подразделений функциональных филиалов ОАО РЖД, согласно сформированному в АС АПВО-2 ОП списку согласований, в сроки, не позднее, чем до 15.00 местного времени за 4 суток (на участках обращения высокоскоростных поездов - не позднее, чем за 6 суток) до начала "окна" согласовывают или отклоняют заявки, указывают фамилию и должность работника, ответственного за взаимодействие с исполнителем работ от своего подразделения, прикрепляют необходимые документы в АС АПВО-2 ОП.
При рассмотрении "окон" большой продолжительности и длительных закрытий до 10.00 местного времени за 3 суток до даты предоставления "окна" работники аппарата главного ревизора по безопасности движения железной дороги согласовывают заявки в АС АПВО-2 ОП.
Территориальные рабочие группы до 10.00 местного времени за 3 суток до даты предоставления "окна" проводят рассмотрение заявок, определяют готовность исполнителей и устройств инфраструктуры к производству работ, принимают решение о совмещении работ в "окно" и определении единого руководителя работ. НЗТер рассматривает спорные вопросы, расставляет приоритеты в предоставлении "окон" тому или иному подразделению, назначает единого руководителя работ в совмещенные "окна" с подтверждением (отклонением) заявки в АС АПВО-2 ОП.
Подразделение-балансодержатель путевой техники (или в случае аренды техники - арендатор) подтверждает предоставление указанной техники в АСУ СПС до 10.00 местного времени за 3 суток до даты предоставления "окна".
Ответственный работник региональной Т обеспечивает первичное согласование заявок на обеспечение локомотивами до 10.00 местного времени за 3 суток до даты предоставления "окна".
Согласованные ответственными работниками и руководителями причастных линейных подразделений функциональных филиалов ОАО "РЖД" и НЗТер заявки поступают на рассмотрение в Региональную рабочую группу.
Региональная рабочая группа рассматривает организационно-технологическую документацию, оценивает выполнение Мероприятий, организацию пропуска вагонопотока и др.
До 16.00 местного времени за 3 суток до даты проведения "окна" ДОК разрабатывает прогнозный график движения поездов в АПК Эльбрус с последующей автоматизированной передачей данных об использовании "окна" при построении прогнозного графика движения поездов, о времени начала и окончания "окна" и времени отправления и прибытия хозяйственных поездов в АС АПВО-2.
Утверждение заявок в АС АПВО-2 ОП становится доступным при подтверждении выполнения всех условий, указанных в заявке: о сопровождении работ причастными, о предоставлении запрашиваемой путевой техники, об обеспечении локомотивами и др.
Д формируют проект оперативного приказа НЗ-1 с перечнем всех "окон" на сутки.
Необходимые требования для формирования оперативного приказа НЗ-1 и телеграмм-разрешений изложены в п. 8.5 настоящей Инструкции.
Подписание НЗ-1 оперативного приказа о предоставлении "окон" и телеграмм-разрешений выполняется в АС АПВО-2 посредством ЭЦП <4>.
--------------------------------
<4> До внедрения технологии утверждения приказа о предоставлении "окон" НЗ-1 ЭЦП подписание документа осуществляется в ЕАСД или с использованием бумажного носителя.

В АС АПВО-2 ОП "окна" должны быть утверждены до 23.59 местного времени за 3 суток до плановой даты начала "окна" с указанием даты и номера оперативного приказа.
После утверждения заявок информация об "окнах" поступает в ГИД "Урал-ВНИИЖТ" <5> в автоматическом режиме.
--------------------------------
<5> Функционал ГИД "Урал-ВНИИЖТ" реализовывается в АС ГИД НП после ввода в эксплуатацию последнего.

6.3.10. Схематический порядок оперативного планирования "окон" представлен в Приложении N 3.

6.4. Порядок "ускоренного" оформления заявок
на предоставление "окон"

6.4.1. "Ускоренное" оформление заявок в АС АПВО-2 ОП, поданных менее чем за 4 суток на проведение работ в "окно", возможно в случаях:
ранее несостоявшихся (по причине отзывов, отказов, отмен и срывов) "окон". Причины случаев "ускоренного" оформления заявок подлежат обязательному рассмотрению Региональной рабочей группой;
при выявлении средствами мобильной и стационарной диагностики, а также в ходе натурных осмотров отступлений в содержании объектов инфраструктуры, срок устранения которых менее установленного пунктом 6.4 настоящей Инструкции срока на подачу заявки на "окно".
Решение о возможности предоставления таких "окон" принимается Региональной рабочей группой.
6.4.2. Данный порядок аналогичен порядку рассмотрения заявок на этапе оперативного планирования, но сроки формирования, согласования и утверждения значительно сокращены.
Схематический порядок "ускоренного" оформления заявок на предоставление "окна" представлен в Приложении N 3.
6.4.3. Заявки на такие "окна" могут подаваться не позднее 10.00 местного времени за 2 суток до даты проведения "окна". Заявки с нарушением указанного срока не рассматриваются.

6.5. Порядок предоставления аварийных "окон"

6.5.1. Аварийное "окно" предоставляется ДНЦ на основании заявки руководителя работ, оформленной в соответствии с п. 25 Приложения 13 ИДП [16], для устранения отступления в содержании устройств инфраструктуры или предотказного состояния объекта инфраструктуры, неустранение которого может привести к нарушениям безопасности движения, угрозе жизни и здоровья людей.
Заявки на аварийные "окна" в АС АПВО-2 ОП не подаются, факт состоявшихся аварийных "окон" оформляется ДНЦ в ГИД "Урал-ВНИИЖТ" <6>.
--------------------------------
<6> Функционал ГИД "Урал-ВНИИЖТ" реализовывается в АС ГИД НП после ввода в эксплуатацию последнего.

6.5.2. После передачи факта состоявшегося аварийного "окна" из ГИД "Урал-ВНИИЖТ" в АС АПВО-2 ОП подразделение-исполнитель вносит уточняющие данные об аварийном "окне" (вид работ, руководитель работ, выполненный объем и т.д.).

6.6. Порядок предоставления внеплановых "окон"

6.6.1. "Окно" является внеплановым, если выполняется одно из следующих условий:
заявка на "окно" подана вне месячного плана;
дата проведения "окна" отличается от даты, утвержденной в календарном плане-графике на месяц, более чем на сутки.
Матрица классификации "окон" представлена в Приложении N 4.
6.6.2. Заявки на проведение работ во внеплановые "окна" оформляются в АС АПВО-2 ОП в соответствии с пунктами 6.3, 6.4 настоящей Инструкции с приложением обосновывающих материалов.
6.6.3. Факты предоставления внеплановых "окон" (за исключением предоставляемых в технологический створ, а также не повлиявших на ВГДП) подлежат обязательному расследованию Региональной рабочей группой.

6.7. Корректировка времени предоставления "окон"
и отмена "окон"

6.7.1. В исключительных случаях, исходя из эксплуатационной обстановки, по согласованию с руководителем работ при соблюдении необходимых норм безопасности движения поездов ДНЦ разрешено смещение времени начала "окна" на более позднее, но не более чем на 1 час без изменения общей продолжительности "окна".
Корректировка времени начала "окна" более чем на 1 час, но не более чем на 6 часов, при условии соблюдения графика движения пассажирских и пригородных поездов, осуществляется на основании оперативного приказа НЗ-1, после согласования причастных руководителей региональных подразделений филиалов ОАО "РЖД". Ответственный работник за подготовку оперативного приказа определяется местной инструкцией.
Смещение створа "окон", влияющего на эксплуатационную работу нескольких железных дорог, осуществляется на основании оперативного приказа заместителя генерального директора ОАО "РЖД" - начальника Центральной дирекции управления движением или его заместителей.
6.7.2. Случай сокращения продолжительности утвержденного при оперативном планировании "окна", при котором требуется предоставление дополнительного времени в последующем периоде для восполнения потерь в объемах работы, расценивается как нерациональное использование "окна".
Изменение продолжительности "окна", утвержденного при оперативном планировании, осуществляется на основании оперативного приказа НЗ-1 (с указанием причины).
6.7.3. Отмена "окон", утвержденных Директивным планом-графиком, осуществляется на основании оперативного приказа первого заместителя генерального директора ОАО "РЖД" или заместителя генерального директора ОАО "РЖД" - начальника Центральной дирекции управления движением.
Отмена "окон", не предусмотренных Директивным планом-графиком, допускается приказом Н или оперативным приказом НЗ-1 железной дороги.
6.7.4. Ответственность за случаи отмен, отказов и срывов "окон" возлагается на виновное подразделение в соответствии с Классификатором [10].

7. Планирование локомотивов и локомотивных бригад
хозяйственного движения

7.1. Планирование локомотивов и локомотивных бригад для работ на инфраструктуре осуществляется работниками Т и ТЧЭ, назначаемых приказом начальника региональной дирекции тяги.
Процесс планирования тяговых ресурсов, необходимых для производства текущего содержания, ремонтных и строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры, осуществляется посредством АС АПВО-2.
7.2. При месячном планировании заказчик "окна" в срок до 10.00 местного времени 14 числа месяца, предшествующего планируемому, при оформлении в АС АПВО-2 МП заявок, формирует потребность на выдачу локомотивов, для чего вносит следующие данные: наименование хозяйственного поезда, полезное (потребное) время работы локомотива, тип локомотива (электровоз/тепловоз, количество секций), источник финансирования, вид работ, станцию подачи/отцепки, станцию начала/окончания работ и др.
Ответственный работник Т до 15 числа месяца, предшествующего планируемому, согласовывает серию локомотива и место (депо/станция) выдачи локомотива на планируемые работы.
7.3. При оперативном планировании заказчик "окна" при оформлении в АС АПВО-2 ОП заявки на работы не позднее, чем за 4 суток (для ускоренных "окон" за 2 суток) до планируемой даты, формирует потребность в локомотивах в рамках параметров утвержденного наряд-заказа.
В заявке указывается: потребное время работы локомотива, серия локомотива, источник финансирования, наименование хозяйственного поезда, вид работ, станция подачи/отцепки, станция начала/окончания работ.
При необходимости использования локомотива в "окно" при выполнении работ сторонними и подрядными организациями (в случаях, когда обеспечение локомотивами предусмотрено договором между подрядной организацией и Дирекцией тяги), подрядная организация не менее чем за сутки до даты подачи заявки на "окно" (не менее чем за 5 суток, а на участках обращения высокоскоростных поездов - не позднее, чем за 7 суток) направляет в адрес заказчика "окна" предварительно согласованную с Дирекцией тяги (Т) письменную заявку, с указанием количества и серии требуемых локомотивов, депо выдачи, станции подачи, маршрут следования (хозяйственного поезда или резервом) и станцию возвращения после "окна", после чего заказчик "окна" формирует в АС АПВО-2 заявку на предоставление "окна" с оформлением заявки на выдачу локомотива. При формировании заявки на локомотив указывается наименование заказчика - Т, наименование работ "Работа по договорам со сторонними организациями", код источника финансирования "Прочие виды деятельности", в графе описание хозяйственного поезда указывается наименование подрядной организации. Локомотиво-часы полезного и вспомогательного времени, затраченные на выполнение данных работ, относятся к учету за Т.
Ответственный работник Т осуществляет первичное согласование заявки до 10.00 местного времени за 3 суток (для ускоренных "окон" до 14.00 местного времени за 2 суток) до даты выделения локомотива на планируемые работы с уточнением серии локомотива и места (депо/станция) выдачи.
Работник ТЧЭ на основе плана выдачи локомотивов, согласованного в АС АПВО-2 ОП ответственным работником Т, ежедневно до 12 часов местного времени (за сутки до начала работ) осуществляет в АРМ-Нарядчик (АРМ-ТЧД - комплекса АСУТ (ЕКА-АСУТ) вторичное согласование заявок на следующие сутки, с указанием конкретных номеров локомотивов и фамилий машинистов по каждой заявке.
Замена ранее согласованной серии и секционности локомотива, при условии, что вновь выделяемый локомотив по техническим характеристикам будет соответствовать планируемой работе, возможна после согласования с заказчиком "окна". Изменения вносятся в информационные системы АРМ-Нарядчик.
При невозможности выдачи локомотива ответственный работник ТЧЭ не позднее 12 часов местного времени (за сутки до начала работ) по телефонным средствам связи должен немедленно поставить в известность соответствующего заказчика "окна" и ответственного работника Т. Ответственный работник Т совместно с заказчиком "окна" в течение трех часов вырабатывают управленческое решение. Невыдача локомотива классифицируется как срыв "окна" по ответственности Т с внесением этих сведений заказчиком "окна" в АС АПВО-2 ОП.
При отмене, отказе и отзыве от утвержденного "окна" или отсутствии необходимости в выдаче ранее согласованного Т локомотива, заказчик "окна" немедленно должен уведомить об этом ответственного работника ТЧЭ с обязательным внесением сведений в АС АПВО-2 ОП.
7.4. Выдача локомотивов без оформления заявок в АС АПВО-2 ОП, кроме обеспечения аварийных работ, запрещается.
В случае выдачи локомотива на аварийные работы, для обеспечения достоверного учета, исполнитель "окна", при уточнении данных об аварийном "окне", обязан сформировать заявку на локомотив в АС АПВО-2 ОП, а работник ТЧЭ внести информацию о фактически выделенном локомотиве и локомотивной бригаде в процессе или после окончания работ.

8. Документы, разрабатываемые при планировании "окон"

8.1. План мероприятий по выполнению подготовительных работ
и эффективному использованию пропускной и провозной
способности в период предоставления "окон"

8.1.1. При разработке проекта календарного плана-графика на предстоящий год членами Территориальной и Региональной рабочих групп формируются предложения в проект плана мероприятий по выполнению подготовительных работ и эффективному использованию пропускной и провозной способности в период предоставления "окон" большой продолжительности и длительных закрытий по каждому титульному участку.
Мероприятия включают в себя сроки выполнения, ответственных исполнителей.
По итогам рассмотрения на заседании Региональной рабочей группы НЗ-1 утверждает план мероприятий.
Примерный перечень мероприятий:
а) организация движения соединенных поездов;
б) увеличение массы и длины поезда, в том числе за счет применения технологии подталкивания, кратной тяги;
в) повышение скорости движения поездов на лимитирующих участках, в т.ч. по диспетчерским съездам;
г) установка дополнительных передвижных тяговых подстанций на электрифицированных участках;
д) перенос мест опробования тормозов на перегонах (при необходимости);
е) организация движения поездов по неправильному пути, в том числе по сигналам АЛС;
ж) организация движения объединенных пассажирских поездов;
з) минимизация межпоездного интервала движения поездов;
и) установление однопутного движения поездов только на части перегона за счет открытия временных путевых постов с временной укладкой стрелочных переводов, укладку временных съездов между главными путями на железнодорожных станциях, секционирование контактной сети и перенос светофоров, изолирующих стыков;
к) устранение инфраструктурных ограничений по соседним с ремонтируемым путям;
л) организация завоза балласта и рельсошпальной решетки на станции, максимально приближенные к фронтам ремонтов;
м) организация движения автотранспорта при проследовании железнодорожных переездов в период производства ремонтных работ;
н) выверка и, при необходимости, внесение изменений в приказы об установленных скоростях движения поездов и об установлении массы и длины поездов, проведение инструктажа в локомотивных депо;
о) организация совмещенных работ в "окно" различными подразделениями;
п) организация инструктажа причастных работников о порядке пропуска поездов в период предоставления "окон";
р) обеспечение в период производства работ на инфраструктуре необходимого количества трудовых ресурсов, материалов, локомотивов, локомотивных бригад, путевых машин и механизмов, организация экипировки локомотивов и путевых машин;
с) формирование резерва локомотивов и локомотивных бригад для обеспечения своевременного вывода поездов с технических станций и пунктов оборота на период предоставления "окон";
т) формирование этапности работ (при необходимости), предусматривающей максимальное выполнение объема работ по текущему содержанию объектов инфраструктуры до начала ремонтных и строительно-монтажных работ с целью обеспечения безотказной работы технических средств в период предоставления "окон" большой продолжительности на соседних с ремонтируемым перегоном станциях и соседнему главному пути;
у) порядок выполнения маневровой работы по формированию хозяйственных поездов и ответственное подразделение;
ф) ведомость занятия путей пассажирскими и пригородными поездами в период производства работ на железнодорожных станциях, а также при необходимости - меры по обеспечению безопасности пассажиров;
х) другие вопросы, реализация которых требуется для эффективной организации перевозочного процесса в период производства работ на инфраструктуре.
Утвержденные НЗ-1 календарный план-график и Мероприятия направляются в адрес НЗТер для их реализации.
Ответственным за соблюдение сроков выполнения Мероприятий является НЗТер.
8.1.2. При разработке Мероприятий необходимо учесть следующие условия:
а) на двухпутных участках, оборудованных односторонней автоблокировкой с фактическими размерами движения более 70% наличной пропускной способности, запрещается предоставлять "окна" продолжительностью свыше 4 часов без временного оборудования однопутного перегона устройствами двухсторонней автоблокировки или устройствами для движения в неправильном направлении по показаниям АЛС;
б) не допускается предоставление "окон" (кроме аварийных) при наличии на станциях, ограничивающих ремонтируемый перегон (путь перегона), закрытых для движения путей, стрелочных переводов и (или) ограничений скорости по ним (если по ним осуществляется движение поездов в период предоставления "окна"), а также при наличии не предусмотренных НГДП предупреждений об ограничении скорости на оставшемся пути ремонтируемого перегона и (или) соседних с ним перегонах;
в) приступать к работам на следующем перегоне (в пределах одного поездоучастка) разрешается только после полного окончания работ и открытия движения поездов с установленной скоростью на участке;
г) эксплуатация временного путевого поста на перегоне допускается на срок не более 3-х месяцев. Продление срока использования временного путевого поста допускается в исключительных случаях по письменному разрешению НЗ-1 с указанием мер по обеспечению безопасности движения поездов;
д) в целях ускорения отправления хозяйственных поездов к месту работ, а также беспрепятственного приема их с закрытого перегона в дни предоставления "окон" для оказания практической помощи ДСП, при необходимости, назначается ответственный работник Д.
8.1.3. При месячном планировании работ на инфраструктуре Региональной рабочей группой рассматривается выполнение Мероприятий по участкам и наличие организационно-технологической документации.
При необходимости Мероприятия могут дополняться и корректироваться по итогам месячного планирования. Скорректированные Мероприятия утверждаются распоряжением НЗ-1 и направляются ТС в адрес причастных подразделений и НЗТер в суточный срок с момента утверждения.
8.1.4. В сроки, установленные в Мероприятиях, НЗТер проводит контрольную проверку по выполнению пунктов Мероприятий на конкретном объекте, с выездом на место планируемого производства работ и последующим письменным докладом НЗ-1.
ТС контролирует выполнение Мероприятий. При рассмотрении на заседании Рабочей группы конкретных "окон" ТС (по итогам письменного доклада НЗТер) докладывает НЗ-1 о выполнении всех пунктов Мероприятий.
8.1.5. Подписание НЗ-1 телеграммы-разрешения на предоставление "окна" допускается только после полного выполнения Мероприятий, предусмотренных для данного фронта работ.
8.1.6. При корректировке Директивного плана-графика проводится корректировка плана Мероприятий.
8.1.7. При длительных закрытиях по итогу выполнения подготовительных мероприятий дополнительно формируются телеграммы о готовности к проведению работ в соответствии с Регламентом [13].

8.2. Организационно-технические и технологические документы
для работ на инфраструктуре

8.2.1. Общий порядок разработки ОТД для работ на инфраструктуре (технологический процесс, ППР) установлен пунктом N 10.1 Правил назначения ремонтов железнодорожного пути [11] и пунктом 3.3 Положения о безопасности [2].
8.2.2. ППР на каждый объект ремонта или строительства разрабатывается исполнителем соответствующих работ и согласовывается уполномоченными представителями причастных подразделений филиалов ОАО "РЖД" (в том числе ДС, ограничивающих перегон), ДЦС, ДИЗТер, НЗТер. После завершения процедуры рассмотрения и согласования ППР направляется на утверждение НЗ-1.
ППР должен быть разработан, согласован и утвержден в следующие сроки: при необходимости изменения расписания движения пассажирских и пригородных поездов на период "окон" в соответствии с пунктом 8.4.3, в остальных случаях до 10 числа месяца, предшествующего развороту работ.
8.2.3. При производстве ремонтных и строительно-монтажных работ по технологии длительного закрытия перегона разрабатывается и утверждается Паспорт перегона (станции) [12]. Паспорт перегона (железнодорожной станции) разрабатывается до 1 октября года, предшествующего планируемому, и при необходимости корректируется за месяц до начала производства работ.

8.3. Вариантный график движения поездов

8.3.1. Разработка ВГДП на период предоставления "окна" осуществляется Д в соответствии с Директивным планом-графиком, календарным планом-графиком на месяц и на основании поданной исполнителем работ заявки в АС АПВО-2 на предоставление "окна" для производства работ на инфраструктуре ОАО "РЖД".
8.3.2. При разработке ВГДП учитывается:
необходимость ограничения скорости движения поездов до, в период предоставления и после "окна" или при выполнении отдельных видов работ (расположение (километры и пикеты границ участка, перегон и (или) железнодорожная станция, номер пути перегона и (или) станции) и протяженность участков действия ограничения скорости движения, величина допускаемых скоростей движения, время действия ограничений скорости движения);
требования к производству подготовительных работ смежными региональными подразделениями функциональных филиалов ОАО "РЖД".
8.3.3. При необходимости в период производства работ ограничения скорости движения поездов, в том числе в связи с установкой временных путевых постов, укладкой временных съездов, организацией движения поездов по железнодорожной станции по боковым путям, определения перегонного времени хода с учетом разгона и замедления Д (ЦУП полигона):
а) выполняет тяговые расчеты для определения перегонных времен хода, межпоездных и станционных интервалов для всех категорий поездов с учетом следования их по маршруту и со скоростями движения, предусмотренными проектом производства работ.
При изменении условий пропуска поездов на различных этапах производства работ (изменение протяженности участка действия ограничения скорости до, во время и после "окна", проведении подготовительных работ, работ на соседнем пути машин тяжелого типа и т.п.) тяговые расчеты выполняются для каждого этапа производства работ;
б) при необходимости, в целях проверки правильности выполненных тяговых расчетов, минимизации перегонных времен хода и межпоездных интервалов проводит хронометраж технологических операций и организовывает совместно с Т выполнение опытных поездок.
Запрещается при разработке ВГДП использовать перегонные времена хода, межпоездные и станционные интервалы, не подтвержденные тяговыми расчетами.
8.3.4. При разработке ВГДП должны быть рассмотрены различные варианты организации пропуска поездов, в том числе:
а) возможность закрытия движения поездов для производства работ, в том числе по соседним путям в соответствии с проектом производства работ;
б) пропуск дополнительных грузовых поездов до предоставления "окна" и после его окончания;
в) пропуск соединенных, длинносоставных и тяжеловесных грузовых поездов;
г) своевременный подвод к фронту работ всех хозяйственных поездов, вывод их после завершения работ на "окне" и следование к местам дислокации на основании информации, указанной в заявке, и предусмотренной ППР технологии;
д) возможность отправления и приема хозяйственных поездов на/с закрытого пути перегона с учетом путевого развития железнодорожных станций.
8.3.5. При необходимости разрабатывается пояснительная записка к вариантному графику, в которой отражается следующая информация:
а) количество поездов всех категорий, пропускаемых по нормативному и вариантному графику в четном и нечетном направлениях (в период "окна", от начала отчетных суток до начала "окна", от окончания "окна" до окончания отчетных суток, в целом за отчетные сутки) и фактические размеры движения (среднем в сутки с начала года);
б) участковая скорость движения поездов, предусмотренная нормативным и вариантным графиком;
в) перегонные времена хода поездов всех категорий по ремонтируемому участку.
8.3.6. ВГДП на участках, прилегающих к междорожным стыковым пунктам, должен обеспечивать установленные ОАО "РЖД" размеры движения грузовых поездов. Вариантные графики на таких участках должны дополнительно быть согласованы начальником Д соседней железной дороги, в том числе с применением имеющихся информационных систем. Порядок и сроки согласования таких ВГДП и направления их в соседние Д и ДЦУП для организации работы, определяется исходя из местных условий взаимно согласованных распоряжениями начальников соседних Д.
8.3.7. Вариантный график движения поездов утверждается:
НЗ-1 на участках обращения высокоскоростных пассажирских поездов, а также на участках, предусмотренных Местными инструкциями;
начальником Д - на остальных участках.
8.3.8. При полигонной модели управления (для восточного полигона) ВГДП разрабатывается ЦУП полигона и утверждается начальником ЦУП полигона.
8.3.9. В период предоставления "окна" утвержденный ВГДП является нормативным и не позднее, чем за 8 часов до начала "окна" предоставляется ДНЦ. Если ВГДП охватывает несколько диспетчерских участков - всем причастным ДНЦ, в том числе в соседние Д.

		КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.		
8.3.5. Принципы разработки ВГДП изложены в Инструкции [24].

8.4. Оформление запросов в ОАО "РЖД" на согласование
проведения длительных закрытий и "окон" большой
продолжительности, не предусмотренных Директивным
планом-графиком, а также на изменение маршрута
и расписания движения пассажирских поездов
в пределах двух и более дорог

8.4.1. Предоставление длительных закрытий (в т.ч. станционных путей, при закрытии которых движение поездов осуществляется по оставшемуся пути перегона или прекращается полностью), а также "окон" большой продолжительности, предусмотренных Директивным планом-графиком, допускается на основании телеграммы-разрешения НЗ-1.
8.4.2. Предоставление длительных закрытий (в т.ч. станционных путей, при закрытии которых движение поездов осуществляется по оставшемуся пути перегона или прекращается полностью), а также "окон" большой продолжительности, не предусмотренных Директивным планом-графиком (изменен период предоставления и (или) продолжительность "окна", появился дополнительный объем капитального ремонта, реконструкции или нового строительства) с изменением расписания пассажирских поездов и размеров движения грузовых поездов по междорожным стыковым пунктам от нормативного графика движения поездов осуществляется исключительно при наличии телеграммы-согласования заместителя генерального директора ОАО "РЖД" - начальника Центральной дирекции управления движением - для длительных закрытий, заместителей начальника Центральной дирекции управления движением - для "окон" большой продолжительности.
8.4.3. Для получения согласования на проведение длительных закрытий и "окон" большой продолжительности, не предусмотренных Директивным планом-графиком, в ЦД направляется телеграмма-запрос за подписью НЗ-1, содержащая следующую информацию:
вид работ, титульный (новый) участок, направление, участок и станции, ограничивающие перегон;
планируемая дата и время начала и окончания работ, продолжительность "окна";
планируемые объемы работ;
организация-исполнитель работ;
размеры движения грузовых поездов по участку в период производства работ;
изменение маршрута следования и (или) расписания пассажирских поездов;
выполнение подготовительных работ в соответствии с утвержденными для данного участка ремонта Мероприятиями по выполнению подготовительных работ и эффективному использованию пропускной и провозной способности в период предоставления технологических "окон", готовности техники, применяемой при выполнении работ, наличии в полном объеме материалов в соответствии с графиками подготовки и поставки МВСП и т.д.;
порядок организации пропуска поездов в период проведения "окна" или длительного закрытия.
Пример заполнения телеграммы-запроса на проведение длительных закрытий и "окон" большой продолжительности представлен в Приложении N 7.
К запросу прилагаются сопроводительные документы:
утвержденный НЗ-1 ВГДП с пояснительной запиской к нему (при изменении размеров движения, маршрута или времени передачи пассажирских и пригородных поездов по междорожным стыковым пунктам, ВГДП должны быть согласованы руководителями соседних Д);
предложения по изменению плана формирования поездов и порядка перенаправления вагонопотоков;
ППР, согласованный причастными подразделениями и утвержденный НЗ-1, содержащий, в числе прочего, посуточный план-график выполнения ремонта пути в режиме закрытого перегона и пооперационный график производства работ;
паспорт перегона и (или) схемы станций, ограничивающих ремонтируемый перегон.
8.4.4. При изменении маршрута и (или) расписания движения пассажирских и пригородных поездов в пределах двух и более дорог на период проведения работ на инфраструктуре формируется запрос НЗ-1, согласованный НЗЛ, на изменение маршрута или расписания и ВГДП с пояснительной запиской к нему, утвержденный НЗ-1.
Пример заполнения телеграммы-запроса на изменение маршрута или расписания пассажирских и пригородных поездов в связи с производством работ на инфраструктуре представлен в Приложении N 8.
8.4.5. Телеграмма-запрос и комплект сопроводительных документов на согласование длительных закрытий и "окон" большой продолжительности, не предусмотренных Директивным планом-графиком, и (или) запрос на изменение маршрута следования и (или) расписания пассажирских и пригородных поездов в пределах двух и более дорог должны быть направлены по ЕАСД в следующие сроки:
а) не позднее, чем за 20 суток до планируемой даты начала работ, если требуется отмена, изменение маршрута и (или) расписания движения пригородных поездов, курсирующих в пределах двух железных дорог;
б) не позднее, чем за 15 суток до планируемой даты начала работ, если требуется отмена "ниток" пассажирских поездов не ежедневного обращения, изменение размеров движения грузовых поездов в пределах двух и более железных дорог;
в) не позднее, чем за 15 суток до даты начала реализации проездных документов на пассажирские поезда, если требуется их отмена, изменение маршрута их следования и (или) расписания по станциям посадки, высадки пассажиров (в зависимости от сроков реализации проездных документов);
г) в остальных случаях - не позднее, чем за 15 суток до планируемой даты начала работ.
Пример:
При установленном сроке реализации проездных документов за 90 суток до отправления пассажирских поездов, расписание которых по станциям посадки и высадки пассажиров потребуется изменить при предоставлении "окна", запрос и полный комплект документов должен быть направлен в ЦД не позднее, чем за 105 суток до отправления таких поездов с начальных пунктов.
Запросы на изменение маршрута и (или) расписания движения пассажирских и пригородных поездов в пределах двух или более железных дорог должны быть также согласованы НЗЛ и Д этих железных дорог. Согласование таких запросов соседними железными дорогами должно осуществляться в течение трех рабочих дней.
При получении запроса на согласование опозданий пассажирских поездов по междорожным стыковым пунктам и невозможности ввода их в график в пределах данной железной дороги, согласование опозданий осуществляется только после получения соответствующего согласования впередилежащей железной дороги. Согласование запросов соседними железными дорогами должно осуществляться в течение трех рабочих дней с изданием телеграммы за подписью НЗ-1.
Отмена и (или) изменение маршрута следования пассажирских поездов, курсирующих в пределах двух и более железных дорог, в связи с предоставлением "окон" осуществляется на основании телеграммы-согласования заместителя генерального директора ОАО "РЖД" - начальника Центральной дирекции управления движением или лица, исполняющего его обязанности.
Изменение расписания движения пассажирских поездов, курсирующих в пределах двух и более железных дорог, изменение маршрута и (или) расписания движения пригородных поездов, курсирующих в пределах двух железных дорог, а также отмена "ниток" графика движения пассажирских поездов не ежедневного обращения в связи с предоставлением технологических "окон" осуществляется на основании телеграммы-разрешения ЦД, согласованной с ЦЛ.
8.4.6. Изменение расписания пассажирских и пригородных поездов, курсирующих в пределах одной железной дороги, допускается на основании телеграммы за подписью НЗ-1, согласованной НЗЛ.
8.4.7. Региональные Л совместно с ДОК на основании телеграммы-согласования ЦД и ЦЛ (для восточного полигона заместителя начальника Центральной дирекции управления движением - начальника Центра управления перевозками на восточном полигоне) формируют телеграммы НЗ-1 на отмену, изменение маршрута следования или изменение расписания движения пассажирских поездов в связи с предстоящим проведением "окон".
Телеграммы направляются причастным не позднее, чем за 5 суток до даты начала реализации проездных документов на пассажирские поезда и не позднее, чем за 15 суток до даты отправления пригородных поездов, расписания или маршруты следования которых изменяются при предоставлении "окна".

8.5. Формирование оперативных приказов на предоставление
"окон" и телеграмм-разрешений НЗ-1

8.5.1. Предоставление "окон" продолжительностью более 4 часов осуществляется на основании телеграмм-разрешений за подписью НЗ-1 или лица, его замещающего. Форма телеграммы-разрешения на предоставление "окна" представлена в Приложении N 9.
Предоставление "окон" продолжительностью 4 часа и менее осуществляется на основании оперативного приказа НЗ-1 или лица, его замещающего.
8.5.2. Проект телеграммы-разрешения готовится на основе заявки в АС АПВО-2 заказчиками "окон" (ДРП, ДИ, НТЭ, НС, РДКРЭ, ДКС, ДКРС, ДПО, РДЖВ, ДПМ и др.) совместно с ДОК и согласовывается с причастными подразделениями посредством ЕАСД или другими способами, установленными местной инструкцией.
Проект телеграммы-разрешения на производство работ на объектах искусственных сооружений формируется отделом инженерных сооружений П ДИ и должен быть согласован ПЗ ИССО или лица, его замещающего, и руководителями ДИСЗ.
Перечень работ и должностных лиц, имеющих право руководить работами на объектах искусственных сооружений, определен Инструкцией [6].
Телеграмма-разрешение на предоставление "окна" подписывается при наличии:
утверждения в Директивном плане-графике о производстве работ на указанном перегоне (станции) при соответствии даты проведения "окна" (для предоставления длительных закрытий и "окон" большой продолжительности, предусмотренных Директивным планом-графиком);
телеграммы-согласования на предоставление длительных закрытий и "окон" большой продолжительности, не предусмотренных Директивным планом-графиком (при условиях, указанных в п. 8.4 настоящей инструкции);
телеграммы-согласования об отмене или изменении расписания движения пассажирских и пригородных поездов (при необходимости);
разработанного ВГДП;
графика дежурства руководителей работ (при продолжительности "окна" более 12 часов);
рапорта от НЗТер о выполнении запланированных Мероприятий в длительные закрытия и рассмотрении планируемой технологии производства работ;
актов выверки прохождения трасс кабелей СЦБ, связи и электропитания, шурфления кабельных трасс с допуском на выполнение земляных работ (при выполнении земляных работ), образец акта представлен в Приложении N 14;
актов проверок исправного действия устройств СЦБ, электроснабжения и связи на ремонтируемом перегоне и прилегающих станциях (при длительном закрытии);
докладов руководителей причастных подразделений о готовности к проведению ремонтных работ в режиме длительного закрытия согласно Регламенту [13] (пример доклада ШЧ представлен в Приложении N 16), утвержденного ППР и (или) графика производства работ (пооперационного графика);
паспорта перегона (железнодорожной станции) (при длительном закрытии).
8.5.3. Проект оперативного приказа о предоставлении "окон" на планируемые сутки, выгруженный из отчетных форм АС АПВО-2 ответственными работниками Д, направляется на утверждение НЗ-1.
Образец оперативного приказа представлен в Приложении N 10.
8.5.4. Подписанные телеграммы-разрешения НЗ-1 и оперативный приказ о предоставлении "окон" не позднее, чем за 3 суток (на участках обращения высокоскоростных поездов - не позднее, чем за 4 суток), а утвержденных ускоренным порядком, не позднее, чем за 2 суток до начала работ, направляются посредством телеграфа, ЕАСД, электронной почты или другими установленными местной инструкцией способами в адрес заказчиков "окон" и причастных подразделений.
8.5.5. Выписки из утвержденного оперативного приказа, телеграммы-разрешения и ВГДП работники ДОК предоставляют в ДЦУП для каждого диспетчерского участка.
8.5.6. При необходимости внесения изменений (руководителя работ, причастных работников, используемой техники в "окно" и т.д.) ответственным работником заказчика "окна" формируется дополнение к приказу на предоставление "окон" или телеграмме-разрешению, которое подписывается НЗ-1 и не позднее, чем за 8 ч до начала "окна", направляется всем адресатам, указанным в телеграмме-разрешении на предоставление "окна".

9. Организация движения хозяйственных поездов

9.1. Продвижение хозяйственных поездов и СПС, а также одиночных (сплоток) локомотивов, к месту работ и обратно на производственную базу (место дислокации) должно осуществляться по специально разработанным "ниткам" в ВГДП со скоростями, установленными нормативными документами ОАО "РЖД" или паспортом СПС.
С целью исключения случаев смены локомотивных бригад в пути следования общее время нахождения хозяйственных поездов, путевых машин и СПС к месту работы в период работы в "окно" и возвращения обратно на базу не должно превышать 12 часов. При невозможности выполнения данного условия пункты смены локомотивных бригад, бригад ССПС должны быть заранее определены в ВГДП.
При организации смены локомотивных бригад и бригад самоходного подвижного состава, работающих по технологии "турной" езды, исполнитель работ организует проведение в установленном порядке предрейсового медицинского осмотра на ближайшей станции или на месте проведения работ аттестованными медицинскими работниками.
9.2. ДСП в соответствии с телеграммой-разрешением на предоставление "окна" и заявкой руководителя работ организует формирование хозяйственных поездов. Маневровая работа по формированию хозяйственных поездов производится руководителем маневров, предоставляемым заказчиком "окна".
Руководитель работ (или лицо, им уполномоченное) не менее чем за 1 час до отправления хозяйственных поездов со станции дислокации (формирования) докладывает ДСП железнодорожной станции отправления о готовности хозяйственного поезда для прицепки локомотива, проведения технического осмотра и опробования тормозов, а также о приведении самоходного подвижного состава, машин и механизмов в транспортное положение (с оформлением записи в журнале формы ДУ-58). О готовности хозяйственных поездов к отправлению ДСП докладывает ДНЦ.
9.3. Отправление хозяйственных поездов на железнодорожную станцию дислокации по окончании их работы должно осуществляться в соответствии с ВГДП после получения ДСП (ДНЦ) от руководителя работ (лица, им уполномоченного) уведомления о готовности к отправлению и приведению в транспортное положение (с оформлением записи в журнале ДУ-58). ДСП о готовности хозяйственных поездов к отправлению докладывает ДНЦ.
Ответственность за продвижение хозяйственных поездов к/от места производства ремонтных работ в соответствии с ВГДП возлагается на соответствующую Д при условии обеспечения причастными подразделениями полной и своевременной готовности техники к началу движения с железнодорожной станции отправления или с базы дислокации.
Порядок организации движения хозяйственных поездов, ССПС при производстве работ на железнодорожных путях и искусственных сооружениях устанавливается в соответствии с требованиями Приложения N 13 к ИДП [16].

10. Обязанности работников при предоставлении "окон"

10.1. Обязанности руководителя работ

10.1.1. До проведения работ в "окно" Руководитель работ обязан:
а) изучить:
проектную документацию;
организационно-технологическую документацию;
порядок организации движения поездов в период производства работ;
б) проверить:
наличие и исправность необходимых для выполнения работ в соответствии с ППР машин, механизмов, хозяйственных поездов, материалов, работников;
наличие разрешения на предоставление "окна" (телеграмма-разрешение или приказ НЗ-1), акта-допуска (при необходимости);
в) при назначении единым руководителем работ скоординировать с руководителями работ других подразделений планы производства работ и порядок взаимодействия;
г) выполнить другие действия, необходимые для подготовки и проверки готовности к проведению "окна", в том числе на проведение работ в пределах ИССО.
10.1.2. Руководитель работ обязан заблаговременно прибыть к ДСП железнодорожной станции производства работ или станции, ограничивающей перегон производства работ, предъявив служебное удостоверение (паспорт и свидетельство о прохождении аттестации для работника сторонней организации [4], [5]).
Руководитель работ несет ответственность за своевременность и качество выполнения работ, обеспечение требований безопасности движения и охраны труда в период их проведения.
В соответствии с письменным разрешением на производство работ не позднее, чем за один час до установленного времени начала "окна", должен оформить и передать ДСП железнодорожных станций, ограничивающих перегон, и ДНЦ заявку на отправление на перегон хозяйственных поездов.
Перед закрытием перегона (пути перегона) для производства работ в журнале формы ДУ-58 оформляется заявка. Перед производством работ на железнодорожной станции с закрытием движения - запись оформляется в журнале формы ДУ-46. Если закрытие движения влияет на прием, отправление или пропуск поездов по станции, время начала и продолжительность работ должно быть согласовано с ДНЦ. Нумерация хозяйственным поездам присваивается ДНЦ.
При передаче регистрируемого приказа ДНЦ на закрытие перегона (пути перегона) руководитель работ обязан принять данный приказ, находясь на рабочем месте ДСП или на месте производства работ, по регистрируемым каналам телефонной, линейно-путевой, ремонтно-оперативной и других видов (связи).
Руководитель работ обязан обеспечить заблаговременную, до окончания "окна", совместную проверку ответственными работниками ПМС, ПЧ, ШЧ (ИЧ), РЦС, ЭЧ и т.д. качества и соответствия выполненных работ проекту и требованиям нормативных документов, восстановление и проверку действия демонтированных и выключенных на период работ элементов рельсовых цепей, обратной тяговой сети, заземления опор контактной сети, устройств СЦБ и т.д. При выявлении нарушений руководитель работ по указанию ответственных работников должен организовать оперативное их устранение.
В случае неустранения выявленных нарушений и неполучения подтверждения о выполнении работ от ответственного работника, включение в действие соответствующих устройств (открытие устройства для движения поездов) запрещается.
По окончании работ руководитель работ должен по докладам ответственных работников убедиться в окончании работ, в приведении устройств в состояние, обеспечивающее безопасность движения, устранении выявленных недостатков, приведении техники и вагонов в транспортное положение и выводе работников из опасной зоны.

10.2. Обязанности единого руководителя работ

10.2.1. Назначается в установленном настоящей инструкцией порядке для координации работ, проводимых всеми исполнителями в период предоставления совмещенного "окна" на инфраструктуре.
До проведения работ в "окно" единый руководитель работ обязан:
а) обеспечить устойчивую регистрируемую связь со всеми руководителями работ, выполняющими работы в рамках совмещенного "окна";
б) скоординировать с руководителями работ порядок взаимодействия, план выезда и возвращения хозяйственных поездов, планы производства работ и порядок уведомления об окончании работ с приведением устройств в состояние, обеспечивающее безопасность движения;
в) заблаговременно прибыть к ДСП железнодорожной станции производства работ или станции, ограничивающей перегон производства работ, предъявив служебное удостоверение;
г) в соответствии с письменным разрешением на производство работ не позднее, чем за один час до установленного времени начала "окна", должен оформить и передать ДСП железнодорожных станций, ограничивающих перегон, и ДНЦ заявку на отправление на перегон хозяйственных поездов, в заявке должна быть указана последовательность отправления хозяйственных поездов, километр и пикет первоначальной остановки каждого хозяйственного поезда на перегоне (пути перегона), маршрут следования поездов по окончании работ. Заявки оформляются в журнале формы ДУ-58 при производстве работ на закрытом перегоне (пути перегона) и главных путях железнодорожных станций, при производстве работ на железнодорожной станции - в журнале формы ДУ-46. Нумерация хозяйственным поездам, отправляемым на перегон, присваивается ДНЦ.
В период проведения "окна" единый руководитель работ несет ответственность за обеспечение условий безопасности движения при координации руководителей работ.
По окончании работ единый руководитель работ обязан:
а) по докладам всех руководителей работ убедиться в окончании работ, приведении устройств в состояние, обеспечивающее безопасность движения и выводе всех хозяйственных поездов (допускается на двухпутных перегонах, оборудованных автоматической блокировкой или автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов, хозяйственные поезда после окончания работ отправлять на железнодорожную станцию по правильному железнодорожному пути);
б) передать уведомление ДНЦ лично или через ДСП ближайшей железнодорожной станции об окончании производства работ на инфраструктуре, отсутствии на перегоне хозяйственных поездов (или об их отправлении по правильному железнодорожному пути двухпутного перегона), отсутствии препятствий для безопасного движения поездов независимо от того, какая организация выполняла работы.
Открытие перегона (пути перегона или железнодорожной станции) для движения поездов осуществляется на основании уведомления (уведомлений), полученных от соответствующих уполномоченных представителей балансодержателя (в зависимости от характера выполняемых работ в "окно").

10.3. Обязанности уполномоченных представителей
балансодержателя при открытии перегона (железнодорожного
пути перегона или станции) по окончании ремонтных
и строительно-монтажных работ на инфраструктуре ОАО "РЖД"

10.3.1. Перед открытием железнодорожного пути (включая станционные пути и стрелочные переводы) для движения поездов после проведения работ в "окно" ответственные руководители балансодержателя инфраструктуры и исполнители работ обеспечивают совместную проверку состояния участка инфраструктуры, на котором производились работы.
10.3.2. Открытие перегона (пути перегона и/или железнодорожной станции) для движения производится по приказу ДНЦ только после получения уведомления (письменно, по телефону или радиосвязи) от уполномоченных представителей балансодержателя или от другого работника, указанного в телеграмме-разрешении или оперативном приказе НЗ-1 об отсутствии на перегоне (пути перегона и/или станции) хозяйственных поездов (или об их отправлении по правильному пути двухпутного перегона), а также других препятствий для безопасного движения поездов, независимо от того, какая организация выполняла работы, и указанием скорости, с которой открывается перегон (путь перегона и/или железнодорожной станции) для движения.
10.3.3. Открытие перегона (пути перегона и/или железнодорожной станции) для движения электроподвижного состава, когда характер выполняемых работ в "окно" предусматривал снятие напряжения в контактной сети, производится по приказу ДНЦ только после получения приказа энергодиспетчера соответствующего участка о подаче напряжения в контактную сеть соответствующего пути перегона (железнодорожной станции), наличии габарита контактной сети и указания мест (при наличии), требующих движения с опущенным токоприемником.
10.3.4. Разрешение о пользовании устройствами сигнализации, централизации и блокировки по соответствующим системам интервального регулирования движения поездов, когда характер выполняемых работ в "окно" предусматривал ремонт (изменение) устройств ЖАТ, производится по приказу ДНЦ только после получения уведомления (письменно, по телефону или радиосвязи) от начальника дистанции СЦБ (инфраструктуры) или от другого работника, указанного в телеграмме-разрешении или оперативном приказе НЗ-1 (по должности не ниже старшего электромеханика СЦБ), об окончании работ, выполненных проверках зависимостей и возможности организации движения поездов по тем или иным системам интервального регулирования.

10.4. Обязанности ответственных работников подразделений
филиалов ОАО РЖД, обеспечивающих проведение работ в "окно"

Ответственные работники обязаны заблаговременно:
прибыть к ДСП станции производства работ или станции, ограничивающей перегон производства работ, предъявив служебное удостоверение (паспорт для работника сторонней организации);
при необходимости сделать запись о производстве работ в "окно" на перегоне или главных путях станций - в журнале формы ДУ-58, на железнодорожной станции - в журнале формы ДУ-46.

10.5. Обязанности начальника железнодорожной станции

10.5.1. ДС заблаговременно при изменении расписания пассажирских и пригородных поездов в связи с предоставлением "окна" обязан сформировать временные ведомости занятия железнодорожных приемо-отправочных путей и не позднее, чем за сутки до начала "окна" предоставить их ДСП для ознакомления.
10.5.2. Перед началом работ ДС обязан:
ознакомить причастных работников железнодорожной станции с порядком проведения "окна" и письменным разрешением на предоставление "окна";
провести работникам целевой инструктаж об организации движения поездов и маневровой работы, особенностях работы в период проведения "окна" и технологии производства работ;
проверить наличие списков руководителей работ, копии письменного разрешения, при необходимости, временной ведомости занятия железнодорожных приемо-отправочных путей и местной инструкции по организации движения поездов и производства маневров на железнодорожной станции в период выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ, разработанной по типовой форме [30];
проверить явку в соответствии с письменным разрешением на предоставление "окна" ответственных работников Д.

10.6. Обязанности дежурно-диспетчерского персонала
дирекции управления движением

ДСП до начала "окна" обязан проверить явку руководителей работ, ответственных работников подразделений филиалов ОАО "РЖД" и наличие на станции хозяйственных поездов в соответствии с письменным разрешением на предоставление "окна".
ДНЦ (на перегоне) и ДСП (в пределах железнодорожной станции) запрещается предоставление "окна" при отсутствии указанного в письменном разрешении руководителя работ (в т.ч. единого руководителя работ) или ответственного работника смежных предприятий, а также при отсутствии предусмотренных технологией работы хозяйственных поездов.
Также до начала "окна" ДСП железнодорожных станций, ограничивающих перегон, обязаны в свободное от поездов время проверить исправность действия схемы смены направления по оставшемуся главному пути перегона. О результатах проверки ДСП должен доложить ДНЦ.
Порядок действий дежурно-диспетчерского персонала при выполнении работ на перегоне и железнодорожной станции определены в Приложении N 13 к Инструкции [16].

11. Контроль и учет выполнения "окон"

11.1. Контроль за выполнением Директивного и месячного плана-графика, учет предоставления и использования "окон" должен осуществляться на всех уровнях управления.
Порядок осуществления внутреннего контроля устанавливается в соответствии с Порядком [27].
11.2. Заказчик "окна" несет ответственность за внесение в АС АПВО-2 заявок на "окна" в соответствии с видом выполняемых работ согласно классификатору системы.
Заказчик "окна" является ответственными за внесение информации о фактической выработке в "окно".
ДНЦ является ответственным за своевременный и достоверный ввод информации в ГИД "Урал-ВНИИЖТ" <7> о фактическом начале и окончании "окна", в том числе аварийных, причинах отмены, срывов, несвоевременного начала и передержки "окна". Информация о проведенных "окнах" должна быть внесена ДНЦ в ГИД "Урал-ВНИИЖТ" в течение 2-х часов после окончания "окна", а причины отмены или срыва в течение 3-х часов с момента планового начала "окна" в соответствии с Классификатором [10].
--------------------------------
<7> Функционал ГИД "Урал-ВНИИЖТ" реализовывается в АС ГИД НП после ввода в эксплуатацию последнего.

Информация о причинах несогласования и неутверждения заявок на "окна", отзыва, отказа, отмены, в АС АПВО-2 вводится в соответствии с Классификатором [10].
Подразделения функциональных филиалов ОАО "РЖД" ведут учет количества и продолжительности запланированных и предоставленных "окон", длительных закрытий перегонов, выполненных объемов по всем видам работ, выработке путевой техники согласно единым фильтрам в АС АПВО-2, установленным отдельной телеграммой ОАО "РЖД".
К учету и анализу принимаются данные о количестве и продолжительности "окон".
Диспетчерский персонал региональных подразделений функциональных филиалов ОАО "РЖД" обеспечивает оперативное сопровождение работ на инфраструктуре при подготовке, предоставлении и окончании "окон".
Задачи и функции диспетчерского персонала региональных подразделений функциональных филиалов ОАО "РЖД", порядок диспетчерского сопровождения ремонтных и строительно-монтажных работ, содержания объектов инфраструктуры и взаимодействия диспетчерского персонала региональных подразделений функциональных филиалов ОАО "РЖД" между собой устанавливается Местной инструкцией.
11.3. Еженедельно проводятся совещания Региональной рабочей группы по подведению итогов выполнения работ на инфраструктуре, на которых рассматриваются точность планирования "окон", факты передержек, срывов, отказов, отзывов и отмен "окон", невыполнения запланированного объема работ, случаи смещения времени начала "окна", случаи несвоевременного согласования заявок с определением причин, ответственности и выработкой мер для недопущения подобных случаев.
Точность планирования "окон" определяется как отношение количества фактически состоявшихся "окон", соответствующих утвержденному месячному плану, к количеству запланированных "окон" в месячном плане.
По результатам проведенных совещаний ТС оформляется протокол, в необходимых случаях (не позднее 4-го числа следующего месяца) производится корректировка причин и отнесение ответственности за допущенные случаи нерационального использования "окон" на виновные дирекции в АС АПВО-2.
11.4. Ход реализации Директивного и месячного плана-графика рассматривает комиссия ОАО "РЖД" [26].
11.5. Анализ планирования, предоставления и использования "окон" за отчетный период формируется с использованием выходных отчетных форм АС АПВО-2.

12. Порядок взаимодействия железных дорог, Центральной
дирекции инфраструктуры, Центральной дирекции управления
движением, Центральной станции связи, Дирекции тяги,
Трансэнерго в рамках оказания услуг по предоставлению
"окон" сторонним контрагентам по принципу "одного "окна"

12.1. Данным разделом необходимо руководствоваться при поступлении в ОАО "РЖД" обращения сторонней организации:
о производстве ремонтных и строительно-монтажных или других видов работ в полосе отвода железных дорог или прилегающих к ней территорий (в том числе над полосой отвода), требующих временного прекращения движения поездов и предоставления "окон";
о пропуске через железнодорожный переезд негабаритной техники с выполнением работ по временному демонтажу (отводу) контактного провода, требующих временного прекращения движения поездов и предоставления "окон".
Требования раздела не распространяются на работы сторонних организаций, не требующие временного прекращения движения поездов и предоставления "окон".
Предоставление "окон" сторонним организациям, выполняющим СМР в рамках исполнения соглашения о компенсации собственниками инженерных сетей, линий связи и объектов недвижимого имущества, подлежащих сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объекта капитального строительства (СКП), заключенных между ОАО "РЖД" и собственниками инженерных сетей, линий связи и объектов недвижимого имущества, подлежащих сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объекта инфраструктуры ОАО "РЖД", осуществляется на безвозмездной основе.
12.2. Общая координация оказания услуги для сторонней организации по предоставлению "окон" возлагается на НЗ-1, либо другое уполномоченное должностное лицо железной дороги с учетом местных условий, установленных Местной инструкцией.
При этом во всех случаях должны соблюдаться принципы "одного "окна" и исключаться договорные отношения сторонней организации с несколькими филиалами ОАО "РЖД" и (или) их структурными подразделениями.
12.3. Работы по ремонту, модернизации, реконструкции и строительству объектов инфраструктуры сторонней организации, располагающихся в полосе отвода железной дороги, в том числе требующие для производства работ предоставления "окон", осуществляются на основании договора между ОАО "РЖД" в лице железной дороги и сторонней организацией владельца (будущего владельца) объекта инфраструктуры или инженерной коммуникации (организацией, уполномоченной владельцем на заключение данного договора).
Договор заключается в установленном в ОАО "РЖД" порядке на принципах "одного "окна", со стороны железной дороги подписывается НЗ-1 или другим уполномоченным должностным лицом.
12.4. Договор должен предусматривать:
а) выбор и указание места расположения нового или реконструируемого объекта инфраструктуры в полосе отвода железной дороги, в том числе ее пересечения с железнодорожной линией;
б) обязательства сторонней организации по сохранению, либо восстановлению поврежденных железнодорожных сооружений и устройств при проведении строительных работ в полосе отвода;
в) субаренду участка полосы отвода под инженерные коммуникации;
г) соблюдение требований Положения [2];
д) установку и демонтаж предохранительных устройств, в том числе страховочных или подвесных пакетов, если это предусмотрено проектной документацией;
е) технический надзор владельцев объектов железнодорожной инфраструктуры за производством СМР;
ж) порядок передачи реконструируемых инженерных коммуникаций и устройств ОАО "РЖД", попадающих в зону строительства;
з) соблюдение владельцем коммуникаций порядка допуска для работ в полосе отвода железной дороги для периодических освидетельствований, устранения неисправностей, ремонтов и эксплуатации инженерных коммуникаций в зоне пересечения с железнодорожными линиями;
и) право проведения ОАО "РЖД" любых ремонтных и строительных работ на железнодорожной инфраструктуре при соблюдении нормативных значений расстояний от сооружений и обустройств;
к) порядок оплаты, стоимость услуг и компенсации затрат причастных структурных подразделений ОАО "РЖД", вызванных производством работ по пересечению железнодорожных линий инженерными коммуникациями сторонних организаций;
л) ответственность сторонней организации за нарушения безопасности движения и охраны труда, а также порядок осуществления контроля соблюдения требований обеспечения безопасности движения при транспортировке подвижного состава к месту работ и при выполнении работ.
12.5. Для составления единой калькуляции стоимости предоставляемых услуг при заключении договора служба экономики и финансов железной дороги ежегодно, не позднее 10 января, запрашивает у причастных региональных подразделений функциональных филиалов ОАО "РЖД" единичные стоимости услуг по выдаче Технических условий, согласованию проектной документации, проекта производства работ, осуществлении 1 часа технического надзора при производстве работ, комиссионного осмотра тягового подвижного состава сторонней организации, комиссионного выбора трассы пересечения, предоставления "окна", прочих услуг.
Региональные подразделения функциональных филиалов ОАО "РЖД" по итогам выполненных расчетов не позднее 20 января предоставляют в службу экономики и финансов железной дороги единичные стоимости услуг. При различных затратах на предоставление услуги в различных регионах железной дороги допускается расчет нескольких индивидуальных стоимостей для одной услуги с пояснением порядка их применения.
Служба экономики и финансов железной дороги не позднее 1 февраля рассматривает предоставленные региональными подразделениями функциональных филиалов ОАО "РЖД" единичные стоимости предоставления услуг, формирует обобщенный перечень предоставляемых услуг, в том числе оказываемых самой железной дорогой, и утверждает у НЗ-1.
12.6. Главным инженером железной дороги с привлечением причастных региональных подразделений функциональных филиалов разрабатывается и утверждается типовая форма договора на оказание услуги по предоставлению "окна".
В типовой форме договора должно быть предусмотрено, что:
при возникновении по вине сторонней организации отказа технического средства или технологического нарушения, повлекших за собой нарушение графика движения поездов, сторонней организацией производится компенсация понесенных ОАО "РЖД" убытков в соответствии с методикой их расчета;
сторонние организации несут финансовую ответственность за отказ от запланированного и утвержденного "окна", а также за его передержку.
12.7. Порядок взаимодействия региональных подразделений функциональных филиалов ОАО "РЖД" при оказании услуги по предоставлению "окна" сторонней организации.
12.7.1. Для производства работ в пределах полосы отвода железной дороги или в непосредственной от нее близости, а также в пределах земельных участков обособленно стоящих объектов инфраструктуры ОАО "РЖД" независимо от формы собственности и принадлежности к структуре ОАО "РЖД" сторонняя организация направляет письменное обращение (далее - Обращение) в адрес НЗ-1. Обращение может быть направлено заказным письмом или нарочным через почтовую экспедицию железной дороги.
12.7.2. В Обращении в обязательном порядке должно быть указано:
наименование Сторонней организации;
контактный телефон Сторонней организации;
адрес электронной почты;
почтовый адрес Сторонней организации;
ИНН/КПП;
банковские реквизиты;
суть обращения и вид работ, которые планирует выполнить Сторонняя организация;
наименование проекта (рабочего проекта), по которому планируется производство работ, и дата его согласования железной дорогой;
наименование станции или перегона с привязкой к километру и пикету железнодорожного участка, в пределах полосы отвода железной дороги которого планируется производство работ.
12.7.3. К обращению сторонняя организация прикладывает следующие документы:
а) ППР;
б) заверенную копию учредительных документов;
в) заверенную копию договора подряда на строительство, реконструкцию и (или) ремонт объекта инфраструктуры, заключенного в установленном порядке;
г) заверенную копию свидетельства на право выполнения указанных в договоре работ, полученного от саморегулируемой организации;
д) график выполнения работ;
е) проект графика предоставления "окон" с указанием расчетной потребности в обеспечении материалами, машинами и механизмами по технологии работ, предусмотренной в разделе ПОС проекта, в том числе потребности в предоставлении в аренду тягового подвижного состава ОАО "РЖД", с указанием по каждому планируемому "окну" представителя сторонней организации, осуществляющего общее руководство работами, и производителя работ (Фамилия, имя, отчество, должность);
ж) стройгенплан с указанием размещения вахтовых поселков, мест отстоя техники;
з) мероприятия по недопущению использования строительной техники в нерабочее время, порядок медицинского осмотра водителей строительной техники;
и) приказы о назначении ответственного за производство работ (руководителя работ) на данном объекте и ответственного за обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;
к) список работников, прошедших аттестацию в соответствии с Положением [5].
В случае, если руководители работ и работники, привлекаемые к выполнению работ, связанные с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО "РЖД", не проходили аттестацию в соответствии с требованиями указанного нормативного правового акта, то аттестация проводится до начала производства работ;
л) список лиц, допущенных к управлению ССПС, локомотивами и землеройной техникой, копии свидетельств на право управления ССПС и локомотивами и другие документы;
м) перечень ССПС, локомотивов, землеройной техники, допущенных владельцем инфраструктуры в установленном ОАО "РЖД" порядке, с указанием сроков заводского, деповского ремонта и других плановых видов работ с приложением акта контрольно-технического осмотра, или список ССПС, локомотивов, землеройной техники, подлежащей допуску. При выполнении работ на нескольких объектах в границах данного региона данные документы повторно не представляются;
н) перечень субподрядных организаций, привлекаемых для выполнения отдельных видов работ с приложением разрешительных документов, указанных в данном пункте настоящей Инструкции;
п) копии приказов по сторонней организации о назначении лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков.
Вышеперечисленные документы должны быть подписаны руководителем сторонней организации и заверены печатью.
12.7.4. При необходимости пропуска негабаритного подвижного состава через железнодорожный переезд сторонняя организация предоставляет сведения о наименовании железнодорожного переезда, сведения о планируемой дате и времени проезда, сведения о габаритах пропускаемой техники и груза, другие сведения, необходимые для оценки объема подготовительных работ для пропуска негабаритного подвижного состава. К обращению заявитель прикладывает эскиз погрузки негабаритного груза на автотранспортное средство с указанием его габаритных размеров.
12.7.5. Прием, первичная обработка и регистрация Обращения сторонней организации с использованием ЕАСД производится отделом документационного обеспечения железной дороги в первый рабочий день с даты поступления, и направляется для рассмотрения НЗ-1.
12.7.6. НЗ-1 в 3-суточный срок с даты поступления Обращения проводит его рассмотрение, по итогам которого дает поручение следующим ответственным исполнителям:
а) главному инженеру железной дороги - о рассмотрении проекта производства работ и выдаче сторонней организации в установленном порядке акта-допуска на производство работ;
б) начальнику Д - о рассмотрении представленного сторонней организацией проекта графика предоставления "окон" и его корректировки (при необходимости), а также включения данных работ в соответствии с требованиями настоящей Инструкции в календарный план-график работ на месяц;
в) начальнику Т - о рассмотрении вопроса предоставления сторонней организации на период производства работ в аренду тягового подвижного состава;
г) начальнику Т - об организации в установленном порядке допуска тягового подвижного состава сторонней организации с оформлением акта контрольно-технического осмотра по представленному заявителем перечню уведомлений;
д) начальнику ДИ, НТЭ - об организации в установленном порядке допуска ССПС и землеройной техники сторонней организации с оформлением акта контрольно-технического осмотра по представленному заявителем перечню;
е) главному инженеру и начальнику службы экономики и финансов железной дороги - о подготовке договора о предоставлении услуг и расчета стоимости предоставляемых услуг.
12.7.7. По результатам рассмотрения представленных материалов главным инженером железной дороги в течение 5 рабочих дней согласовывается ППР и выдается акт-допуск или обоснованные замечания, которые должны быть устранены Сторонней организацией в течение 5 рабочих дней.
12.7.8. Одновременно с утверждением ППР и актом-допуском сторонней организации ответственными работниками ДИ выдаются:
а) копии приказов о назначении ответственных лиц за организацию надзора и осуществления контроля со стороны подразделений ОАО "РЖД" за производством работ;
б) сводный план существующих инженерных коммуникаций на момент передачи строительной площадки под строительство (реконструкцию), согласованный балансодержателями.
12.7.9. Организация допуска тягового подвижного состава, ССПС, землеройной техники сторонней организации с оформлением акта контрольно-технического осмотра по представленному заявителем перечню производится в установленном порядке начальниками Т, ДИ и НТЭ соответственно в течение 5 рабочих дней.
12.7.10. Письменное обращение руководителя сторонней организации о проведении аттестации работников должно содержать следующую информацию:
а) наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя, почтовый адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес электронной почты, контактные данные;
б) сведения о работниках, подлежащих аттестации: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование и специальность, наименование учебного заведения и год его окончания, номер документа об образовании, профессия (должность), стаж работы в должности (по профессии), сведения о предыдущих аттестациях, вид аттестации (первичная, периодическая, внеочередная).
К письменному обращению прикладываются копии документов, удостоверяющих личность работников, подлежащих аттестации.
12.7.11. Начальник Т на основании обращения сторонней организации, содержащего сведения о требуемом количестве локомотивов, передаваемых в аренду, и сроке их аренды, рассматривает возможность предоставления сторонней организации на период производства работ в аренду тягового подвижного состава ОАО "РЖД".
По итогам рассмотрения Т не позднее 5 рабочих дней с даты поступления обращения проводится расчет потребности и времени использования локомотивов и локомотивных бригад, готовится и направляется Сторонней организации коммерческое предложение.
Сторонняя организация в течение 3 рабочих дней должна рассмотреть и согласовать данное коммерческое предложение. При наличии разногласий они должны быть урегулированы совместно в течение 5 рабочих дней.
Согласованное сторонней организацией коммерческое предложение не позднее 15 рабочих дней с даты поступления обращения, Т направляется в службу экономики и финансов железной дороги для заключения со сторонней организацией договора.
Начальником Т не позднее одного рабочего дня с даты заключения железной дорогой договора подписывается распоряжение о предоставлении в аренду сторонней организации локомотива, с указанием его серии, номера, депо приписки, периода времени передачи в аренду, порядка и места передачи тягового подвижного состава сторонней организацией, порядок заказа сторонней организацией локомотива в депо, других вопросов, необходимых для качественного предоставления услуги. Данное распоряжение региональной дирекции тяги направляется для исполнения в ТЧЭ, копия направляется сторонней организации.
12.7.12. По итогам рассмотрения Проекта графика предоставления "окон", при необходимости его корректировки, начальник Д формирует и в течение 5 рабочих дней направляет сторонней организации скорректированный Проект графика предоставления "окон", который должен быть рассмотрен и согласован сторонней организацией в течение 5 рабочих дней.
Допускается в те же сроки организовать совместное с заявителем рассмотрение скорректированного Проекта графика предоставления "окон". По итогам совместного рассмотрения начальник Д и уполномоченный представитель Сторонней организации согласовывают Проект графика предоставления "окон".
При наличии разногласий по графику производства работ и проекту графика предоставления "окон", они должны быть совместно устранены в течение 15 календарных дней с даты поступления Обращения.
Во всех случаях работы сторонних организаций должны соблюдаться сроки предоставления заявок на производство работ, подготовки и издания разрешений на предоставление "окон", а (в предусмотренных настоящей Инструкцией случаях) - согласование предстоящих работ ОАО "РЖД".
Порядок и сроки подачи заявок на предоставление "окон" для работы сторонних организаций, а также перечень прилагаемых к заявкам документов, устанавливаются распоряжением Н и размещаются на сайте железной дороги в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
12.7.13. На основании согласованного графика предоставления "окон" Д не позднее 14 числа месяца, предшествующего планируемому, включает данные работы и "окна" в проект календарного плана-графика работ на соответствующий месяц.
12.7.14. Рассмотрение и утверждение проекта календарного плана-графика на предстоящий месяц проводится Региональной рабочей группой, в соответствии с установленным настоящей Инструкцией порядком.
12.7.15. По итогам рассмотрения и включения заявленных сторонней организацией работ в календарный план-график Д:
в суточный срок в письменном виде уведомляет стороннюю организацию с приложением выписки из календарного плана-графика по работам сторонней организации;
направляет выписки из календарного плана-графика по работам сторонней организации для планирования работ в причастные подразделения функциональных филиалов ОАО "РЖД";
производит расчет и направление в финансово-экономическую службу железной дороги стоимости предоставляемой Дирекцией услуги за разработку и предоставление "окна";
в соответствии с календарным планом-графиком работ на месяц совместно с уполномоченным сторонней организацией производителем работ готовит и за стороннюю организацию посредством АС АПВО-2 подает заявки на предоставление "окон" для производства работ.
12.7.16. Для формирования заявки и расчета стоимости предоставляемых услуг причастные руководители структурных подразделений функциональных филиалов ОАО "РЖД" в течение 3 рабочих дней с даты утверждения календарного плана-графика на месяц предоставляют (при необходимости) список фамилий, должностей работников и наименование линейного подразделения, которые будут осуществлять технический надзор за производством работ в соответствии с договором, актом-допуском, наряд-допуском, проектной документацией, Положением о безопасности, и время, на которое данные работники будут задействованы Д и начальнику финансово-экономической службы железной дороги.
При поступлении обращения сторонней организации о необходимости пропуска негабаритного подвижного состава начальник ДИ с привлечением представителей НТЭ рассматривает комплекс работ, необходимых для пропуска (отвод контактного провода, демонтаж контактного и несущего провода, линий продольного энергоснабжения и т.д.), а также производит расчет времени, необходимого на выполнение подготовительных работ, пропуска негабаритного подвижного состава и восстановления объектов инфраструктуры. Проведенные расчеты, в том числе их стоимость, направляет в Д и службу экономики и финансов железной дороги.
Пропуск негабаритного подвижного состава через железнодорожный переезд должен планироваться в период "окна", предусмотренного на данном перегоне (станции) ВГДП.
12.7.17. Сформированные совместно с Д заявки на предоставление "окон" для производства работ подписываются уполномоченным представителем сторонней организацией производителем работ.
12.7.18. Заявки на "окна" сторонних организаций рассматриваются Региональной рабочей группой с приглашением при необходимости уполномоченного представителя сторонней организации. На основании заявок уточняется технология работы, готовность к работе и достаточность машин, механизмов и рабочей силы, своевременность погрузки и доставки к месту работ материалов, выполнение организационно-технических мероприятий по подготовке к проведению работ в "окно", обеспечение работ локомотивами и локомотивными бригадами, организация пропуска плановых поездопотоков и другие вопросы, связанные с предоставлением "окон".
При необходимости длительного производства работ сторонней организацией, срок производства работ не должен превышать одного календарного месяца.
12.7.19. В целях осуществления контроля за заключением договора со сторонней организацией и оплатой по договору причитающихся платежей за оказанные услуги телеграмма-разрешение на производство работ сторонними организациями согласовывается дополнительно со службой экономики и финансов железной дороги.
Начальником Д телеграмма-разрешение в установленном в договоре порядке в день подписания направляется в адрес сторонней организации, а также всех причастных руководителей в установленном настоящей инструкцией порядке.
12.7.20. Начальником службы экономики и финансов службы железной дороги на основе поступивших от структурных подразделений функциональных филиалов ОАО "РЖД" калькуляций и сведений по объему предоставляемых единичных услуг, а также услуг, оказываемых самой железной дорогой, составляется единая калькуляция стоимости оказываемой сторонней организации услуги по предоставлению "окна" и не позднее 25 рабочих дней с даты поступления обращения с предоставленным главным инженером железной дороги проектом договора направляется сторонней организации.
Сторонняя организация в течение 3 рабочих дней должна рассмотреть и согласовать проект договора. При наличии разногласий они должны быть урегулированы совместно в течение 5 рабочих дней. При наличии разногласий по тексту договора урегулирование производится на согласительном совещании у НЗ-1. В любом случае договор на предоставление услуги должен быть заключен не позднее 30 рабочих дней с даты поступления обращения.
12.7.21. За сутки до начала работ должна быть проведена комиссионная проверка выполнения сторонней организацией подготовительных работ, указанных в ППР, с оформлением результатов проверки актом произвольной формы. Комиссия назначается распоряжением заместителя главного инженера железной дороги (по территориальному управлению) за трое суток до предусмотренной календарным планом-графиком работ на месяц даты и телеграммой-разрешением для производства работ.
На месте работ рассматривается выполнение сторонней организацией всех подготовительных работ, в том числе:
а) установка предохранительных устройств, подвесных или страховочных пакетов, если это предусмотрено согласованными с владельцем инфраструктуры проектной документацией и ППР;
б) организация обеспечения регистрируемой телефонной связи посредством устройств проводной или сотовой связи места работ с ДНЦ и ДСП, ограничивающим перегон;
в) организация освещения места производства работ в темное время суток;
г) выполнение проекта водопонижения, если это предусмотрено проектной документацией;
д) создание достаточного запаса балласта в доступных местах в зоне производства строительных работ;
е) организация геодезического контроля за работами по пересечению и положением железнодорожного пути по 50 метров в обе стороны от перехода;
ж) выполнение видимого обозначения (столбиками, вешками, лентой) существующих подземных инженерных коммуникаций ОАО "РЖД";
з) другие мероприятия, предусмотренные проектом производства работ и актом-допуском.
12.7.22. По итогам комиссионной проверки дается разрешение строительной организации на производство работ в соответствии с телеграммой-разрешением. При выявлении замечаний сторонней организации устанавливается срок на их устранения до времени производства работ, предусмотренного телеграммой-разрешением (незначительные замечания), или производится запрет на производство работ с уведомлением и направлением копии акта проверки Д. Устранение незначительных недостатков, выявленных в ходе комиссионной проверки, не позднее чем за час до начала "окна" производит исполнитель работ.
Работник ОАО "РЖД", осуществляющий технический надзор, проверяет устранение выявленных недостатков с уведомлением ДНЦ о возможности предоставления "окна".
12.7.23. В случае возникновения в ходе реализации данного регламента взаимодействия разногласий между структурными подразделениями функциональных филиалов ОАО "РЖД", или между ними и сторонней организацией они подлежат своевременному рассмотрению НЗ-1, для чего руководитель соответствующего структурного подразделения функционального филиала ОАО "РЖД" организует согласительное совещание.
12.8. Система контроля качества предоставляемой услуги, ответственность сторон и участников процесса.
12.8.1. НЗ-1 ежемесячно рассматривает вопрос своевременности и качества оказания услуги по предоставлению сторонним организациям "окон".
12.8.2. Начальник Д ведет учет поступивших обращений сторонних организаций на предоставление "окон" и фактического их предоставления (в т.ч. в соответствии с утвержденным календарным планом-графиком), причин непредоставления, срывов, передержек или отказов сторонних организаций от использования "окон".
12.8.3. Ответственные за своевременное и качественное выполнение работ по процессам:
за рассмотрение, согласование и утверждение проекта производства работ, выдачу наряда-заказа на проведение работ, аттестацию ответственных руководителей сторонней организации является главный инженер железной дороги;
за выделение персонала для осуществления технического надзора, осуществление допуска на инфраструктуру общего пользования ССПС, землеройной техники сторонней организации, предоставление сведений для составления договора, в том числе расчета стоимости оказываемой услуги являются структурные подразделения функциональных филиалов ОАО "РЖД";
за предоставление локомотива и локомотивной бригады в аренду, предоставление сведений для составления договора, в том числе расчета стоимости оказываемой услуги является Т;
за рассмотрение Проекта плана предоставления "окон", составление и утверждение календарного плана-графика предоставления "окон" на предстоящий месяц, разработку ВГДП, ввод заявки сторонней организации на "окно" в АС АПВО-2, подготовку телеграммы-разрешения, предоставление сведений для составления договора, в том числе расчета стоимости оказываемой услуги является Д;
за расчет единой калькуляции стоимости предоставляемой услуги, заключение договора на предоставление услуги является служба экономики и финансов железной дороги.

Приложение N 1
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ
НА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД

Порядок разработки директивного плана-графика производства
работ на инфраструктуре (годовое планирование)

Приложение N 2
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ
НА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ МЕСЯЦ

Месячное планирование "окон" для выполнения работ
на инфраструктуре

Приложение N 3
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ "ОКОН"

Оперативное планирование "окон" для выполнения работ
на инфраструктуре

Приложение N 4
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

МАТРИЦА КЛАССИФИКАЦИИ "ОКОН"

Приложение N 5
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ИСКЛЮЧАЮЩИЙ НАЗНАЧЕНИЕ ЕДИНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
РАБОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА В "ОКНА"
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ ТЕКУЩЕМУ
СОДЕРЖАНИЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 4 ЧАСА И МЕНЕЕ

N
п/п	Наименование работ	Руководитель работ по должности не ниже	
1.	Замена инвентарных рельсов на рельсовые плети, смена рельсовых плетей, разрядка (перераспределение) температурных напряжений в рельсовых плетях при всех видах скреплений в кривых радиусом 350 м и менее	Заместители начальника ПМС (далее - ПМСЗ) или ПЧ (ИЧ) (далее - ПЧЗ (ИЧЗ)	
2.	Выправка перекоса и угона катков подвижных опорных частей мостов	ПЧЗ (ИЧЗ) или заместитель начальника ПЧ ИССО (далее - ПЧЗ ИССО)	
3.	Сплошная смена мостовых брусьев на мостах	ПЧЗ (ИЧЗ) или ПЧЗ ИССО	
4.	Смена плит безбалластного мостового полотна (БМП) (работы ведутся силами специализированной подрядной организацией или колонной ПЧ ИССО)	ПЧЗ (ИЧЗ) или ПЧЗ ИССО	
5.	Укладка подвесных пакетов (рельсовых или специальной конструкции) и движение по ним до окончания их осадки	ПЧЗ (ИЧЗ)	
8.	Замена отдельных звеньев рельсошпальной решетки	ПЧЗ (ИЧЗ) или ПЧЗ ИССО	
11.	Работы выполняемые по установке жестких поперечин	ЭЧЗ, ЭЧГ	
12.	Работы по переводу контактной подвески с гибкой поперечины на жесткую поперечину	ЭЧЗ, ЭЧГ	
13.	Работы по монтажу нового или замене переходов линий через контактную сеть	ЭЧЗ, ЭЧГ	
14.	Работы по замене анкерных участков контактных проводов, несущих тросов, усиливающих проводов с применением демонтажно-раскаточного комплекса поездов (ДРНЖ и т.д.)	ЭЧЗ, ЭЧГ	

Приложение N 6
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИКРЕПЛЯЕМЫХ В КАРТОЧКУ "ОКНА"
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАЯВКИ В АС АПВО

N
п/п	Наименование приложения к заявке	Фаза прикрепления документа	Срок предоставления документа	Условие предоставления документа	Ответственное подразделение за оформление (и внесение в АС АПВО)	
Для предоставления "окон" любой продолжительности
(за исключением работ по текущему содержанию инфраструктуры
в границах железнодорожных станций
продолжительностью до 2 часов):	
1	Телеграмма-согласование	На этапе согласования заявки	За 4 суток до начала "окна"	На "окна" большой продолжительности и длительные закрытия (в случаях, определенных инструкцией)	ЦЗ-ЦД
(Заказчик "окна")	
2	Телеграмма-разрешение	После подписания НЗ-1	Не позднее 16:00 местного времени за сутки, предшествующие началу производства работ в "окно"	На "окна" продолжительностью более 4-х часов	НЗ-1
(Заказчик "окна")	
3	Утвержденный ППР, пооперационный график
либо
иная ОТД (для подготовительных и отделочных работ)	На этапе формирования заявки в АС АПВО	Не позднее чем за 4 суток до начала работ (для участков высокоскоростного движения - за 6 суток)	На объекты строительства или на все виды ремонтных работ в "окно", продолжительностью более 4-х часов	Заказчик "окна"	
4	ОТД на работы по текущему содержанию объектов инфраструктуры	На этапе формирования заявки в АС АПВО	Не позднее чем за 4 суток до начала работ (для участков высокоскоростного движения - за 6 суток)	На "окна"
продолжительностью до 4-х часов включительно	Заказчик "окна"	
5	Акт инструментальной выверки прохождения трасс кабелей СЦБ, связи и электропитания	Прикрепляется к карточке "окна" при согласовании заявки в АС АПВО	Не позднее чем за 4 суток до начала работ (для участков высокоскоростного движения - за 6 суток)	Где требуется проведение земляных работ	Заказчик "окна"	
6	Акт шурфления кабельных трасс с допуском на выполнение земляных работ	Прикрепляется к карточке "окна" при согласовании заявки в АС АПВО	Не позднее чем за 4 суток до начала работ	Где требуется проведение земляных работ	Заказчик "окна"	
7	Графики дежурств в "окно" руководителей работ и ответственных работников смежных структурных подразделений	Прикрепляются к карточке "окна" при согласовании заявки в АС АПВО	Не позднее чем за 4 суток до начала работ (для участков высокоскоростного движения - за 6 суток)	При продолжительности "окна" более 12 часов	Причастные подразделения и заказчик "окна"	
8	Техническое задание на производство работ по выправке пути, по глубокой очистке балласта	Прикрепляется к карточке "окна" не позднее 16:00 суток предшествующих началу "окна"	Не позднее 16:00 местного времени за сутки, предшествующие началу производства работ в "окно"	При производстве данного вида работ	Заказчик "окна"	
9	Разрешающие документы на производство работ для подрядных и сторонних организаций [11]	Прикрепляются к карточке "окна" при формировании заявки в АС АПВО	1. В соответствии с законодательством и договором.
2. На этапе месячного планирования	В случае выполнения работ подрядной или сторонней организацией	1. Заказчик "окна"
2. Причастные структурные подразделения	
Для выполнения работ в режиме закрытого перегона
дополнительно формируются:	
10	Телеграмма НЗ-1 в адреса ЦЗ-1, ЦЗ-ЦД, ЦЗ-ЦЦИ о готовности к проведению работ	Прикрепляется к карточке "окна" при формировании заявки в АС АПВО	Не позднее чем за 4 суток до начала работ (для участков высокоскоростного движения - за 6 суток)	Во всех случаях	Заказчик "окна"	
11	Единый паспорт перегона (станции)	Прикрепляются к карточке "окна" при формировании заявки в АС АПВО	Не позднее чем за 4 суток до начала работ (для участков высокоскоростного движения - за 6 суток)	Во всех случаях	Заказчик "окна"	

Приложение N 7
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЛЕГРАММЫ-ЗАПРОСА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ
И НА ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

ТЕЛЕГРАММА

ЦД, ЦЛ, ЦДРП, ЦДИ, ЦП, ФПК

Для производства работ по _______________ (капитальный ремонт, реконструкция, новое строительство, ИССО и т.п.) на направлении ____________ - ______________, региона _____________ железной дороги, прошу Вас согласовать предоставление "окна"/"окон" по _____________ пути перегона ______________ - ______________ с ______ часов ______ минут до ________ часов ______ минут 202__ года (время, дата), продолжительностью __________ часов/суток;
1. Основание:
Производство работ по титулу "______________";
2. Направление:
_____________ - ___________, диспетчерский участок ____________ - ____________, перегон ___________ - _____________, __________ путь, станции, ограничивающие перегон: __________(км, ПК), ____________ (км, ПК);
3. Дата и время производства работ:
Дата и время предоставления всех запрашиваемых "окон";
4. Объем работ выполняемых в "окно":
Объем работ в каждое "окно";
5. В связи с предоставлением "окон" требуется:
5.1. Изменение расписания пассажирских и пригородных поездов с изменением времени приема/сдачи по междорожному стыковому пункту______________:
нр. ______ назначение поезда отправлением из ___________ (ст. отправления) _____________ дата отправления ___________ следует действующим расписанием до станции ___________ дата время прибытия/отправления/проследования (графиком), далее ___________ станция изменения расписания _____._______ (+/- ______ мин);
5.2. Изменение расписания пассажирских и пригородных поездов без изменения времени приема/сдачи по междорожному стыку Александров:
нр. ______ назначение поезда отправлением из ___________ (ст. отправления) _____________ дата отправления следует действующим расписанием до станции _____________ дата время прибытия/отправления/проследования (графиком), далее ____________ станция изменения расписания _______._______ (+/- _____ мин) сдачей по МДСП _________ дата, время _________ (графиком), далее согласно действующему расписанию;
5.3. Не назначать пассажирские поезда:
нр. _______ назначение поезда отправлением из _________ (ст. отправления) ____________ дата отправления __________;
5.4. Отменить пассажирские и пригородные поезда:
нр. _______ назначение поезда отправлением из _________ (ст. отправления) ____________ дата отправления __________;
5.5. Назначить пассажирские поезда:
нр. _______ назначение поезда отправлением из _________ (ст. отправления) ____________ дата отправления __________;
5.6. Изменить маршрут следования пассажирских поездов с пропуском их через участок ___________, вместо ___________:
нр. _______ назначение поезда отправлением из _________ (ст. отправления) ____________ дата отправления __________.
Ответственным за организацию производства работ и обеспечение безопасности движения поездов, своевременное открытие перегона назначается ДИ _______________, за организацию движения поездов согласно вариантному графику - Д _______________.

НЗ-1

Исп. Ф.И.О., (подразделение)
(телефон исполнителя)

Приложение N 8
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЛЕГРАММЫ-ЗАПРОСА НА ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА
ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ

ТЕЛЕГРАММА

ЦЗ-ЦД, ЦЗ-ЦДИ,
ЦЛ, ЦДРП, ФПК
(адреса в соответствии с видом работ и необходимостью изменения расписаний пассажирских поездов)

В соответствии с директивным планом-графиком для производства работ по (вид работ) по (номер) пути перегона/станции (название перегона/станции) направления ___________ (наименование направления) ___________ дороги с ______ ч. _______ мин.
дата до __ ч. __ мин. дата год, продолжительностью __ часов:
1. Прошу Вас согласовать изменение расписания пассажирских поездов проследованием по (наименование) железной дороге с изменением времени сдачи по стыку __________ (название стыка):
нр. (номер поезда) _________ сообщение поезда, отправлением из (станция отправления), дата, время (если +/- мин.), стык название стыка, даты, время (+/- мин.), прибытием (станция прибытия) дата, время (если +/-).
2. Прошу согласовать изменение маршрута следования пассажирским поезда следованием через ... указывается маршрут следования поездов который необходимо разрешить, вместо ... указывается маршрут, который был изначально:
нр. (номер поезда) __________ сообщение поезда, отправлением из (станция отправления), дата, время (если +/- мин.), прибытием (станция прибытия) дата, время (если +/-).
3. Прошу согласовать изменение расписаний пассажирским поездам по дороге (наименование дороги):
нр. (номер поезда) __________ сообщение поезда, отправлением из (станция отправления), дата, время (если +/- мин.), прибытием (станция прибытия) дата, время (если +/-).
4. Прошу не назначать пассажирские поезда и с использованием их расписаний дополнительные:
нр. (номер поезда) сообщение поезда, отправлением из (станция отправления), дата.
5. Объем, выполняемый в "окно": ....
6. Краткое описание осуществления движения в период производства работ (как пример): первые двое суток движение нечетных поездов будет осуществляться по неправильному четному пути перегона _________ (наименование перегона) по сигналам АЛСН...
7. Ответственным за организацию производства работ и своевременное открытие перегона назначается ДРП Ф.И.О., за обеспечение безопасности движения поездов ДИ Ф.И.О., за организацию движения поездов согласно вариантному графику - Д Ф.И.О.

НЗ-1	Ф.И.О.	
"___" ____________ 20__ г.
N ИСХ- ____________________		
Исп. Ф И О., ДОК
(телефон исполнителя)		

Приложение N 9
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

ОБРАЗЕЦ ТЕЛЕГРАММЫ-РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ "ОКНА"

		КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Правила электробезопасности для работников ОАО "РЖД" при обслуживании устройств и сооружений контактной сети и линий электропередачи утверждены распоряжением ОАО "РЖД" N 699р от 19.04.2016, а не 16.04.2016.		
Северная железная дорога

ТЕЛЕГРАММА

Из Ярославля Упр. N _______________________________________
ДЦУП, ДРП, НКИ, ПЧМ Ярославль, (передано по ЕАСД)
НЗтер-2, ДИЗТЕР-ДИТЕР-2, ДЦС-2, ДНЦ Вологда-2 - Череповец-1, ПМС-113, ПЧ-16, ЭЧ-4, ШЧ-3, ВЧДЭ-7, ТЧЭ-6, 10, 11, ТЧ приг., ПЧМ Вологда, ДС Вологда-1, Вологда-2, Лоста, Шексна, Шеломово, Хемалда, Череповец-1 Сев.
Копия: ТЧЭ - 22 Окт.

17 июля 2023 г. разрешаю предоставить "окно":
ПМС-113 (заявка в АС АПВО-2 N 2084386) продолжительностью 16 часов 00 минут с 10 час. 40 мин. 17 июля 2023 г. до 02 час. 40 мин. 18 июля 2023 г. по 2 пути перегона Шеломово-Шексна на 497 км пк 1 - 511 км пк 6 с занятием участка 2 пути станции Шексна от сигнала Ч до сигнала Ч2 для капитального ремонта пути на новых материалах: выгрузка плетей с применением РВС N на км/пк; смена инвентарных рельсов на плети с вводом плетей в оптимальный температурный интервал с применением УК 25/9-18 N на км/пк; сварка плетей с применением ПРСМ-4 N на км/пк; укладка РШР применением УК-25/25 N на км/пк и далее набор работ со снятием напряжения в контактной сети АДМ N 1325:
- с 2, 4, 6 путей станции Шексна от сигнала Ч до СП N 15 и с 2 пути перегон Шеломово - Шексна на все время "окна";
Назначить:
Единых руководителей работ от ПМС-113 ПМС ФИО (далее по графику) - ответственными за своевременную (не менее, чем за час до начала "окна") подачу заявки на оформление записи в журнале формы ДУ-58 (ДУ-46 на станции) на отправляемые хозяйственные поезда для работы в "окно", общую координацию выполнения работ со всеми руководителями работ, обеспечение условий безопасности движения и своевременную подачу уведомления об окончании работ;
Руководителей работ от ПМС-113 ПМС ФИО (далее по графику) - ответственными за соблюдение технологии проведения "окна", охрану труда, безопасное производство работ, своевременное оформление перевозочных документов на отправляемые на "окно" и с "окна" хозяйственные поезда, шурфовку кабельных трасс, с предоставлением акта причастным, обеспечение условий безопасности движения при выполнении работ, своевременное уведомление единого руководителя работ об окончании работ, приведения техники в транспортное положение и выводе работников из опасной зоны;
Руководителям работ выполнить мероприятия правил электробезопасности в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 16 апреля 2016 г. N 699р;
ПЧ-16 ПЧ ФИО (далее по графику) - ответственными за безопасность движения поездов, запись в журнал ДУ-46, выдачу предупреждений, ограждение места работ, соблюдение и проверку габарита, выделение сигналистов, своевременное открытие пути перегона для движения;
ЭЧ-4 ЭЧК ФИО (далее по графику) - ответственными за своевременное снятие и подачу напряжения в контактной сети, технический надзор, заземление контактного провода, электробезопасность, сохранность кабельных трасс, проверку положения контактного провода после окончания работ;
ШЧ-3 ШЧЗ ФИО (далее по графику) - ответственными за исправную работу устройств СЦБ, выключение и включение устройств СЦБ в централизацию, сохранность кабельных трасс и устройств СЦБ, за исправное действие двухсторонней автоблокировки в правильном и неправильном направлениях;
РЦС-2 РЦСНС ФИО (далее по графику) - ответственными за связь с местом работ, сохранность кабельных трасс по фронту работ;
ДС Шеломово ФИО, ДС Шексна ФИО (далее по графику) - ответственными за своевременное и безопасное производство маневровых работ, выдачу поездных документов на "окно", своевременный прием и отправление поездов (в том числе хозяйственных), на период "окна" организацию безопасного пропуска поездов.
Обязанности:
ДНЦ, ДС, ДСП Шексна - закрыть на все время "окна" для пропуска всех поездов, кроме хозяйственных 2 путь перегона Шеломово - Шексна с занятием участка 2 пути станции Шексна от сигнала Ч до сигнала Ч2. Пропуск пассажирских и грузовых поездов, снятие ниток грузовых поездов согласно вариантного графика;
ДНЦ, ДС Хемалда, Шеломово, Шексна - обеспечить пропуск четные поезда следуют по станции Шеломово по съезду 6/8, далее по неправильному пути до станции Шексна по съезду 13/11 с выходом на правильный путь;
ДНЦ, ДС, ДСП Вологда-1
- в 15 час. 00 мин. 16 июля 2023 г. отправить до "окна" ЧМЭЗ резервом под ПРСМ-4 N на станцию Лоста (база ПМС-113);
- в 15 час. 40 мин. 16 июля 2023 г. отправить до "окна" 2ТЭ10М + 2ТЭ10М резервом под РВС N 2 на станцию Рыбкино;
и далее описание ниток пропуска хозяйственных поездов или локомотивов согласно ВГДП на "окно"
ДНЦ, ДС, ДСП Шеломово - обеспечить свободность путей для приема техники, обеспечить маневровую работу;
и далее описание приема хозяйственных поездов до "окна", маневровая работа и время отправления поездов на "окно" со станций ограничивающих перегон
ПЧ-16 - установить контроль за организацией работ с соблюдением технологии и качества производства работ, обеспечить соблюдение, проверку габарита и ограждение места работ; проверить наличие рельсовых соединителей по 1 пути перегона Шеломово-Шексна, для исправной работы автоблокировки в правильном и неправильном направлении, установить скорости пропуска поездов по фронту работ, по съездам станций Шеломово, Шексна и по 1 пути перегона Шеломово-Шексна в соответствии с инструкцией, утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 14 декабря 2016 г. N 2540р; обеспечить выдачу предупреждений поездам об ограничении скорости движения (вносится информация км/пк и требуемые скорости) выставить знаки, выделить сигналистов, выделить дефектоскописта для проверки сварных швов. Открытие движения поездов по окончании работ осуществляется со скоростью 25 км/ч, далее после проверки, по состоянию пути, в соответствии с инструкцией, утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 14 декабря 2016 г. N 2540р;
ЭЧ-4 - обеспечить своевременное снятие и подачу напряжения в контактной сети: с 2, 4, 6 путей станции Шексна от сигнала Ч до СП N 15 и с 2 пути перегон Шеломово-Шексна на все время "окна"; электробезопасность, сохранность кабельных трасс, выставить знаки, проверку положения контактного провода после окончания работ;
ШЧ-3 - обеспечить технический надзор за производством работ в зоне нахождения устройств СЦБ, сохранность кабельных коммуникаций; обеспечить устойчивую работу устройств СЦБ, устройств двухсторонней автоблокировки в правильном и неправильном направлении по 1 пути перегона Шексна-Шеломово, проверку двухсторонней автоблокировки в правильном и неправильном направлении по 1 пути перегона Шексна-Шеломово не позднее, чем за 30 минут до начала "окна", отключить напольные устройства, сигнальные точки по фронту работ. Отключить по 2 пути перегона Шеломово-Шексна сигнальные точки N, УКСПС на км/пк и сигнал НМ2 станции Шексна;
ШЧ-3, ДС Хемалда - обеспечить проверку съездов 10/12, 17/19 для приема, отправления и маневровой работы с хозяйственными поездами;
РЦС-2 - обеспечить связь ДНЦ, ДС, ДСП с местом работ обеспечить сохранность кабельных трасс;
ВЧДЭ-7 - выделить осмотрщика-ремонтника вагонов на станции Рыбкино, Хемалда, Шеломово, Шексна, Чебсара, Череповец - 1 для опробования тормозов в составе хозяйственных поездов;
ПМС-113 - обеспечить подготовку и опробование тормозов хозяйственных поездов перед отправлением со станции дислокации путевой техники. Во исполнение телеграммы ЦЗ-ЦДИ от 22 мая 2019 г. N 9125 предоставить работникам ШЧ заключительных 30 минут "окна" после освобождения фронта работ от хозяйственных поездов и восстановления обратной тяговой рельсовой сети для выполнения работ по включению в зависимость и проверки действия устройств СЦБ, выключенных на время проведения "окна";
ТЧЭ-10 - для обеспечения пропуска поездов заданного вагонопотока и соблюдения вариантного графика движения поездов в период производства работ в "окно" организовать присутствие машинистов инструкторов на одной из станций ограничивающей перегон;
ТЧЭ-10, 11 - своевременно выдать тепловозы согласно заявок и наряд-заказа, обеспечить своевременную явку, обеспечить смену локомотивных бригад;
ТЧЭ-6, 10, 11, ТЧ приг., ТЧЭ-22 Окт. - провести инструктаж с локомотивными бригадами о порядке движения поездов по фронту работ, по съездам станций Шеломово, Шексна и по 1 пути перегона Шеломово-Шексна в правильном и неправильном направлениях, в целях реализации установленных скоростей движения; принять меры к исправной работе устройств безопасности КЛУБ, САУТ.
График дежурств ответственных работников:
ПМС-113:
17.07.2023 с 10.40 до 22.40 17.07.2023 ПМСЗ ФИО (32-62-403);
17.07.2023 с 22.40 до 02.40 18.07.2023 ПМСЗ ФИО (32-62-397);
ПЧ-16:
ЭЧ-4:
ШЧ-3:
РЦС-2:
ДЦС-2 ДС Шексна:
ДЦС-2 ДС Шеломово:
Инструктируйте причастных лиц.

НЗ-1	ФИО	
"___" ____________ 2023 г.
N ____________________		
Исп. ФИО., ПМС-113
(914-33) 9-20-55		
Местным адресатам доставлено.	

Приложение N 10
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

ОБРАЗЕЦ ОПЕРАТИВНОГО ПРИКАЗА НЗ-1

Утверждаю: НЗ-1 ________/_____/  Оперативный приказ N __ от _______ 20__ г.
Согласовано: Д ________   НТЭ ____________    Ш _____
             ДИ _______   П ______________
             ДРП ______   РБ <*> _________
Разрешаю предоставить "окна" в сутках "___" _________ 20__ года:

Указанным руководителям и ответственным работникам
обеспечить безопасное производство и своевременное
завершение работ, безопасный пропуск поездов в соответствии
с нормативными документами ОАО "РЖД"

N п/п/N заявки в АС АПВО	Перегон/станция	Путь/Участок пути/стр. перевод	Км, пк	Вид работ	Время "окна"	Продолжительность, час	Руководитель работ/Ответственные работники	Порядок отключения напряжения/выключения устройств СЦБ	Порядок выхода техники	Порядок пропуска поездов	Примечания /особенности работ/	
1/88567	Пушково - Гофрино	II	35 км. пк 5 - 35 км. пк 9	Работа машины ПМГ (тех. номер машины 88025)	14:00 - 17:30	3:30	Рук. работ ПДС
Сиволапов А.Л.	Снятие напряжения к/сети II пути перегона Пушково - Гофрино от вх. св. "Нд"	ПМГ из Гофрино (по заявке рук. работ)	Четные поезда по I неправильному пути по сигналам АЛС	После завершения работ скорость первым двум поездам - 25 км/час	

Сформировано АС АПВО-2 25.05.2023 09:37
--------------------------------
<*> - согласование "окон" большой продолжительности и длительных закрытий.

Примечание: в настоящем образце оперативного приказа указаны минимально необходимые сведения и перечень согласующих его должностных лиц; форма оперативного приказа с учетом местных условий должны устанавливаться в Местной инструкции.

Приложение N 11
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

ОБРАЗЕЦ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА "ОКОН" НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД

                                              УТВЕРЖДАЮ:
                                              Первый заместитель начальника
                                              ___________ железной дороги -
                                              филиала ОАО "РЖД"
                                              _________________________ ФИО
                                              "___" _______________ 202_ г.

ГП1.1 "Сокращенный план-график ремонтно-путевых
и строительно-монтажных работ"

Приложение N 12
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

ОБРАЗЕЦ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА "ОКОН"
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ МЕСЯЦ

                                              УТВЕРЖДАЮ:
                                              Первый заместитель начальника
                                              ___________ железной дороги -
                                              филиала ОАО "РЖД"
                                              _________________________ ФИО
                                              "___" _______________ 202_ г.

Месячный план предоставления "окон" на 202__ года

Приложение N 13
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

Потребность в "окнах" рассчитывается с учетом срока службы и состояния устройств, степени загрязненности атмосферы, агрессивности грунта и грузонапряженности участка.
Норматив годовой потребности в технологических "окнах" на 1 км эксплуатационной длины главных путей контактной сети в однопутном исчислении для технического обслуживания и текущего ремонта устройств контактной сети приведен в таблице 1.

Таблица 1

Контактная сеть	Годовая потребность в "окнах" на 1 км при продолжительности "окна", час	
	1,5	1,7	1,9	2,0	
Постоянного тока	2,6	2,3	2,0	1,8	
Переменного тока	1,9	1,7	1,5	1,4	

"Окна" для работ на контактной сети могут совмещаться с "окнами" для работы других служб. Продолжительность и необходимое количество "окон" устанавливается ежемесячными календарными графиками, утверждаемыми посредством АС АПВО.

Приложение N 14
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

АКТ
инструментальной выверки прохождения трасс кабелей на месте
производства земляных работ (с приложением)
(рекомендуемая форма)

"___" ___________ 20__ года	станция (перегон) __________________	
	_______________________________ ж.д.	

Мы, нижеподписавшиеся, руководитель работ от подрядной организации ______________, представитель ШЧ (ИЧ, ЭЧ, РЦС и др.) - ________________ произвели инструментальную выверку прохождения трасс кабелей СЦБ (силовых, связи и др.), в результате чего установлено:
1. Указывается информация о наличии кабелей и местах прохождения кабельных трасс:
1.1. Фронт производства работ (начальная и конечная ординаты, номер пути);
1.2. Перечень кабелей в кабельной трассе с указанием их марок, емкости и назначения;
1.3. Глубина залегания кабельной трассы и кабельных переходов под путем (от поверхности грунта, нижней подошвы шпалы, рельса и т.п.) с указанием мест (ординат) изменения глубины;
1.4. Расстояние до трассы кабелей, измеряемое от (внутренней грани головки ближнего(их) рельса(ов) при прохождении трассы по обочине пути (в междупутье), концов шпал) с привязкой к путевым объектам, в том числе с указанием мест (ординат) изменения направления трассы;
1.5. Количество вырытых по кабельной трассе шурфов (в т.ч. в местах изменения направления трассы или других сложных местах) с указанием информации о глубине (длине) и расстоянии залегания трассы от выбранной точки отсчета для визуального уточнения прохождения трассы и контроля приближения рабочих органов путевой и автотракторной техники.
2. Указывается информация об обозначении кабельной трассы:
2.1. Установка сигнальных указателей, их количество и расположение;
2.2. Передача сигнальных указателей и откопанных (вскрытых) мест кабельной трассы на ответственность (охрану) исполнителю работ;
2.3. Способы проверки правильности расположения сигнальных вешек и меры по приостановке работ при выявлении несоответствий (несовпадение количества вешек, их переустановка).
3. Запретные меры на производство работ без представителей ШЧ в зоне прохождения кабельной трассы.
4. Меры по обеспечению сохранности (переносу, углублению) кабельных трасс, выполняемые до начала производства работ.
5. Меры по защите кабельных трасс в период производства работ (ограничение приближения (заглубления) к трассам кабелей рабочего органа путевой машины (автотракторной техники), повторное вскрытие шурфов и т.п.).
6. Приложение (обязательное): схема(ы) прохождения трасс кабелей (с указанием глубины и расстояний согласно п. 1 с привязкой к путевым объектам) на __ листе(ах).

Руководитель работ от подрядной организации	(подпись, Ф.И.О.)	
ШНС (ШН, ЭЧК и др.)	(подпись, Ф.И.О.)	

(Акт составлен в ___-х экземплярах, вручен руководителю работ, копии направлены в ШЧ (ИЧ, ЭЧ, РЦС и др.) - ______, ___________ ДИ (НТЭ и др.)

Примечание: на один фронт работ может составляться несколько актов (для каждого участка фронта работ) в зависимости от сложности фактического развития кабельной сети.

Приложение N 15
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
И ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИННЫХ КОМПЛЕКСОВ

1. Средние нормы выработки машинных комплексов при ремонтных работах на перегонах.
1.1. Средние нормы выработки машинных комплексов при замене рельсошпальной решетки:

N
п/п	Наименование работы и состав комплекса	Средняя норма выработки в "окно", м пути	
		При работе в отдельное "окно", продолжительностью, час	При работе в совмещенное "окно", продолжительностью, час	
		6	8	10	12	6	8	10	12	
1.	Замена РШР со срезкой балласта бульдозером и автогрейдером на глубину до 10 см:
ЭЛБ-4/ВПО-С, разборочный поезд с УК-25/9-18, бульдозер, автогрейдер, укладочный поезд с УК-25/9-18, ХДВ, ВПО-3000/ ВПО-С, ВПР-02:									
1.1.	на железобетонных шпалах	1050	1550	2050	2550	800	1300	1800	2300	
1.2.	на деревянных шпалах	1300	1925	2550	3150	1000	1625	2250	2850	
2.	Замена РШР с вырезкой балласта бульдозерами и автогрейдерами среднего или тяжелого типа на глубину до 30 см и балластировкой на один слой:
ЭЛБ-4/ВПО-С, разборочный поезд с УК-25/9-18, пять бульдозеров и три автогрейдера среднего типа или три бульдозера и два автогрейдера тяжелого типа, укладочный поезд с УК-25/9-18, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ	750	1200	1550	1900	-	1000	1350	1700	
3.	Замена РШР с вырезкой балласта бульдозерами и автогрейдерами среднего или тяжелого типа на глубину до 50 см и балластировкой на один слой:
ЭЛБ-4/ВПО-С, разборочный поезд с УК-25/9-18, семь бульдозеров и четыре автогрейдера среднего типа или четыре бульдозера и три автогрейдера тяжелого типа, укладочный поезд с УК-25/9-18, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ	-	900	1250	1600	-	-	1100	1450	
4.	Замена РШР с вырезкой балласта бульдозерами и автогрейдерами среднего и тяжелого типа на глубину до 50 см и балластировкой на два слоя:
ЭЛБ-4/ВПО-С, разборочный поезд с УК-25/9-18, семь бульдозеров и четыре автогрейдера среднего типа или четыре бульдозера и три автогрейдера тяжелого типа, укладочный поезд с УК-25/9-18, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР, ДСП, ПБ	-	-	1075	1400	-	-	925	1250	

1.2. Средние нормы выработки машинных комплексов при работах по капитальному ремонту пути по технологии закрытого перегона:

N
п/п	Наименование работы и состав комплекса	Средняя норма выработки в сутки на "закрытом" перегоне, м пути	
		Глубина очистки (вырезки), см	
		40	50	60	
1.	Замена РШР с очисткой балласта, балластировкой, укладкой бесстыкового пути: ЭЛБ-4/ВПО-С, разборочный поезд с УК-25/9-18, бульдозер, автогрейдер, укладочный поезд с УК-25/9-18, два щебнеочистительных комплекса, ХДВ, ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ХДВ, ВПР-02, ДСП, ПБ, комплекс для укладки бесстыкового пути				
1.1.	с применением двух щебнеочистительных машин:				
1.1.1.	ЩОМ-1200, ЩОМ-1200С, ЩОМ-1200ПУ, РМ-2002; РМ-2012	1760	1450	1240	
1.1.2.	СЧ-1000	1580	1300	1110	
1.1.3.	СЧУ-801	1450	1200	1020	
1.1.4.	СЧУ-800	1400	1160	990	
1.1.5.	ЩОМ-700	1270	1050	-	
1.1.6.	ЩОМ-1600 (работа 2-х секций одной машины)	2280	1880	1610	
1.1.7.	ЩОМ-1400	1930	1590	1360	
1.1.8.	РМ-95	1280	1050	900	
1.1.9.	СЧ-601, РМ-80	1180	970	830	
1.1.10.	СЧ-600	1130	930	800	
1.1.11.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций одной машины)	2970	2450	2100	
2.	Замена РШР с вырезкой балласта, балластировкой, укладкой бесстыкового пути: ЭЛБ-4/ВПО-С, разборочный поезд с УК-25/9-18, бульдозер, автогрейдер, укладочный поезд с УК-25/9-18, щебнеочистительный комплекс, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ, комплекс для укладки бесстыкового пути				
2.1.	с применением двух щебнеочистительных машин:				
2.1.1.	ЩОМ-1200, ЩОМ-1200С, ЩОМ-1200ПУ, РМ-2002; РМ-2012	1580	1300	1110	
2.1.2.	СЧ-1000	1420	1170	990	
2.1.3.	СЧУ-801	1300	1080	920	
2.1.4.	СЧУ-800	1260	1040	890	
2.1.5.	ЩОМ-700	1140	940	-	
2.1.6.	ЩОМ-1600 (работа 2-х секций одной машины)	1810	1520	1320	
2.1.7.	ЩОМ-1400	1730	1430	1220	
2.1.8.	РМ-95	1150	940	810	
2.1.9.	СЧ-601, РМ-80	1060	870	740	
2.1.10.	СЧ-600	1020	840	720	
2.1.11.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций одной машины)	2360	1980	1720	
2.1.12.	АХМ-800R	1580	1300	1110	
3.	Замена РШР с вырезкой балласта бульдозерами и автогрейдерами среднего или тяжелого типа, балластировкой и укладкой бесстыкового пути: ЭЛБ-4/ВПО-С, разборочный поезд с УК-25/9-18, шесть бульдозеров и три автогрейдера среднего типа или три бульдозера и два автогрейдера тяжелого типа, укладочный поезд с УК-25/9-18, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ, комплекс для укладки бесстыкового пути	2130	1870	1680	

1.3. Средние нормы выработки машинных комплексов при реконструкции пути по технологии закрытого перегона:

N
п/п	Наименование работы и состав комплекса	Средняя норма выработки в сутки на "закрытом" перегоне, м пути	
1.	Замена РШР с устройством ПЗС, балластировкой и укладкой бесстыкового пути: ЭЛБ-4/ВПО-С, разборочный поезд с УК-25/9-18, шесть бульдозеров, четыре автогрейдера, думпкарная вертушка, два виброкатка, разборочный поезд с УК-25/9-18 (укладка старых звеньев), ХДВ, ПБ, ЭЛБ-4/ВПО-С, РОМ, ХДВ, ПБ, ЭЛБ-4/ВПО-С, РОМ, разборочный поезд, два автогрейдера, два виброкатка, укладочный поезд с УК-25/9-18, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ, комплекс для укладки бесстыкового пути		
1.1.	С вырезкой балласта землеройной техникой на глубину до 70 см	720	
1.2.	С вырезкой балласта землеройной техникой на глубину до 90 см	610	
2.	Замена РШР с устройством ПЗС, балластировкой и укладкой бесстыкового пути: четыре щебнеочистительных комплекса, ХДВ, ПБ, ЭЛБ-4/ВПО-С, РОМ, ХДВ, ПБ, ЭЛБ-4/ВПО-С, РОМ, разборочный поезд, два автогрейдера, два виброкатка, укладочный поезд с УК-25/9-18, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ, комплекс для укладки бесстыкового пути		
2.1.	С вырезкой балласта на глубину до 70 см с применением четырех щебнеочистительных машин:		
2.1.1.	ЩОМ-1200, ЩОМ-1200С, ЩОМ-1200ПУ, РМ-2002; РМ-2012	750	
2.1.2.	СЧ-1000	670	
2.1.3.	ЩОМ-1400	820	
2.1.4.	СЧУ-801	650	
2.1.5.	СЧУ-800	630	
2.1.6.	ЩОМ-700	570	
2.1.7.	ЩОМ-1600 (работа 2-х секций 2-х машин)	970	
2.1.8.	РМ-95	540	
2.1.9.	СЧ-601, РМ-80	530	
2.1.10.	СЧ-600	510	
2.1.11.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций 2-х машин)	1280	
2.2.	С вырезкой балласта на глубину до 90 см с применением четырех щебнеочистительных машин:		
2.2.1.	ЩОМ-1200, ЩОМ-1200С, ЩОМ-1200ПУ, РМ-2002; РМ-2012	620	
2.2.2.	СЧ-1000	550	
2.2.3.	ЩОМ-1400	680	
2.2.4.	СЧУ-801	530	
2.2.5.	СЧУ-800	520	
2.2.6.	ЩОМ-700	470	
2.2.7.	ЩОМ-1600 (работа 2-х секций 2-х машин)	800	
2.2.8.	РМ-95	450	
2.2.9.	СЧ-601, РМ-80	440	
2.2.10.	СЧ-600	420	
2.2.11.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций 2-х машин)	1060	
2.2.12.	АХМ-800R	750	
3.2.	С вырезкой балласта на глубину до 100 см с применением четырех щебнеочистительных машин:		
3.2.1.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций 2-х машин)	850	

1.4. Средние нормы выработки машинных комплексов для очистки балласта на всех видах ремонтных работ:

N
п/п	Наименование работы и состав комплекса	Средняя норма выработки в окно, м пути	
		При работе в отдельное окно продолжительностью, час	При работе в совмещенное окно продолжительностью, час	
		6	8	10	12	6	8	10	12	
	Глубокая очистка балласта на железобетонных шпалах: щебнеочистительный комплекс-ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ									
1.	на глубину до 30 см									
1.1.	СЧУ-801	670	1010	1370	1710	500	840	1180	1540	
1.2.	СЧУ-800	610	930	1260	1580	460	760	1090	1420	
1.3.	ЩОМ-700	550	830	1120	1410	410	680	970	1260	
1.4.	РМ-95	560	840	1130	1340	390	670	930	1190	
1.5.	СЧ-601, РМ-80	490	740	1000	1250	360	610	870	1130	
1.6.	СЧ-600	460	680	930	1170	340	570	800	1040	
1.7.	РМ-76, ЩОМ-6Б, ОТ-800	410	620	840	1050	300	510	720	940	
1.8.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций)	1840	2810	3780	4750	1360	2330	3300	4260	
2.	на глубину до 40 см									
2.1.	ЩОМ-1200, ЩОМ-1200С, ЩОМ-1200ПУ, РМ-2002; РМ-2012	890	1350	1830	2300	660	1120	1590	2060	
2.2.	СЧ-1000;	800	1210	1640	2070	590	1000	1430	1850	
2.3.	ЩОМ-1400	970	1480	2010	2530	720	1230	1740	2260	
2.4.	ЩОМ-1600 (работа 2-х секций)	1150	1750	2370	2990	850	1450	2060	2670	
2.5.	РМ-95	640	980	1330	1670	480	810	1160	1500	
2.6.	СЧУ-801	510	770	1040	1300	380	640	900	1170	
2.7.	ЩОМ-700	420	630	850	1070	310	520	740	960	
2.8.	СЧ-601, РМ-80	370	560	760	950	270	460	660	860	
2.9.	СЧ-600	350	520	710	890	260	430	610	800	
2.10.	СЧУ-800	470	700	960	1200	350	580	830	1080	
2.11.	РМ-76, ЩОМ-6Б, ОТ-800	310	470	640	800	230	390	550	720	
2.12.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций)	1500	2300	3100	3900	1110	1900	2700	3490	
3.	на глубину до 50 см									
3.1.	ЩОМ-1200, ЩОМ-1200С, ЩОМ-1200ПУ, РМ-2002, РМ-2012, ЩОМ-1400	740	1120	1510	1900	550	930	1310	1700	
3.2.	СЧ-1000	660	1000	1350	1710	490	830	1170	1530	
3.3.	ЩОМ-1600 (работа 2-х секций)	960	1450	1960	2470	710	1200	1700	2210	
3.4.	РМ-95	540	810	1100	1380	400	670	950	1240	
3.5.	СЧУ-801	420	630	860	1070	310	520	740	960	
3.6.	ЩОМ-700	350	520	700	880	260	430	610	790	
3.7.	СЧ-601, РМ-80	300	460	630	780	220	380	540	700	
3.8.	СЧ-600	290	440	590	740	210	360	510	660	
3.9.	СЧУ-800	390	580	790	990	290	480	680	890	
3.10.	РМ-76, ЩОМ-6Б, ОТ-800	260	390	530	660	190	320	460	590	
3.11.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций)	1250	1910	2570	3230	920	1570	2230	2880	
4.	на глубину до 60 см									
4.1.	ЩОМ-1200, ЩОМ-1200С, ЩОМ-1200ПУ, РМ-2002; РМ-2012	620	950	1290	1620	460	790	1120	1460	
4.2.	СЧ-1000	500	760	1040	1310	370	630	900	1180	
4.3.	ЩОМ-1400	680	1040	1410	1780	500	860	1230	1600	
4.4.	ЩОМ-1600 (работа 2-х секций)	800	1230	1670	2100	590	1020	1450	1890	
4.5.	РМ-95	450	690	940	1180	330	570	810	1060	
4.6.	СЧУ-801	360	540	730	910	260	450	640	820	
4.7.	СЧ-601	260	390	530	670	190	320	460	600	
4.8.	СЧ-600	250	370	500	630	180	310	430	560	
4.9.	СЧУ-800	330	500	680	850	240	410	590	760	
4.10.	РМ-76, ЩОМ-6Б, ОТ-800	220	330	450	560	160	270	390	500	
4.11.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций)	1040	1610	2180	2750	770	1340	1900	2470	

1.5. Средние нормы выработки машинных комплексов для замены балласта на всех видах ремонтных работ и текущем содержании пути при балластировке на один слой:

N
п/п	Наименование работы и состав комплекса	Средняя норма выработки в "окно", м пути	
		При работе в отдельное "окно" продолжительностью, час	При работе в совмещенное "окно" продолжительностью, час	
		6	8	10	12	6	8	10	12	
	Замена балласта на железобетонных шпалах:
щебнеочистительный комплекс - ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ									
1.	на глубину до 30 см:									
1.1.	СЧУ-801	540	810	1100	1370	400	670	940	1230	
1.2.	СЧУ-800	490	740	1010	1260	370	610	870	1130	
1.3.	ЩОМ-700	440	660	890	1120	330	540	770	1000	
1.4.	РМ-95	450	670	910	1130	340	550	780	1020	
1.5.	СЧ-601, РМ-80	390	590	800	1000	290	490	690	900	
1.6.	СЧ-600	370	540	740	940	270	450	640	830	
1.7.	РМ-76, ЩОМ-6Б, ОТ-800	330	500	670	840	240	410	580	750	
1.8.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций)	1460	2240	3020	3800	750	1270	1790	2300	
2.	на глубину до 40 см									
2.1.	ЩОМ-1200, ЩОМ-1200С, ЩОМ-1200ПУ, РМ-2002; РМ-2012	710	1080	1460	1840	540	910	1280	1650	
2.2.	СЧ-1000	630	970	1310	1650	480	810	1150	1480	
2.3.	ЩОМ-1400	780	1180	1600	2020	590	1000	1400	1810	
2.4.	ЩОМ-1600 (работа 2-х секций)	920	1400	1890	2390	700	1180	1660	2140	
2.5.	РМ-95	510	780	1060	1340	390	660	930	1200	
2.6.	СЧУ-801	410	620	830	1040	300	510	720	930	
2.7.	ЩОМ-700	330	500	680	850	250	420	590	770	
2.8.	СЧ-601, РМ-80	290	450	610	760	210	370	530	690	
2.9.	СЧ-600	280	410	570	710	210	340	490	640	
2.10.	СЧУ-800	370	560	760	960	280	460	660	860	
2.11.	РМ-76, ЩОМ-6Б, ОТ-800	250	380	510	640	180	310	440	570	
2.12.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций)	1200	1840	2480	3120	740	1250	1750	2260	
3.	на глубину до 50 см:									
3.1.	ЩОМ-1200, ЩОМ-1200С, ЩОМ-1200ПУ, РМ-2002; РМ-2012	590	900	1210	1520	440	740	1040	1530	
3.2.	СЧ-1000	530	810	1080	1360	390	660	930	1370	
3.3.	ЩОМ-1400	640	990	1330	1670	480	810	1140	1680	
3.4.	ЩОМ-1600 (работа 2-х секций)	760	1170	1570	1970	570	960	1350	1980	
3.5.	РМ-95	430	650	880	1100	320	540	750	1110	
3.6.	СЧУ-801	330	510	690	850	250	410	590	770	
3.7.	ЩОМ-700	280	420	560	700	210	350	490	630	
3.8.	СЧ-601, РМ-80	240	370	500	620	180	300	430	560	
3.9.	СЧ-600	230	350	470	590	170	290	410	530	
3.10.	СЧУ-800	310	460	630	790	230	380	540	710	
3.11.	РМ-76, ЩОМ-6Б, ОТ-800	210	310	420	520	150	260	360	470	
3.12.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций)	1020	1560	2104	2640	640	1170	1700	2240	
4.	на глубину до 60 см									
4.1.	ЩОМ-1200, ЩОМ-1200С, ЩОМ-1200ПУ, РМ-2002; РМ-2012	490	760	1030	1300	370	630	900	1170	
4.2.	СЧ-1000	440	680	920	1170	330	560	810	1050	
4.3.	ЩОМ-1400	530	830	1130	1430	400	690	990	1280	
4.4.	ЩОМ-1600 (работа 2-х секций)	630	980	1330	1690	480	810	1170	1520	
4.5.	РМ-95	350	550	750	940	270	450	650	850	
4.6.	СЧУ-801	290	430	580	730	210	360	510	660	
4.7.	СЧ-601	210	310	420	530	150	260	370	480	
4.8.	СЧ-600	200	300	400	500	140	240	340	450	
4.9.	СЧУ-800	260	400	540	680	190	330	470	610	
4.10.	РМ-76, ЩОМ-6Б, ОТ-800	170	260	360	450	130	220	310	400	
4.11.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций)	880	1370	1860	2360	500	860	1220	1590	

1.6. Средние нормы выработки машинных комплексов для замены балласта на всех видах ремонтных работ при балластировке на два слоя:

N
п/п	Наименование работы и состав комплекса	Средняя норма выработки в "окно", м пути	
		При работе в отдельное "окно" продолжительностью, час	При работе в совмещенное "окно" продолжительностью, час	
		6	8	10	12	6	8	10	12	
	Замена балласта на железобетонных шпалах: щебнеочистительный комплекс-ХДВ, ВПО (ВПО-С), ХДВ, ВПО/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ									
1.	на глубину до 30 см:									
1.1.	СЧУ-801	280	440	610	780	200	370	530	700	
1.2.	СЧУ-800	250	400	560	710	190	340	490	640	
1.3.	ЩОМ-700	230	360	500	630	170	300	430	560	
1.4.	РМ-95	240	370	510	640	180	310	440	570	
1.5.	СЧ-601, РМ-80	200	320	450	560	150	270	390	510	
1.6.	СЧ-600	190	290	410	530	140	250	360	470	
1.7.	РМ-76	170	270	370	470	120	220	320	420	
1.8.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций)	930	1510	2100	2680	470	840	1220	1590	
2.	на глубину до 40 см:									
2.1.	ЩОМ-1200, ЩОМ-1200С, ЩОМ-1200ПУ, РМ-2002; РМ-2012	450	740	1020	1300	350	620	900	1170	
2.2.	СЧ-1000	400	660	910	1170	310	550	810	1050	
2.3.	ЩОМ-1400	490	810	1120	1430	380	680	990	1280	
2.4.	ЩОМ-1600 (работа 2-х секций)	580	960	1320	1690	450	800	1170	1520	
2.5.	РМ-95	320	540	740	940	250	450	650	850	
2.6.	СЧУ-801	260	420	580	740	190	350	510	660	
2.7.	ЩОМ-700	200	340	480	610	160	290	420	440	
2.8.	СЧ-601, РМ-80	190	310	430	540	130	250	370	490	
2.9.	СЧ-600	180	290	400	500	120	230	340	450	
2.10.	СЧУ-800	230	380	530	680	180	320	460	600	
2.11.	РМ-76, ЩОМ-6Б, ОТ-800	160	260	360	460	110	210	310	410	
2.12.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций)	750	1230	1720	2200	450	810	1170	1530	
3.	на глубину до 50 см:									
3.1.	ЩОМ-1200, ЩОМ-1200С, ЩОМ-1200ПУ, РМ-2002; РМ-2012	380	620	850	1080	280	510	740	1070	
3.2.	СЧ-1000	340	550	760	970	250	450	660	960	
3.3.	ЩОМ-1400	410	680	930	1180	300	560	810	1170	
3.4.	ЩОМ-1600 (работа 2-х секций)	490	800	1100	1400	360	660	960	1390	
3.5.	РМ-95	270	450	620	780	200	370	540	780	
3.6.	СЧУ-801	210	350	490	620	160	280	410	540	
3.7.	ЩОМ-700	180	290	390	490	130	240	340	440	
3.8.	СЧ-601, РМ-80	150	250	350	440	110	200	300	400	
3.9.	СЧ-600	150	240	330	110		200	290	380	
3.10.	СЧУ-800	200	310	440	560	150	260	380	500	
3.11.	РМ-76, ЩОМ-6Б, ОТ-800	130	210	290	370	100	180	250	330	
3.12.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций)	640	1030	1430	1830	360	710	1050	1400	
4.	на глубину до 60 см:									
4.1.	ЩОМ-1200, ЩОМ-1200С, ЩОМ-1200ПУ, РМ-2002; РМ-2012	320	520	720	920	240	430	630	830	
4.2.	СЧ-1000	280	460	640	820	210	380	560	740	
4.3.	ЩОМ-1400	350	570	790	1010	260	470	690	910	
4.4.	ЩОМ-1600 (работа 2-х секций)	410	670	930	1190	310	550	810	1070	
4.5.	РМ-95	230	370	520	670	170	310	450	600	
4.6.	СЧУ-801	190	300	410	520	130	250	360	470	
4.7.	СЧ-601	130	210	290	370	100	180	260	340	
4.8.	СЧ-600	130	210	280	350	90	160	240	320	
4.9.	СЧУ-800	170	280	380	480	120	230	330	430	
4.10.	РМ-76, ЩОМ-6Б, ОТ-800	110	180	250	320	80	150	220	280	
4.11.	ЩОМ-2000 (работа 2-х секций)	530	870	1210	1550	310	570	860	1080	

1.7. Средние нормы выработки машинных комплексов при балластировке и выправке пути на всех видах ремонтных работ и при текущем содержании пути:

N
п/п	Наименование работы и состав комплекса	Средняя норма выработки в "окно", м пути	
		При работе в отдельное "окно" продолжительностью, час	При работе в совмещенное "окно" продолжительностью, час	
		4	6	8	10	12	4	6	8	10	12	
1.	Балластировка и выправка пути:											
1.1.	ХДВ, ВПО-3000/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ	1620	2700	3770	4850	5920	1080	2160	3230	4310	5390	
1.2.	ХДВ, ВПО-3000/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ	1020	1550	2200	2800	3400	720	1300	1900	2500	3100	
2.	Подъемка и выправка пути:
ХДВ, ВПО-3000/ВПО-С, ДСП											
2.1.	с подъемкой до 10 см	1830	2920	4020	5120	6220	1280	2380	3470	4570	5670	
2.2.	с подъемкой до 15 см	1810	2890	3980	5060	6150	1260	2350	3430	4520	5600	
3.	Подъемка до 10 см и выправка пути: ХДВ, ДСП, ПБ, выправочная машина циклического действия, с применением одной из машин:											
3.1.	ВПР-02, ВПР-02М	820	1350	1900	2450	2900	560	1100	1550	2000	2450	
3.2.	Дуоматик 09-32	1450	2400	3300	4200	5100	1000	1950	2850	3750	4650	
3.3.	ВПРС-05	810	1310	1810	2320	2820	560	1060	1560	2070	2570	
3.4.	ПМА-1	1250	2150	2900	3650	4400	1100	1900	2600	3300	4000	
3.5.	Дуоматик 09-3Х	1650	2800	3850	4900	5950	1240	2340	3440	4540	5440	
3.6.	Дуоматик 09-4Х	2230	3780	5200	6600	8000	1650	3150	4650	6150	7300	
4.	Выправка пути в плане и профиле с подъемкой и сдвижкой до 50 мм, с постановкой пути в проектное положение, в том числе по реперным отметкам с обеспечением совпадения начал переходных и круговых кривых по повышению и положению пути в плане и соблюдением норм уклонов отвода возвышения:
ХДВ, ДСП, ПБ, выправочные машины циклического действия											
4.1.	По фиксированным точкам, с применением одной из машин:											
4.1.1.	Дуоматик 09-32	2000	3400	4650	5900	7150	1500	2900	4100	5300	6500	
4.1.2.	Дуоматик 09-3Х	2300	3950	5400	6850	8300	1700	3250	4700	6150	7600	
4.1.3.	Дуоматик 09-4Х	3100	5200	7200	9200	11200	2100	4200	6200	8200	10200	
4.2.	С предварительной измерительной поездкой с применением одной из машин:											
4.2.1.	ВПР-02, ВПР-02М	820	1500	2150	2800	3450	630	1250	1750	2250	2750	
4.2.2.	Дуоматик 09-32	1600	2700	3700	4700	5700	1100	2200	3200	4200	5200	
4.2.3.	ВПРС-05	900	1400	2000	2600	3200	620	1200	1750	2300	2850	
4.2.4.	ПМА-1	1400	2400	3250	4100	4950	1230	2100	2900	3700	4500	
4.2.5.	Дуоматик 09-3Х	1850	3150	4300	4450	6600	1400	2600	3750	4900	6050	
4.2.6.	Дуоматик 09-4Х	2500	4250	5800	7350	8900	1875	3550	5100	6650	7800	

1.8. Средние нормы выработки машинных комплексов для замены рельсовых плетей инвентарными рельсами и для замены инвентарных рельсов рельсовыми плетями:

N
п/п	Наименование работы и состав комплекса	Средняя норма выработки в "окно", м пути/час "окна"	
		При работе в отдельное "окно" продолжительностью, час	При работе в совмещенное "окно" продолжительностью, час	
		4	6	8	10	12	4	6	8	10	12	
1.	Замена рельсовых плетей инвентарными рельсами путеукладочным краном УК-25/9-18:											
1.1.	с применением на раскреплении и закреплении рельсов ручного и механического инструментов	75	87	92	93	95	48	68	79	82	86	
1.2.	с применением на раскреплении и закреплении рельсов: гайковертов ПМГ, УК-25/9-18, ПМГ	70	83	90	90	93	42	65	76	80	84	
2.	Замена инвентарных рельсов сварными рельсовыми плетями											
2.1.	с применением на раскреплении и закреплении рельсов ручного и механического инструментов	110	127	129	136	140	70	100	115	120	127	
2.2.	с применением на раскреплении и закреплении рельсов: гайковертов ПМГ, УК-25/9-18, ПМГ	102	122	125	133	138	62	95	105	116	124	
3.	Замена инвентарных рельсов сварными рельсовыми плетями с вводом в расчетную температуру закрепления с применением натяжного устройства											
3.1.	с применением на раскреплении и закреплении рельсов ручного и механического инструментов			42	61	70			25	47	62	
3.2.	с применением на раскреплении и закреплении рельсов: гайковертов ПМГ, УК-25/9-18, ПМГ			38	53	62			21	42	53	
4.	Замена инвентарных рельсов рельсовыми плетями с вводом в расчетную температуру закрепления и сваркой с применением натяжного устройства											
4.1.	с применением на раскреплении и закреплении рельсов ручного и механического инструментов			38	57	68			21	44	59	
4.2.	с применением на раскреплении и закреплении рельсов: гайковертов ПМГ, УК-25/9-18, ПМГ			34	50	60			25	380	50	
5.	Замена инвентарных рельсов рельсовыми плетями с вводом в расчетную температуру закрепления и сваркой с применением нагревательного устройства											
5.1.	с применением на раскреплении и закреплении рельсов ручного и механического инструментов	68	98	109	115	122	-	72	94	103	113	
5.2.	с применением на раскреплении и закреплении рельсов: гайковертов ПМГ, УК-25/9-18, ПМГ	50	86	99	107	116	-	60	85	95	106	
2 стыка нити (один методом подтягивания, второй методом изгиба)	
6.	Сварка рельсовых плетей машиной ПРСМ, шт.	1	2	3	4	5	-	1	2	3	4	

1.9. Средние нормы выработки машинных комплексов для срезки балласта с обочины, очистки кюветов, нарезки новых кюветов, устройства траншей под лотки:

N
п/п	Наименование работы и состав комплекса	Средние нормы выработки в "окно", м пути	
		При работе в отдельное "окно"
продолжительностью, час	При работе в совмещенное "окно"
продолжительностью, час	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Очистка заработанных кюветов при работе во влажных грунтах с машинами																							
1.1.	СЗП-600, СЗП-600Р, КТМ, МКТ	141	230	400	570	740	910	1080	1250	1420	1590	1760	38	125	290	455	620	785	950	1115	1280	1445	1610	
1.2.	МНК	124	210	373	537	700	863	1027	1190	1353	1517	1680	16	100	260	420	580	740	900	1060	1220	1380	1540	
1.3.	МКТ-1П	154	250	433	617	800	983	1167	1350	1533	1717	1900	41	135	313	492	670	848	1027	1205	1383	1562	1740	
1.4.	КОМ	151	245	423	602	780	958	1137	1315	1493	1672	1850	33	125	300	475	650	825	1000	1175	1350	1525	1700	
1.5.	МКТ-500	168	280	493	707	920	1133	1347	1560	1773	1987	2200	36	145	353	562	770	978	1187	1395	1603	1812	2020	
2.	Нарезка новых кюветов при работе во влажных грунтах с машинами																							
2.1.	СЗП-600, СЗП-600Р, КТМ, МКТ	56	95	170	245	320	395	470	545	620	695	770	12	50	123	197	270	343	417	490	563	637	710	
2.2.	МНК	47	85	157	228	300	372	443	515	587	658	730	3	40	110	180	250	320	390	460	530	600	670	
2.3.	МКТ-1П	68	110	190	270	350	430	510	590	670	750	830	14	55	133	212	290	368	447	525	603	682	760	
2.4.	КОМ	70	110	187	263	340	417	493	570	647	723	800	16	55	130	205	280	355	430	505	580	655	730	
2.5.	МКТ-500	71	120	213	307	400	493	587	680	773	867	960	7	55	147	238	330	422	513	605	697	788	880	
3.	Устройство траншей для укладки лотков при работе во влажных грунтах с машинами																							
3.1.	На глубину 95 см																							
3.1.1.	СЗП-600, СЗП-600Р, КТМ, МКТ	70	115	200	285	370	455	540	625	710	795	880	16	60	143	227	310	393	477	560	643	727	810	
3.1.2.	МНК	68	110	190	270	350	430	510	590	670	750	830	14	55	133	212	290	368	447	525	603	682	760	
3.1.3.	МКТ-1П	77	125	217	308	400	492	583	675	767	858	950	13	60	150	240	330	420	510	600	690	780	870	
3.1.4.	КОМ	73	120	210	300	390	480	570	660	750	840	930	25	70	157	243	330	417	503	590	677	763	850	
3.1.5.	МКТ-500	84	140	247	353	460	567	673	780	887	993	1100	10	65	170	275	380	485	590	695	800	905	1010	
3.2.	На глубину 120 см:																							
3.2.1.	СЗП-600, СЗП-600Р, КТМ, МКТ	47	80	143	207	270	333	397	460	523	587	650	13	45	107	168	230	292	353	415	477	538	600	
3.2.2.	МНК	49	80	140	200	260	320	380	440	500	560	620	14	45	103	162	220	278	337	395	453	512	570	
3.2.3.	МКТ-1П	59	95	163	232	300	368	437	505	573	642	710	15	50	117	183	250	317	383	450	517	583	650	
3.2.4.	КОМ	55	90	157	223	290	357	423	490	557	623	690	11	45	110	175	240	305	370	435	500	565	630	
3.2.5.	МКТ-500	58	100	180	260	340	420	500	580	660	740	820	4	45	123	202	280	358	437	515	593	672	750	
3.3.	На глубину 145 см																							
3.3.1.	СЗП-600, СЗП-600Р, КТМ, МКТ	41	65	110	155	200	245	290	335	380	425	470	17	40	83	127	170	213	257	300	343	387	430	
3.3.2.	МНК	37	60	103	147	190	233	277	320	363	407	450	13	35	77	118	160	202	243	285	327	368	410	
3.3.3.	МКТ-1П	34	60	110	160	210	260	310	360	410	460	510	10	35	83	132	180	228	277	325	373	422	470	
3.3.4.	КОМ	30	55	103	152	200	248	297	345	393	442	490	21	45	90	135	180	225	270	315	360	405	450	
3.3.5.	МКТ-500	50	80	137	193	250	307	363	420	477	533	590	16	45	100	155	210	265	320	375	430	485	540	
4.	Устройство траншей для укладки дренажей при работе во влажных грунтах машинами																							
4.1.	СЗП-600, СЗП-600Р, КТМ, МКТ	43	75	137	198	260	322	383	445	507	568	630	9	40	100	160	220	280	340	400	460	520	580	
4.2.	МНК	44	75	133	192	250	308	367	425	483	542	600	10	40	97	153	210	267	323	380	437	493	550	
4.3.	МКТ-1П	45	80	147	213	280	347	413	480	547	613	680	1	35	100	165	230	295	360	425	490	555	620	
4.4.	КОМ	41	75	140	205	270	335	400	465	530	595	660	7	40	103	167	230	293	357	420	483	547	610	
4.5.	МКТ-500	60	100	177	253	330	407	483	560	637	713	790	22	60	133	207	280	353	427	500	573	647	720	
5.	Уборка лишнего балласта с обочин земляного полотна с машинами																							
5.1.	СЗП-600, СЗП-600Р, КТМ, МКТ, МНК, МКТ-Ш, КОМ, МКТ-500	269	440	767	1093	1420	1747	2073	2400	2727	3053	3380	52	220	540	860	1180	1500	1820	2140	2460	2780	3100	

2. Средние нормы выработки машинных комплексов при ремонтных работах на станциях
2.1. Средние нормы выработки машинных комплексов при замене рельсошпальной решетки при реконструкции и капитальном ремонте пути на станции (с погрузкой вырезанного балласта в подвижной состав):

N
п/п	Наименование работы и состав комплекса	Средняя норма выработки в сутки на "закрытом" пути, м пути	
1.	Замена РШР с устройством ПЗС и балластировкой на один слой: ЭЛБ-4, разборочный поезд с УК-25/9-18, четыре бульдозера, два автогрейдера, три экскаватора, думпкарная вертушка, два виброкатка, разборочный поезд с УК-25/9-18 (укладка старых звеньев), ХДВ, ПБ, ЭЛБ-4/ВПО-С, РОМ, ХДВ, ПБ, ЭЛБ-4/ВПО-С, РОМ, разборочный поезд, два автогрейдера, два виброкатка, укладочный поезд с УК-25/9-18, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ		
1.1.	с вырезкой балласта землеройной техникой на глубину до 70 см и погрузкой в думпкары экскаваторами с емкостью ковша 1,25 куб. м	450	
1.2.	с вырезкой балласта землеройной техникой на глубину до 90 см и погрузкой в думпкары экскаваторами с емкостью ковша 1,25 куб. м	390	
2.	Замена РШР с устройством ПЗС и балластировкой на один слой: ЭЛБ-4/ВПО-С, разборочный поезд с УК-25/9-18, четыре бульдозера, два автогрейдера, СЗП (КТМ, МНК, КОМ, МКТ), два виброкатка, разборочный поезд с УК-25/9-18 (укладка старых звеньев), ХДВ, ПБ, ЭЛБ-4/ВПО-С, РОМ, ХДВ, ПБ, ЭЛБ-4/ВПО-С, РОМ, разборочный поезд, два автогрейдера, два виброкатка, укладочный поезд с УК-25/9-18, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ		
2.1.	с вырезкой балласта землеройной техникой на глубину до 70 см и погрузкой балласта в состав СЗ-6/240 с применением:		
2.1.1.	СЗП-600	490	
2.1.2.	КТМ, МКТ	600	
2.2.	с вырезкой балласта землеройной техникой на глубину до 90 см и погрузкой балласта в состав СЗ-6/240 с применением:		
2.2.1.	СЗП-600	420	
2.2.2.	КТМ, МКТ	530	
3.	Замена РШР со срезкой балласта бульдозерами и автогрейдерами среднего типа на глубину до 30 см: ЭЛБ-4/ВПО-С, разборочный поезд с УК-25/9-18, два бульдозера, два автогрейдера, два экскаватора, думпкарная вертушка, укладочный поезд с УК-25/9-18, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ		
3.1.	с погрузкой в думпкары экскаваторами с емкостью ковша 1,25 куб. м	1080	
4.	Замена РШР со срезкой балласта бульдозерами и автогрейдерами среднего типа на глубину до 30 см: ЭЛБ-4/ВПО-С, разборочный поезд с УК-25/9-18, два бульдозера, два автогрейдера, СЗП (КТМ, МНК, КОМ, МКТ) с составами универсальных вагонов СЗ-6/240, укладочный поезд с УК-25/9-18, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ		
4.1.	с погрузкой балласта в состав СЗ-6/240 с применением:		
4.1.1.	СЗП-600	1250	
4.1.2.	КТМ, МКТ	1560	
5.	Замена РШР с вырезкой балласта машиной СЗП (КТМ, МНК, КОМ, МКТ) на глубину до 30 см: ЭЛБ-4/ВПО-С, разборочный поезд с УК-25/9-18, СЗП (КТМ, МНК, КОМ, МКТ), два автогрейдера, укладочный поезд с УК-25/9-18, ХДВ, ЭЛБ-4/ВПО-С, ВПР-02, ДСП, ПБ		
5.1.	с погрузкой балласта в состав СЗ-6/240 с применением:		
5.1.1.	СЗП-600	710	
5.1.2.	КТМ, МКТ	940	

2.2. Средние нормы выработки машинных комплексов для смены стрелочных переводов на железобетонных брусьях:

N
п/п	Наименование работы и состав комплекса	Средние нормы выработки для различных марок стрелочных переводов	
		1/9, 1/11	1/18, 1/22	1/9 двойной перекрестный	
		объем работ	продолжительность окна, ч	объем работ	продолжительность окна, ч	объем работ	продолжительность окна, ч	
1.	с перетяжкой блоков по платформам со срезкой балласта на глубину до 10 см (кран, бульдозер или автогрейдер, х/д, ВПРС-02, ДСП)							
1.1.	УК-25 СП	1 стр. перевод с примыкающими участками	7,0	1 стр. перевод с примыкающими участками	9,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	8,0	
1.2.	УК-25/28СП	1 стр. перевод с примыкающими участками	6,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	7,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	7,0	
1.3.	ЕДК-500/ТС	1 стр. перевод с примыкающими участками	9,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	13,0	1 стр. перевод с примыкающими участками	10,0	
2.	с подачей и уборкой платформ с блоками по одной штуке со срезкой балласта на глубину до 10 см (кран, бульдозер или автогрейдер, х/д, ВПРС-02, ДСП)							
2.1.	УК-25 СП	1 стр. перевод с примыкающими участками	8,0	1 стр. перевод с примыкающими участками	10,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	9,5	
2.2.	УК-25/28СП	1 стр. перевод с примыкающими участками	7,0	1 стр. перевод с примыкающими участками	9,0	1 стр. перевод с примыкающими участками	7,5	
2.3.	ЕДК-500/ТС	1 стр. перевод с примыкающими участками	10,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	15,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	11,5	
3.	с перетяжкой блоков по платформам с вырезкой балласта на глубину до 40 см (кран, бульдозер, кран КДЭ с грейфером, думпкары, х/д, ВПРС-02, ДСП)							
3.1.	УК-25 СП	1 стр. перевод с примыкающими участками	10,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	13,0	1 стр. перевод с примыкающими участками	12,0	
3.2.	УК-25/28СП	1 стр. перевод с примыкающими участками	10,0	1 стр. перевод с примыкающими участками	11,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	11,0	
3.3.	ЕДК-500/ТС	1 стр. перевод с примыкающими участками	13,0	1 стр. перевод с примыкающими участками	17,0	1 стр. перевод с примыкающими участками	14,0	
4.	с подачей и уборкой платформ с блоками по одной штуке со срезкой балласта на глубину до 40 см (кран, бульдозер, кран КДЭ с грейфером, думпкары, х/д, ВПРС-02, ДСП)							
4.1.	УК-25СП	1 стр. перевод с примыкающими участками	11,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	14,0	1 стр. перевод с примыкающими участками	13,5	
4.2.	УК-25/28СП	1 стр. перевод с примыкающими участками	10,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	12,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	11,5	
4.3.	ЕДК-500/ТС	1 стр. перевод с примыкающими участками	14,0	1 стр. перевод с примыкающими участками	17,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	15,0	

2.3. Средние нормы выработки машинных комплексов для глубокой очистки щебеночного балласта на стрелочных переводах:

N
п/п	Наименование работы и состав комплекса	Средние нормы выработки для различных марок стрелочных переводов	
		1/9, 1/11	1/18, 1/22	1/9 двойной перекрестный	
		объем работ	продолжительность окна, ч	объем работ	продолжительность окна, ч	объем работ	продолжительность окна, ч	
1.	Щебнеочистительные машины РМ-80, РМ-95 (РМ-80, РМ-95, состав для засорителей СЗ-240-6, ХДВ, ВПРС-02, ДСП)							
1.1.	На глубину очистки 40 см без разделительного слоя	1 стр. перевод с примыкающими участками	5,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	7,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	6,0	
1.2.	На глубину очистки 45 см с укладкой геотекстиля	1 стр. перевод с примыкающими участками	5,8	1 стр. перевод с примыкающими участками	8,0	1 стр. перевод с примыкающими участками	6,3	
1.3.	На глубину очистки 50 см с укладкой пенополистирола	1 стр. перевод с примыкающими участками	6,0	1 стр. перевод с примыкающими участками	8,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	6,5	

2.4. Средние нормы выработки машинных комплексов для смены металлических частей стрелочных переводов:

N
п/п	Наименование работы и состав комплекса	Средние нормы выработки для различных марок стрелочных переводов	
		1/9, 1/11	1/18, 1/22	1/9 двойной перекрестный	
		объем работ	продолжительность окна, ч	объем работ	продолжительность окна, ч	объем работ	продолжительность окна, ч	
1.	С применением мотовозов МПТ-4, МПТ-6 или грузовых дрезин ДГКу, АТС	1 стр. перевод с примыкающими участками	3,5	1 стр. перевод с примыкающими участками	7,0	1 стр. перевод с примыкающими участками	5,3	

2.5. Средние нормы выработки машинных комплексов при балластировке и выправке стрелочных переводов на станции на всех видах ремонтных работ и при текущем содержании пути:

N
п/п	Наименование работы и состав комплекса	Продолжительность окна для работы на одном стрелочном переводе, мин	
1.	Подъемка до 10 см и выправка стрелочного перевода - ХДВ, выправочная машина циклического действия, ДСП-С (кроме ВПРС-05) с применением одной из машин:		
1.1.	ВПРС-02	210	
1.2.	ВПРС-05	205	
1.3.	Унимат 08-32	210	
2.	Подъемка до 10 см и выправка стрелочного перевода - ХДВ, выправочная машина циклического действия, ДСП-С с измерительной поездкой с применением одной из машин:		
2.1.	ВПРС-02	220	
2.2.	Унимат 08-32	280	

Приложение N 16
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

Доклад о готовности к проведению ремонтно-путевых работ
(рекомендуемая форма)

_____________ дистанция сигнализации, централизации и блокировки (инфраструктуры) к закрытию _______ пути перегона _________ на участке ___________ для производства работ по (вид ремонта) _________ - готова.
1. Временный путевой пост установлен на ординате __________ со стороны ___________ пути и оборудован стрелочными съездами __________.
2. Для электроснабжения временного путевого поста предусмотрены ________________ фидера, постовая аккумуляторная батарея 24 В. Напряжение основного и резервного источника питания _______________ требованиям ПТЭ. Селективность защиты (обеспечена/не обеспечена) ______________.
3. Включение временного путевого поста в работу с заполнением проверочных таблиц выполнено (телеграмма Адрес 14 N ______ от __________) или запланировано на _____________. Технология переключения временного путевого поста согласована и утверждена НЗТер ______________ дата ______________.
4. Временный путевой пост оборудован устройствами __________ для мониторинга работы устройств СЦБ и действий дежурного персонала. Аварийно-восстановительный запас аппаратуры и средств измерений имеется в полном объеме.
5. Разработаны и утверждены графики дежурств электромехаников СЦБ и руководителей дистанции (дата ________). Устройства СЦБ будут обслуживаться согласно типовым технологическим картам по графику, разработанному для устройств временного путевого поста. Техническая и учетная документация имеется в полном объеме. Местная инструкция по пользованию устройствами СЦБ утверждена ____________ и выдана причастным.
6. Проведена внеочередная аттестация персонала, закрепленного за обслуживанием устройств временного путевого поста в период с ___________ по __________ в количестве _______ человек, согласно требованиям распоряжения ОАО "РЖД" от 17.01.2015 N 66р "О проведении аттестации работников, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО "РЖД".
7. Временный путевой пост оборудован местом для круглосуточного пребывания дежурного персонала.
8. Внеплановая проверка устройств СЦБ на оставшемся для движения поездов ________ пути перегона ______________, ограничивающих перегон станциях __________ и ___________, а также на прилегающих к ним перегонах __________ и _______________ (сигнальные установки, рельсовые цепи, электропривода, входные и выходные светофоры, электропитание и защита от перенапряжений) проведена с __________ по ___________. Все выявленные замечания по СЦБ устранены.
9. Проведен комиссионный месячный осмотр устройств СЦБ на прилегающих станциях ____________ и _____________, устранение выявленных замечаний запланировано до ___________ (выявленные замечания устранены). Отсутствующих приварных соединителей нет (необходимо приварить ___________ соединителей в срок до ____________).
10. Схема канализации обратного тягового тока на период ремонтных работ составлена и утверждена ___________________ (дата и кем). Дополнительно для обеспечения канализации обратного тягового тока установлены междупутные соединители в количестве ______ шт.
11. Проверка двухсторонней автоблокировки: в основном и вспомогательном режимах на перегонах ________________ выполнена (запланирована) на ____________. Проверка мобильными средствами диагностики действия устройств СЦБ по _______ пути в неправильном направлении указанного перегона проведена ______________. Замечаний не обнаружено (выявленные замечания устранены).
12. Сигнализация светофоров на станции ______________ при отправлении поездов по _______ неправильному железнодорожному пути перегона __________________ соответствует требованиям приложения N 1 к ПТЭ. Кодирование маршрутов приема и отправления на неправильный путь проверено __________________.
13. На период проведения ремонтно-путевых работ на участке _____________ запланировано выключение из эксплуатации устройств: УКСПС на ___________ КТСМ _____________ САУТ ________________.
14. Разработаны и утверждены графики дежурств на временном путевом посту электромехаников СЦБ и руководителей дистанции, а также обеспечено присутствие электромехаников СЦБ на станции(ях) _________________. За временным путевым постом закреплен автомобиль ___________________.
15. Движение автотранспорта по перегону будет производиться согласно утвержденных план-карт технологических проездов.
16. Сформированы рабочие бригады для отключения напольного оборудования СЦБ, сопровождению работы путевых машин, подключению и проверки работы устройств СЦБ по окончании ремонтных работ.
17. Для обеспечения сохранности кабельных коммуникаций проведена их трассировка, разметка трассы акт инструментальной выверки от _________________. Выноска кабеля (требуется - где и объем/не требуется) ________________. На перегоне ___________________ имеется __________ переходов кабеля под ____________ путем, шурфление и вскрытие которых произведено (будет произведено) в период с __________ по ____________. Акт инструментальной проверки от ________________.
18. На станции ______________ имеется ______________ переходов кабеля под ж.д. путями, шурфление и вскрытие которых произведено (будет произведено) в период с ___________ по _____________. Акт инструментальной проверки от _________________.
19. Работники ______________ (производителя работ) обеспечены исполнительными кабельными планами указанного перегона.
20. ППР по ___________________________ (наименование) в ШЧ - _______________ согласован. Исполнителем работ _________________ получен акт-допуск N ______________ от _______________ за подписью замНГТер __________________.
21. Для сохранности вскрытых кабелей СЦБ и демонтированных устройств в адрес НОР дана (будет направлена) соответствующая телеграмма от _______________.
22. На закрытом перегоне во время проведения работ по ремонту пути предусмотрено _____________________________ (дополнительные работы, перечислить).
Устройства СЦБ к проведению ремонтно-путевых работ в режиме закрытого перегона готовы.
Примечание: исходя из местных условий, объема и вида ремонтных работ и т.п. доклад о готовности к проведению ремонтно-путевых работ может быть изменен.

    Начальник дистанции   ___________________________

исп. __________________
тел. __________________

Приложение N 17
к Инструкции о порядке
планирования, предоставления,
использования и учета
"окон" для работ
на инфраструктуре ОАО "РЖД"

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ДИРЕКТИВНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
НА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОАО "РЖД"

N
п/п	Наименование работ	
1	смена рельсовых плетей бесстыкового пути	
2	работа щебнеочистительных, кюветоочистительных, выправочных машин	
3	работа рельсошлифовальных поездов	
4	алюминотермитная и электроконтактая сварка стыков	
5	закрепление пути моторными гайковертами (ПМГ)	
6	укладка стрелочных переводов	
7	замена замедлителя	
8	замена питающей установки